문서번호	시설보수과-4387
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	성동도로사업소장
이경수	최태석	박춘배	12/04 이종엽
협 조

『2015년 도로시설물 세척용역』 설계변경 검토 보고

2015. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

『2015년 도로시설물 세척용역』 설계변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『2015년 도로시설물 세척 용역』의 세척물량 변경

및 작업 변경사항에 따른 설계변경을 시행하고자 함.

1		용 역 개 요

용 역 명 : 『2015 도로시설물 세척 용역』

용역기간 : 2015년 3월 10일  ~ 2015년 12월 31일

용역 개요 : 세척 대상 시설물 : 18개소

- 일반교량(4) : 황학교, 무학교, 두물다리(청), 고산자교

- 터    널(3) : 금호터널, 옥수터널, 무지개터널

- 지하차도(11) : 동일로, 능산, 신내, 신답, 성동, 응봉, 서울숲1,2,

답십리굴다리, 군자교동측, 중랑교

도 급 액 : 193,549,760천원

도 급 자 : ㈜가온에이치알  대표 최원호

2		보 고 내 용

설계변경 사유

○ 시설물별 세척물량 변동 : A=299,944㎡ → 292,043㎡

○ 용역비 변경 : 없음(내역변경)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총 용 역 비		193,549,760	193,549,760
도급비	공 급 가 액	175,954,328	175,954,328
	부 가 가 치 세	17,595,432	17,595,432
	도 급 비	193,549,760	193,549,760

예산과목

○ 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계),  도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수,             시설비 및 부대비, 시설비(183,980,760원)

○ 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계),  도로시설물(교량) 일상유지보수, 시설비 및 부대비,             시설비(9,569,000원)

3		향 후 계 획

상기 내용과 같이 세척물량 증감에 따라  『2015년 도로시설물 세척 용역』을 설계변경 후          용역 준공코자 함.

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.