문서번호	방재시설부-16403
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	12/04 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

정기안전점검 및 초기점검시행 검토보고

2015. 12

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

정기안전점검 및 초기점검시행 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 서울시시설관리공단으로부터 정기점검 및 초기점검 시행에 따른 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 12. 31

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 7,468백만원

실정보고 및 검토내용

❍ 보고내용

- 공릉2빗물펌프장 신설공사 현장은 지하 10m 이상을 굴착하는 현장이며, 국가하천의 수문(1종시설물)과 공공하수처리시설(2종시설물)을 건설하는 현장으로 건설기술진흥법에 따라 정기안전점검 및 초기점검을 실시하여야 하는 현장에 해당되며

- 건설기술진흥법 시행령 제 100조(안점검검의 시기, 방법등) 제 2항에 따라 전문기관에 의뢰하여 시행토록 되어 있음

- 관련규정 : 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리), 같은법 시행령 제98조              (건설공사의 안전관리), 제100조(안전점검의 시기, 방법 등)

건설기술진흥법 시행령

제100조(안전점검의 시기·방법 등)

① 건설업자와 주택건설등록업자는 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체안전점검을 하고, 제2항에 따른 기관에 의뢰하여 다음 각 호의 기준에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 하여야 한다.

1. 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 할 것

② 제1항 각 호의 구분에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 건설업자나 주택건설등록업자로부터 의뢰받아 실시할 수 있는 기관(이하 "건설안전점검기관"이라 한다)은 다음 각 호의 기관으로 한다. 다만, 그 기관이 해당 건설공사의 발주자인 경우에는 정기안전점검만을 할 수 있다.

1. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제9조에 따라 등록한 안전진단전문기관

2. 한국시설안전공단

- 안전점검비용

구분	SQ엔지니어링	한국건설 방재연구원	대한이엔씨	비고
정기 및 초기안전점검	22,200,000	23,000,000	22,910,000
적용	ㅇ
낙찰률적용	19,005,198

감리검토내용

❍ 당 현장은 지하 10m 이상을 굴착하는 펌프장 신설 공사현장으로 정기안전점검 및 초기점검 대상 현장이므로 건설기술진흥법에 의거하여 정기안전점검 및 초기점검을 시행해야 하는 것으로 판단됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 실정보고 내역서 1부.

3. 관련법규 1부. 끝.