문서번호	시설과-7595
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	추진반장	관리부장	서울대공원장
김용주	유인행	심상원	12/04 송천헌
협 조
	시설과장		공헌구
	조경과장		代김흔진
	동물기획과장		이종혁
	동물복지1과장		이달주

5

야행관 리모델링 설계용역

중간보고(2차) 개최 결과보고

2015. 12.

(기반시설안전추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

야행관 리모델링 설계용역

중간보고(2차) 개최 결과보고

야행관 리모델링 설계용역에 대하여 중간보고(2차)를 개최하고 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 야행관 리모델링 설계용역

□ 용역기간 : ‘15. 6. 29 ~ ’15. 12. 5

□ 용 역 자 : ㈜방총건축사사무소 대표 이창훈

□ 설계규모 : 지상1층 연면적 622.20㎡, 외부방사장 321㎡

Ⅱ		용 역 보 고

□ 일    시 : 2015. 11. 19(목) 09:30

□ 장    소 : 관리부 제1회의실

□ 참 석 자

○ 대 공 원 : 대공원장, 관리부장, 시설과장, 안전추진반장, 동물복지1과장, 공원조성총괄, 김형집, 최인호, 최강욱, 김용주, 강경숙, 양효진, 한상길, 이옥하

○ 용역업체 : ㈜방총건축사사무소 황영섭외 2인

Ⅲ		주요 보고내용

□ 1차 중간보고 결과 조치사항

□ 건축분야 : 건축 평면배치 및 단면보고

□ 전시분야 : 공간구성 및 동물별 내·외방사장 디자인

Ⅳ		중간보고 검토의견

야행관 리모델링 계획안

□ 전  체

○ 전시분야는 스토리가 필요하며, 대공원만의 디자인의 차별화가 필요함

○ 시설안전, 동물복지, 관람, 교육의 균형을 맞춰야함.

○ 야행관의 특성에 맞게 겨울철에 대비하여 내부 관람로 설치 필요

○ 계절별 동물 전시 및 관람에 불편함이 없도록 공간을 효율적으로 구성(관람동선에 빈 공간이 노출되지 않게 배치 필요)

○ 관람동선에 있는 사육사실 및 출입구를 건물 뒤편으로 변경 필요

○ 아드바크 내·외부 전시장의 개미집 실용성 높이기 위해 구멍을 뚫고 먹이대를 끼울 수 있도록 변경

□ 내  부

○ 내·외부 전시장은 시멘트 바닥과 GRC는 최소화하고 자연적인 나무 등 자연 소재물이 들어갈 수 있도록 해야함

○ 아드바크 내실 관람창 앞쪽에 굵은 모래를 넣어서 땅을 파는 모습을 볼수 있게 해야 함

○ 천창은 누수가 되는 문제점이 있으므로 방수가 잘 되도록 시공 필요함

□ 외  부

○ 곤충관에서 이동하는 관람객이 효과적으로 야행관을 관람하고 갈 수 있도록 하기 위해 야행관 외부 공간을 잘 배치하여야 함(좁은 현 야행관 현장에서 관람 및 전시가 창의적으로 이루어지게 하는 배치가 필요함)

○ 외부방사장을 신설할 경우 주변 기반시설에 대한 조사를 병행하여 우·오수 처리에 대한 계획을 실시설계에 반영해야 하며 공사로 인한 주변 도로 손괴 등을 감안 주변도로 재포장 계획도 병행수립

○ 아드바크 외부전시장 발전 필요함(유리창 아래 돌 없애야함-아이들이 올라설 수 있음)

○ 관람 환경 개선

- 몰입관람을 위한 관람쉘터 설치, 안전사고 예방을 위해 경사면 관람 지양

- 외부 휴식공간 마련 : 데크 및 의자 설치 등

- 조경 식재계획 : 외부 방사장, 외부 관람로 등

- 외부 관람로 및 진입동선 포장계획, 우오수관 개량 계획 포함

○ 곤충관과 건축물, 동선, 조경이 연계되야 함.

Ⅴ		문 제 점

□ 건축물이 도로보다 약 1.5m 낮게 배치되어 있어 현재 계획안으로는 일부 의견 반영이 불가함

○ 반영 불가 의견

- 내부 관람동선에 빈 공간(내실)이 노출되지 않게 배치

- 외부 관람동선에 있는 사육사실 및 출입구를 건물 뒤편으로 배치

- 안전사고 예방을 위해 경사로에서 관람 지양

Ⅵ		문제점 해결을 위한 개선방안 검토

□ 분야별 설계용역 감독회의

○ 1 차

- 일  시 : 2015. 11. 30(월)  17:00~19:00

- 장  소 : 상상모둠실

- 참석자 : 한상길(토목), 강경숙(전시), 양효진(전시), 이옥하(조경), 김용주(건축), 김형집(기계), 최인호(통신), 최강욱(전기)

○ 2 차

- 일  시 : 2015. 12. 01(화)  17:00~18:30

- 장  소 : 상상모둠실

- 참석자 : 한상길(토목), 강경숙(전시), 양효진(전시), 차준호(동물)이옥하(조경), 김용주(건축), 김형집(기계), 최인호(통신), 최강욱(전기)

야행관 리모델링 개선안

□ 개선안 주요 변경내용

○ 건축물의 일부(앞면 관람공간)를 약 1.2m 높여 관람로의 높이에 맞추고 관람공간 재배치

□ 개선안 장·단점

○ 장점

- 내실·외부방사장이 인접해 있어 빈 공간(내실) 문제점이 해소됨

- 관람로가 평지로 되어있어 경사로 안전사고 위험이 없음

- 사육사실 등 관리공간을 뒤쪽으로 배치하여 앞면을 모두 관람공간으로 사용할 수 있음

- 공사가 간단하여 공사비를 절감할 수 있음

○ 단 점

- 내부 관람로가 없어 호기심 유발, 집중관람, 효과연출 등에 아쉬움이 있음

Ⅶ		종 합 검 토

□ 설계용역 감독의견

○ 문제점 해결을 위하여 분야별 설계용역 감독이 검토회의 결과 설계 계획안 검토의견을 모두 반영할 수 있는 개선안으로 변경에 다수의 의견이 있음

○ 개선안의 미비점을 보완하기 위하여 외부 관람로에 동굴 등을 설치하고 개선안으로 변경하고자 함

□ 준공기한 연기

○ 개선안으로 변경하기 위하여는 기본계획부터 다시 해야 하므로 준공기한을 연기 하여 설계용역을 완료하고자 함

구 분	연 기 전	연 기 후	비 고
용역기간	2015. 6. 29 ~ 2015. 12. 5	2015. 6. 29 ~ 2016. 3. 4	90일 연장

○ 소요일수

- 기본설계 : 30일

- 실시설계 : 60일

○ 연기사유 : 기본계획 변경에 따른 용역기간 추가 소요

○ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책:서울대공원)

Ⅷ		향 후 계 획

○ 2016. 3. 4 : 설계용역 준공

○ 2016. 3.   : 계약심사 및 공사발주

○ 2016. 4.   : 착공

○ 2017.12.   : 준공

붙임 : 1. 건축분야 평면배치 및 단면보고서

2. 전시분야 공간구성 및 동물별 내·외방사장 디자인(별도첨부). 끝.