문서번호	시설과-9055
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
남상국	김한준	12/07 이용태

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역』  설계변경 (총차 2회, 1차 2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역』

설계변경 (총차 2회, 1차 2회) 검토보고

「남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사 건설폐기물처리용역」과 관련, 책임건설사업관리기술자의 설계변경 보고가 접수되어 아래와 같이 보고드림.

□ 관련 근거

○ 한국건설관리공사 남산 회현 - 65호 (2015.12.4.) : 건설폐기물처리용역       설계변경서 제출

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사                  건설폐기물처리 용역

○ 용역내용 : 운반 2,132㎥, 처리 5,028톤 (1차 운반 1,887㎥, 처리 4,452톤)

○ 용역기간 : 2015.3.26 ~ 2016.12.31 (1차 3.26~2015.12.31)

○ 도 급 자 : 동광건설기계(운반) 대표 김철기, ㈜동우개발(처리) 대표 홍상표

○ 도 급 비 : 136,810천원 (1차 121,283천원)

□ 설계변경 보고내용

○ 변경사유

- 문화재 흔적형상화(2단계~3단계) 구간 포장 철거, 신궁 부속건물(수수사)

기초부 콘크리트 구조물, 구 잠두매점 건물, 식물원 부지 지하 구조물 등 철거로

발생된 폐기물 추가 반영에 따른 변경

○ 건설폐기물처리 변경내용

구 분			당 초	변 경	증 감	비 고
건 설 폐기물	총차	운 반	2,132㎥	2,461㎥	증) 329㎥
		처 리	5,028톤	5,774톤	증) 746톤
	1차	운 반	1,887㎥	2,426㎥	증) 539㎥
		처 리	4,452톤	5,690톤	증) 1,238톤
※ 문화재 흔적형상화 구간 포장 철거, 구 잠두매점 건물 철거 등으로 발생된 폐기물 추가 반영에 따른 변경 - 총차분 운반 : 혼합건설폐기물 감) 45㎥, 페아스팔트 증) 32㎥ , 페콘크리트 증) 342㎥ 처리 : 건설폐재류 감) 117톤, 폐아스팔트 증) 74톤, 폐콘크리트 증) 789톤 - 1 차분 운반 : 혼합건설폐기물 감) 28㎥, 페아스팔트 증) 32㎥ , 페콘크리트 증) 535㎥ 처리 : 건설폐재류 감) 74톤, 폐아스팔트 증) 74톤, 폐콘크리트 증) 1,238톤

○ 용역기간 및 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총 차	2015.03.26. ~ 2016.12.31	2015.03.26. ~ 2016.12.31	변경 없음
	1 차	2015.03.26. ~ 2015.12.31	2015.03.26. ~ 2015.12.31	변경 없음
계약금액	총 차	136,810,000	156,380,000	증)19,570,000
	1 차	121,283,000	154,150,000	증)32,867,000

□ 보고자 의견

○ 설계변경 보고에 대한 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당하다고 판단되므로 설계변경을 승인하고 계약변경을 시행하고자 함.

붙임 : 1) 건설폐기물처리용역 설계변경서 자료 제출 공문 1부.

2) 변경 설계서 갑지(총차 2회, 1차 2회) 1부.

3) 변경 설계서(총차 2회, 1차 2회) 각 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.