서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	조직담당관
(경유)
제 목	학술용역 계약기간 연장 알림

1. 재무과-59679호(2015.12.4) 및 용역변경계약체결통보서(계약번호 20150*******01)와 관련입니다.

2. 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기본계획 수립 학술용역과 관련하여 다음과 같이 계약변경(기간 연장)되었으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기본계획 수립용역

나. 변경내용

계약기간	당 초	2015. 6. 8. ~ 2015.12. 5.
	변 경	2015. 6. 8. ~ 2015.12.30.
	증 ․ 감	증 25일

다. 변경계약일 : 2015.11. 23.

라. 변경사유 : 사업비 변경에 따른 경제성․재무성 분석 및 민감도 분석 등 추가 검토 필요

붙 임. 용역변경계약체결통보서 1부.   끝.

	마곡사업과장
주무관	조동호		사업기획팀장	오경희		마곡사업과장	12/07 마채숙
협조자
시행	마곡사업과-10670	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1528	/전송	02-2133-1015	/	ultrajo68@seoul.go.kr	/	부분공개