서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 시행[세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역-변경계약(2차) 의뢰]

1. 교통운영과-23700(2015. 12. 04.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 세입세출외현금으로 진행중인 『세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역』에 대하여 아래와 같이 계약변경(2차)을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

【단위 : 원】

용역명	계약업체	계약번호	계약금액	계약기간	비고
세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기 감리용역	대영유비텍(주) 대표 조근환	20130*******01	69,532,500	′13.09.24. ~ ′15.12.15.

나. 변경내역

용역명	준 공 기 한			비고
	변경전	변경후	증감일
세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역	2015.12.15.	2016.05.31.	증)168

다. 예산과목

▶ 세입세출외현금, 보관금, 공공시설손실부담금(코드 : 02-010)

라. 변경사유 : 세곡2지구 택지 교통신호등공사(원인자공사)의 선행공정(토목) 지연 및 추가규제로 인한 준공기한 연기에 따른 공사감리용역의 준공기한 연기

마. 준공기한 연기 귀책소재 : 에스에이치공사

바. 지체상금 : 미부과

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제27호, 2015.10.01., 일부개정) 제14장 용역계약 일반조건 제7절 1-다-4) 그 밖에 계약상대자의 책임이 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 및 합의각서 각1부.

2. 감리용역계약변경 검토보고서 및 관련문서 각1부.  끝.

	교통운영과장
주무관	박지웅		신호시설팀장	김균호		교통운영과장	전결 12/07 강진동
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	교통운영과-23850	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 1동 6층	/
전화	2133-2484	/전송	2133-1053	/	elecpass@seoul.go.kr	/	대시민공개