문서번호	도로포장연구센터-2045
결재일자	2015.12.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
최향숙		백종은	12/07 代이철형
협 조
	주무관			윤상열
	주무관			윤진성
	주무관			이창민

도로포장상태 조사·분석 주간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장상태 조사·분석 주간보고

【 2015. 12. 7(월). ~ 2015. 12. 13(일).】

□ 전주 실적 및 금주 계획

장비명	조사·분석자	구 분 (세부내용)			조사·분석					비고
					총계획물량	실 적		잔여 물량	금주계획
						전주	누계
합 계		로드스캐너		개소	87	11	152	3	5
				연장(km)	1,756	26.7	1,947.1	58.8	50
		휴대용GPR		개소	29	1	32	-	-
				연장(m)	18,343	92	18,572	-	-
		FWD		개소	34	-	46	-	-
				연장(m)	35,900	-	39,183 (825점)	-	-
		차량형GPR		개소	81	7	61	25	15
				연장(m)	4,030	2,503	64,562	1,250	750
로드 스캐너	***** (기간제근로자)	3년 주기 전수조사 (2단계-‘15년도)		개소	87	-	84	3	-
				연장(km)	1,756	-	1,697.2	58.8	-
		기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등)		개소	-	11	68	-	5
				연장(km)	-	26.7	249.9	-	50
휴대용 GPR	이창민**	기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등 )		개소	29	1	32	-	-
				연장(m)	18,343	92	18,572	-	-
FWD	이진욱**	장기 공용성 평가(LTPP) 구간		개소	23	-	23	-	-
				연장(m)	35,330	-	35,330 (386점)	-	-
		지속관리 (2회이상 동공·침하)		개소	11	-	11	-	-
				연장(m)	570	-	570 (117점)	-	-
		기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등)		개소	-	-	12	-	-
				연장(m)	-	-	3,283 (322점)	-	-
차량형 GPR	*****	시험운행구간	취약지점 (일반 동공·침하)	개소	50	1	50	-	-
				연장(m)	2,500	1,198	57,127	-	-
			지속관리 (2회이상 동공·침하)	개소	31	6	6	25	15
				연장(m)	1,530	1,305	1,305	1,250	750
			기 타 (도로관리과, 사업소, 요청사항 등)	개소	-	-	5	-	-
				연장(m)	-	-	6,130	-	-

○ 로드스캐너 3년 주기 전수조사 중 2단계(‘15년도) 구간 완료

- 잔여물량 3개소(연장 58.8km)는 조사 중복구간(2개소) 및 위치확인

불가 구간(1개소)으로 조사 구간에서 제외함

○ 취약지점 및 지속관리구간에 대한 조사를 휴대용 GPR에서 차량형 GPR로 조사방법을 변경하므로 인하여, 개소별 조사계획 구간 50m를 취약지점은 1,000m, 지속관리구간은 200m로 확대하여 측정함

□ 특이사항(동공, 침하 등) 및 조치계획

○ 금년도 잔여 계획물량에 대한 조사·분석을 신속히 이행

○ 로드스캐너 조사결과 자료 입력 및 분석 철저

○ 시험운행중인 차량형 GPR 장비 성능평가 확인

☞ 이상징후 정밀조사시 휴대용 GPR 병행

○ 장비운행 시 안전강화로 교통사고 예방 철저

붙임 : 도로포장 표면조사·분석 업무일지 【기간제근로자별 각 1부(주간)】.  끝.