문서번호	급수운영과-27330
결재일자	2015.12.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		김홍준	12/07 장종욱
협조

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

2015.12

서부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(단가계약)

공사규모 : 아스팔트 포장 75.3a, 콘크리트 포장 9.846a, 보도블록 포장 9.83a,

아스팔트표층포장 224.36a

공사기간 : 2015.05.12. ~ 2016.05.31.

총공사비 : 1,665,453,600원(도급비 : 1,164,683,600 관급비 : 500,770,000)

계약상대자 : (주)해슬이앤씨 대표 고현문

감 리 자 : 서울특별시 시설관리공단, ㈜이준엔지니어링

Ⅱ		주요 변경사항

공사현장 여건변화 등으로 인한 신규공종 및 복구물량 증,감에 따른 변경

(내역서 참조)

ㆍ토  공 : 아스팔트 포장절단 물량 외 36공종 증.감

ㆍ포장공 : 보조기층공 물량 외 83공종 증.감

ㆍ부대공 : 소형공사안내 설치 철거외 21공종 증.감

ㆍ사급자재 : 보조기층재 외 13공종 증.감

세부내용

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
아스팔트 포장	a	75.3	80.39	증) 5.09
콘크리트 포장	a	9.84	13.36	증) 3.22
보도블럭 포장	a	9.83	14.37	증) 4.54
아스팔트표층포장	a	224.36	253.45	증) 29.09
계		319.33	361.27	증) 41.94

세부내용 내역 : 금액변동 없음

구 분	총 부 기 금 액		1 차 계 약 금 액		2 차 계 약 금 액
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
총공사비	1,665,453,600	1,665,453,600	1,165,817,000	1,450,803,000	499,636,600	214,650,600
도 급 비	1,164,683,600	1,164,683,600	815,278,000	1,100,264,000	349,405,600	64,419,600
관 급 비	500,770,000	500,770,000	350,539,000	350,539,000	150,231,000	150,231,000

Ⅲ		조치의견

위와 같이 물량증감건에 대해 적정성 여부 등을 계약금액조정심의위원회 심의결과 적정하게 변경된 것으로 검토되어 원안 가결된 바, 설계변경 재계약 후 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 설계변경 사전심사 심의 의결서 1부. 끝.