문서번호	토목부-26079
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	12/07 노우성
협조

교통안전시설물 변경 등 검토보고

(방화대교 남단 접속도로 건설공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설물 변경 등 검토보고

(방화대교 남단 접속도로 건설공사)

본공사 시점부(강서공고사거리)에서 종점부(올림픽대로) 구간에 대한 서울지방경찰청 교통안전시설심의결과에 의거 교통안전시설물 변경 및 설계비, 감리비 반영에 대한 검토보고임.

1		관련근거

❍ 방화 제2015-221호(2015.12. 3.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

❍ 규    모 : 도로개설 B=5.75~18.0m, L=3,021m

(교량 756m, 터널 949m,  토공도로 1,316m)

❍ 공사기간 : 총괄 2005.10. 5. ∼ 2015.12.31.

( 12차 2015. 9. 3. ∼2015.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 66,386백만원(12차 : 3,169백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜삼보기술단     ❍ 시 공 사 : 금광기업㈜

3		감리단 보고내용

❍ 교통안전시설 심의결과

구 분	교통안전시설 심의결과 내용	비 고
서울지방경찰청 교통관리과-8945호 (‘15.04.07)	[1차로 개통 교통안전시설 개선설치 통보] ① 차로재구획 ② 안전표지, 노면표시 설치 등
서울지방경찰청 교통관리과-24227호 (‘15.08.28)	[2차로 개통 교통안전시설 개선(변경)설치 통보] ① 제한속도 하향 ② 안전표지 및 노면표시 개선 ※ 도로안전시설물 설치 (차선규제블럭,충격흡수대,시선유도봉,갈매기표지)

❍ 검토내용

1) 교통안전시설 설치검토

구 분	주 요 검 토 내 용	비 고
전구간	○ 심의결과에 따른 수량증감 - 교통표지판 : 28ea→34ea(증 6ea) - 표지병 : 343개소→159개소(감 184개소) - 갈매기표지판 : 31개소→59개소(증 28개소) - 차선도색 : 3,672m2→2,474m2(감 1,198m2) - PC방호벽 : 24m→120m(증 96m) - 도로안전분리대 : 1,172ea→1,468ea(증 296ea) - 차선규제봉 : 513ea→417ea(감 96ea)	수량 및 단가 적정함

2) 설계비 및 감리비 반영검토

① 반영사유

- 서울지방경찰청 교통규제심의 및 협의 결과 반영에 따른 노면표지          변경등으로 관련 법령에 의거 설계비 및 감리비 반영이 필요함

② 관련규정 및 산출근거

- 관련규정

· 노면표시 및 안전표지 : 엔지니어링대가의 기준(산업통상자원부 고시 제2014-166호)

- 산출기준 : (공사비×요율) 적용

단, 공사비 적용 : 교통규제심의 대상 공사비

❍ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

①항 1호에 의거 계약단가 적용.

· 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

②항에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 계약

상대자간 협의 후 결정단가 적용.

- 공사비 증·감 현황                                           (금액단위 : 천원)

구 분		단위	당 초			변 경			증 ․ 감		비고
			수 량	금 액		수 량	금 액		수 량	금 액
기존분
7. 교통안전시설공				70,787			108,685			증 37,898
7.01 교통표지판		개	27	4,556		12	2,135		감 15	감 2,421
7.02 시선유도표지				8,353			744			감 7,609
a 도로표지병(양면)		개	330	5,410		-	-		감 330	감 5,410
b 갈매기표지판(부착식)		개	23	2,553		-	-		감 23	감 2,553
c 델리네이터(가드레일용)		개	20	270		23	311		증 3	증 41
d 델리네이터(교량용)		개	10	120		36	433		증 26	증 313
7.03 차선도색		㎡	2,538	54,341		504	26,176		감 2,034	감 28,165
7.05 PC방호벽(H=900)		m	24	3,319		-	-		감 24	감 3,319
7.06 도로안전분리대설치해체		m	-	-		1,051	79,630		증 1,051	증 79,630
7.07 회전식경광등		개	15	217		-	-		감 15	감 217
8. 부대공				16,552			883			감 15,669
8.02 차선규제봉		개	243	16,552		-	-		감 243	감 16,552
8.03 차선규제봉설치해체		개	-	-		38	883		증 38	증 883
직접공사비			87,339			109,568				증 22,229
제경비			8,051			27,212				증 19,161
부가가치세			9,539			13,678				증 4,139
도급비			104,929			150,458				증 45,529
확장분
7. 교통안전시설공					283,936			489,301		증205,365
7.01 교통표지판		개	1		319	22		83,353	증 21	증 83,034
7.02 시선유도표지					1,359			10,823		증 9,464
a 도로표지병(양면)		개	13		165	159		2,013	증 146	증 1,848
b 갈매기표지판(토공용)		개	8		1,194	59		8,810	증 51	증 7,616
7.03 데리네이터					63			63		증 -
a 델리네이터(교량용)		개	4		63	4		63		증 -
7.04 차선도색		㎡	1,134		20,363	1,970		43,421	증 836	증 23,058
7.05 도로안전분리대		m	1,172		261,832	1,468		327,960	증 296	증 66,128
7.06 PC방호벽(H=1270)		m	-		-	120		22,606	증 120	증 22,606
7.07 도로반사경		개	-		-	3		1,074	증 3	증 1,074
8. 부대공
8.02 차선규제봉		개	270		17,450	417		26,951	증 147	증 9,501
직접공사비			301,386			516,252				증 214,866
제경비			38,134			70,028				증 31,894
설계감리비			-			13,480				증 13,480
부가가치세			33,952			59,976				증 26,024
도급비			373,472			659.736				증 286,264
합 계	설 계 가		478,401			810,194				증 331,793	시공사요구
	협 의 율 (90.522%)					794,519				증 316,118
	낙 찰 율 (81.045%)					778,866				증 300,465

4		검토 및 조치의견

❍ 서울지방경철청 교통안전심의결과를 반영한 교통안전시설물 변경과 그에 따른 추가        설계비 및 감리비 반영에 대한 감리단의 검토내용이 적정하며

❍ 신규비목에 대한 시공사 단가협의시 협의가 되지 않아 공사계약일반조건 제20조        제2항에 따라 강제협의율(90.522%)을 적용하고자 하며

❍ 본 건은 설계변경 소심의위원회 상정대상으로 심의결과를 토대로 향후 설계변경시 반영        하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.