문서번호	토목부-26071
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		권혁대	12/07 노우성
협조

감리원 투입변경에 의한 설계변경 검토보고

[신림~봉천터널(2공구) 전면책임감리용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

감리원 투입변경에 의한 설계변경 검토보고

(신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 전면책임감리용역)

우리부에서 진행중인 「신림~봉천터널(2공구) 전면책임감리용역」에 대하여 상주감리원 인원 조정 및 물가변동에 따른 설계변경을 위한 검토 보고임.

관련근거

○ 신성엔 제15-2147호(2015.12. 4.) 상주감리원 인원조정으로 인한 설계변경 요청

용역개요

○ 위    치 : 관악구 신림동 시흥IC ~ 봉천동 낙성대JC

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 2.48km, 환기소 1개소

○ 용역기간 : ‘10. 1. 5. ~ ’17.12.31.(6차: ‘15. 1. 1.∼ 12.15)

○ 도 급 비 : 4,863,300,000원(6차: 500,000,000원)

○ 감 리 사 : ㈜신성엔지니어링 대표이사 정찬섭 외3개사

보고내용

○ 책임감리원(금동욱) 퇴사로 인한 대행체제 승인과 관련하여 상주감리원 인원 조정에 따른 설계변경임.

감리구분	당 초	변 경	비 고
책임감리원	금동욱	한성우(대행)
보조감리원	한성우	-	공사업무
보조감리원	정의경	정의경	공무업무

계약금액 변경내역

○ 6차(2회)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 용 역 비		500,000,000	500,000,000
용역비	공급가액	409,808,738	405,444,450	-4,364,288
	부가가치세	40,980,873	40,544,445	-436,428
	물가변동(1회)	32,710,389	31,966,254	-744,135
	물가변동(2회)	12,000,000	17,544,851	5,544,851
	손해배상보험료	4,500,000	4,500,000	-
	계	500,000,000	500,000,000

조치의견

○ 상기와 같이 상주감리원 인원 조정에 따라 설계변경하여 원활한 감리업무를 수행할 수 있도록 조치하고자 하며,

○ 6차1회(2차 ESC) 변경시 2016년도 7차발주시 반영할 예정이었던 부족분(7,800,000원)에 대해 금년도 예산범위내에서 반영하여 처리하고자 함.

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총괄 용역비	4,988,100,000	4,988,100,000	0	계약기간 변경없음
6차 용역비	500,000,000	500,000,000	0	계약기간 변경없음

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.