투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재(미끄럼방지포장재-그루빙-) 납품기한 연기요청

1. 시설과-8118(15.11.06)호 및 공원운영과-21257(15.11.10)호와 관련입니다.

2.『남산공원 남측순환로 미끄럼방지시설 설치계획』과 관련하여 기 계약된 관급자재에 대하여 다음과 같이 납품기한을 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 미끄럼방지포장재(그루빙)

나. 납품기한 연기품목 : 그루빙(현장설치도)

다. 계 약 자 : 화성이엔씨(주) 하용호

라. 납품번호 : 12-15-1-53965-00

마. 연기사유 :『2015년 남산공원 남측순환로 정비공사』와 병행시행(15.12.19준공) 되어. 순환로 포장과 양생후(약7일) 그루빙을 설치해야 함으로 설치기한 연기가 요구됨

- 남측순환로 그루빙 포장구간 표층완료 : 2015.11.30

- 포장면 양생기간 : 2015.12.01 ~ 2015.12.07

- 그루빙 설치기간 : 2015.12.08.(야간) ~ 2015.12.14.(야간)

바. 연기기간 : 당초 2015.12.09.  변경 2015.12.16. 끝.

	시설과장
주무관	김영수		시설팀장	한종수		시설과장	12/07 김한준
협조자
시행	시설과-9052	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5962	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개