문서번호	물재생과-8119
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	12/07 김동기
협조

‘15년도 중랑천 차집관거

준설토 운반용역 설계변경(최종) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

중랑물재생센터

(물재생과)

‘15년도 중랑천 차집관거 준설토 운반 용역

설계변경(최종) 보고

우리센터에서 시행중인『‘15년도 중랑천 차집관거 준설토 운반 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 :‘15년도 중랑천 차집관거 준설토 운반 용역

○ 용역기간 :  2015. 11. 24 ~ 2015. 12. 04

○ 도 급 액 : 금15,310,900원

○ 도 급 자 : 산양환경산업(주) 대표 장택무

□ 설계변경 사유

○ 준설토 재활용처리 수량 조정에 따른 물량 감소 발생

□ 설계변경 내용

○ 용역금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		15,310,000	13,494,000	감 1,816,900
도급비	공급가액	13,919,000	12,267,273	감 1,651,727
	부가가치세	1,391,900	1,226,727	감 165,173
	계	15,310,900	13,494,000	감 1,816,900

○ 설계변경 주요 내용

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
중랑천 차집관거 준설토 운반	L=45Km (24톤덤프)	㎥	750	661	감 89

□ 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경내역서  1부.  끝.