문서번호	물재생과-8131
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
최승룡		강병수	12/07 김동기
협조

『청계천 하류횡단 차집관거 개선공사』 실정보고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

중랑물재생센터

(물재생과)

『청계천 하류횡단 차집관거 개선공사』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『청계천 하류횡단 차집관거 개선공사』의 도급자로 부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

1		사업개요

□ 사 업 명 : 청계천 하류횡단 차집관거 개선공사

□ 사업기간 : ‘15.01.19 ~ ’15.12.31

□ 사 업 비 : 1,926,000천원

□ 도 급 자 : 아이에스동서㈜ 대표 권민석

□ 공사내용

- 철거 2.4×2.4m, 50m, 3.0×3.0m, 78m, 3.0×2.8m, 122m, D=1,800mm 58m

- 설치 2@2.0×2.0m, 99m, 2@2.5×2.0m, 153m, 2.4×2.4m, 17m, 3.0×3.0m, 37m

2		실정보고 내용

□ 살곶이 공원 앞 차집관거 개선으로 청계천 수위가 낮아져 좌안 일부구간으로      하천이 흐르고 있어 어류의 이동이 단절된 상태로 이를 개선코자 징검다리를      설치, 수위를 조정하여 어류의 이동통로를 확보하여 자연친화적 하천 유지

□ 징검다리 설치개요 : 폭 2m, 연장 84m

- 저수호안 식생매트 폭 2m, 연장 63m

- 계단 및 진입로 폭 3m, 연장 63m

3		검토결과

□ 수위 저하로 청계천 하부가 노출되어 이곳을 이용하는 시민들에게 불쾌감 및      차집관거 개선공사에 대한 불신감 발생 우려

□ 징검다리 설치 및 저수호안 주변 정비로 어류의 이동통로 확보와 살곶이 공원을      이용하는 시민들의 접근성을 개선하여 자연친화적 하천을 시민들에게 제공

4		기술자 및 설계자 검토의견

□ 지지력 및 침하검토 결과 허용값 이내로 검토되어 안전하나 시공시 하부지반      교란 등으로 인해 부등침하가 발생될수 있으니 자갈로 치환하여 시공(기술자)

□ 징검다리 지지력 및 침하검토서 검토결과 안전하고 수질개선 및 자연생태        기능 강화 등 하천경관에 적합(설계자)

5		조치의견

□ 도급자로 하여금 위 내용으로 우선 시공토록 하고 신규공종은 낙찰율(86.13%)을      적용하고 소요예산(294,800천원)은 집행잔액을 활용, 추후 설계변경 정산처리      코자 함

붙임 : 1. 실정보고서 1부.

2. 현황사진 1부.

3. 징검다리 지지력 및 침하 검토서 1부.

4. 직접기초 지지력 및 침하량 분석표 1부.

5. 설계자 검토서 1부.    끝.