문서번호	교량보수과-151
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김형섭		김종대	01/16 정진오
협 조
	주무관			이기승
	주무관			김근섭
	주무관			김중철

2014년도 사업예산 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

성동도로사업소

(교량보수과)

2014년도 예산사업 추진계획

2014년도 예산사업(공사)에 대하여 사업별 담당자 지정 및 추진일정 등 추진계획을 수립하여 도로시설물에 대한 원활한 보수체계 구축 및 신속하고 적절한 관리체계를 구축함으로써 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업예산 현황

구분	계	용 역	공 사	기 타	비 고
건 수	14	5	8	1
금 액	8,854	742	8,108	4 (한강교량방호)

※ 용역에 대하여는 별도 계획 수립

□ 사업현황 및 담당자 지정

연번	사 업 명	예산액	사 업 추 진 계 획	담당자
	계 8 건	8,108
1	동호대교 보수공사	1,000	∘규 모 : 교량상판 철거 및 설치 L=60m, B=7.5m ∘사업기간: 2014. 2 ~ 2014.12 ※ 실시설계용역 ‘1312.13~’14.2.20	김형섭
2	동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사	2,000 (설계 134 감리 63)	∘규 모 : 우물통 보수 10기 ∘사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12 ※ 실시설계용역 완료 후 공사추진	김형섭
3	영동대교 보수공사	1,600 (설계 50)	∘규 모 : 받침교체 16개소, 단면보수 1,280㎡ ∘사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12 ※ 실시설계용역 완료 후 공사추진	김근섭
4	한강교량 일상유지 보수공사	976	∘위치 : 광진교, 영동대교, 성수대교, 동호대교 ∘사업기간: 2014. 2 ~ 2015. 2	이기승
5	한강교량 긴급복구 비축자재 정비	550	∘ 규 모 : 비축자재 정비(도장, 배수로 설치 등) ∘사업기간: 2014. 3 ~ 2014. 10	김중철
6	자동차전용도로 도로시설물 일상유지 보수공사	690	∘ 규 모 : 자동차전용도로상 시설물 26개소 ∘사업기간: 2014. 3 ~ 2015. 2	김근섭
7	자양고가 보수 및 포장개량공사	250	∘ 규 모 : 포장개량 27@, 단면보수 1식 ∘사업기간: 2014. 3 ~ 2014. 10
8	자동차전용도로 교면포장개량공사	1,042	∘ 규 모 : 아차산교 221@ ∘사업기간: 2014. 3 ~ 2014. 10	정)김중철 부)이기승

□ 추진계획

○ 실시설계용역 선행 사업

- 대상(2) : 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사, 영동대교보수공사

- 추진일정

• ‘14. 1. 24 : 설계용역 설계내역서 작성

• ‘14. 1. 29 : 설계용역 타당성 심사 의뢰

• ‘14. 2. 10 : 설계용역 발주

※ 동호대교보수공사는 실시설계용역 중이며, 용역 완료 후 공사발주 예정

○ 연간단가 및 단위사업

- 대상(5) : 한강교량일상유지, 한강교량 비축자재정비, 자동차전용도로 일상유지, 자양고가보수 및 포장개량, 아차산교 교면포장 개량공사

- 추진일정

• 공통대가 작성, 현장조사 및 물량산출 : 2013. 1. 31

• 설계도서 작성 및 계약심사  : 2013. 2. 12

• 공사발주 : 2013. 2. 14

• 계약 및 공사착공 : 2013. 2. 28

※ 자동차전용도로 일상유지보수공사 와 자양고가 보수 및 포장개량공사는 통합 발주

□ 행정사항

○ 사업담당자별 업무추진 일정 작성 관리

○ 사업 조기발주를 위한 사전준비 추진 철저

○ 긴급입찰 제도의 적극적 활용(계약의뢰시 긴급공고사유서 첨부)

따로붙임  1) 2014년 사업별 조기발주 계획 1부 . 끝.