문서번호	도시철도토목부-15555
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		김성호	12/08 김진팔
협 조
	주무관			황왕연

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

준공검사 결과보고(5차)

2015. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

준공검사 결과 보고(5차)

지하철9호선 3단계 923공구 5차공사에 대해 책임감리사로부터 준공검사 완료 보고서가 제출되어 이에 대하여 보고 드림.

Ⅰ

5차 공사 개요

○ 공사기간 : ‘14.12.29 ~ ‘15.11.30

○ 계약금액 : 5,837,300천원

○ 계 약 자 : 대림산업(주) 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단 건축사무소

Ⅱ

준공 검사 현황

○ 일    시 : ‘15.12.03(목)

○ 장    소 : 923공구 회의실 및 현장

○ 준공검사자

- 감리단 : 기술지원건설사업기술자

· 토질분야 : 김제규, · 구조분야 : 김진윤

○ 준공검사 입회자

- 공사관리관 : 도시철도토목부 시설7급 엄상민

- 책임감리원 : 권일순, 현장대리인 : 최경호

○ 5차공사 추진현황

(단위 : 천원)

구 분	계 약	실 적	잔 량	비 고
금 액	5,837,300	5,837,300	0	100%

○ 5차공사 계약물량 및 시공 현황

구간 및 공종			단위	계약분		시공분		비고
				수량	금액	수량	금액
본선터널 (하선)		갱문보강	㎥	109	5	109	5
		구조물	m	68	45	68	45
본선 1구간		토공	㎥	28,867	181	28,867	181
		버팀보	본	625	74	625	74
		구조물	㎥	5,521	917	5,521	917
938 정거장		토공	㎥	6,466	65	6,466	65
		버팀보	본	660	102	660	102
		구조물	㎥	8,682	1,939	8,154	1,939
본선환기구	937S2	토공	㎥	1,390	14	480	14
		버팀보	본	126	16	28	16
		구조물	㎥	1,671	372	1,092	372
	937E2	토공	㎥	820	16	820	16
		버팀보	본	44	6	44	6
		구조물	㎥	893	170	893	170
	938E1	토공	㎥	698	7	698	7
		버팀보	본	138	18	138	18
		구조물	㎥	1,012	167	1,012	167
기타			식	1	177	1	177
직접공사비					4,291		4,291
간접공사비					1,323		1,323
물가변동(1,2,3회)					223		223
도급비					5,837		5,837

Ⅳ

준공검사 결과 및 조치계획

○ 책임감리사인 ㈜동명기술공단으로부터 공사설계도서, 품질관리 기준 및 기타 약정대로 이상없이 완료한 것으로 보고되어 준공처리코자하며, 준공기성금에 대하여 계약상대자에게 지급토록 건설총괄부에 요청코자함.

○ 준공기성금 현황

구 분	계약금액	전회기성	금회기성	비 고
5차	5,837,300	5,196,000	641,300

붙 임 : 준공검사 결과보고 1부.  끝.