서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	노원구청장(장애인지원과장)
(경유)
제목	시립뇌성마비복지관 기능보강사업 변경 검토결과 송부

1. 장애인지원과-22175(2015.12.03.)호와 관련입니다.

2. 시립뇌성마비복지관 기능보강사업 변경요청에 대하여 아래와 같이 검토결과를 안내하오니 사업추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 시립뇌성마비복지관(노원구)

나. 사업명 : 스프링클러 설치 및 감지기 교체

다. 사업비 : 총 186,000천원

라. 요청내역 : 낙찰차액을 사용, 수전설비 교체공사 사용 요청

(단위:천원)

변경대상	당초	변경	증(△)감	비고
계	186,000	186,000	--
-스프링클러설치 및 감지기교체	186,000	--	--
-스프링클러설치 및 감지기교체 -수전설비교체	--	186,000	--	예산액 186,000,000원 중 166,104,174원 집행 낙찰차액 19,895,826원 중 수전설비 교체 공사를 위해 19,895,000원을 사용하고자 함.

마. 검토결과

요 청 이 유	검 토 결과
○1998년에 설치한 수전반이 외부 판넬부식과 내부 사용기기 (변압기등) ASS.MOF.TR등 내구 연한(20년)이 도래하여 교체 주기가 임박해 있으며 개폐기등도 노후되어 교체하여야 하며, 변압기 절연유 교체주기 3년 경과로 교체를 할 필요성이 있으며, 외부인의 감전사고 및 복지관의 원활한 전기공급을 위하여 아무나 쉽게 출입할 수 없도록 울타리(휀스)를 보강하여 설치하여야 함.	- 이용자 및 시설 안전을 위한 사업으로 스프링클러설치 및 감지기 교체 공사 낙찰차액을 사용하여 노후된 수전설비를 교체하기 위한 사업으로 낙찰차용 사용 요청이 적정함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김종민		장애인재가복지팀장	김지형		장애인자립지원과장	12/08 이종만
협조자
시행	장애인자립지원과-9143	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-7451(7451)	/전송	02-2133-0722	/	godbachi@seoul.go.kr	/	대시민공개