문서번호	누수방지과-10472
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
임주은		김영삼	12/08 강신재
협 조
	시설과장			김도섭
	시설관리과장			한명석
	공간정보과장			정윤홍

ISO 14001(환경경영) 절차서 개정

2015. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67500-P
	목 차	쪽 수	1/2

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 및 지침서 목록		담당 부서
4.4.6	운영 관리	본부67500	목차	누수방지과
		본부67500	검토 및 승인	누수방지과
		본부67501	유수율 관리 업무 절차서	누수방지과
		본부67502	구역 유량계 관리 절차서	누수방지과
		본부67503	배급수관 정비 사업 업무 절차서	누수방지과
		본부67503-1	배급수관 정비 사업 업무 지침서	누수방지과
		본부67503-2	세척 갱생 처리 지침서	누수방지과
		본부67503-3	상수도 유수장애 지침서	누수방지과
		본부67504	긴급 누수복구 업무 절차서	누수방지과
		본부67504-1	긴급 누수 설계일반 지침서	누수방지과
		본부67504-2	긴급 누수복구 단가계약 시행지침서	누수방지과
		본부67504-3	상수도 돌발누수 사고처리 지침	누수방지과
		본부67504-4	원인자, 손괴자 부담금 업무지침서	누수방지과
		본부67504-5	누수신고 포상금 지급지침서	누수방지과
		본부67505	지하 누수탐지 업무 절차서	누수방지과
		본부67506	상수도시공감독 업무 절차서	누수방지과
		본부67507	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	누수방지과
		본부67508	건설공사 품질관리 업무 절차서	시설과
		본부67509	공사공정 관리지원 처리 절차서	시설과
		본부67510	공사 안전관리 업무 절차서	시설과
		본부67511	공사 업무지원 처리 절차서	시설과
		본부67512	방재, 재해업무 처리 절차서	시설과
		본부67513	상수도시설공사시공감독에 관한 절차서	시설과
		본부67514	설계 시공평가 업무 절차서	시설과
		본부67515	상수도 시설물 유지관리 절차서	시설관리과
		본부67515-1	상수도 시설물 점검업무 지침서	시설관리과
		본부67515-2	상수도 관로 표지 설치 지침서	시설관리과
		본부67516	GIS 데이터 유지관리 절차서	공간정보과

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67500-P
	검토 및 승인	쪽 수	2/2

환경경영 매뉴얼 4.4.6 운영관리에 대한 절차서는 각 부서의 담당자에 의해 작성되고 해당 과장이 검토하며, 해당 부장에 의해 승인된다.
	해당과장			2015년 12월 7일
	누수방지과장 김 영 삼 시설과장 김 도 섭 시설관리과장 한 명 석 공간정보과장 정 윤 홍 기관장대리인			검 토 일 자 2015년 12월 7일
	누수방지과장 김 영 삼 기 관 장			검 토 일 자 2015년 12월 7일
	시설안전부장 강 신 재			승 인 일 자

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67501-P
	유수율관리업무절차서	쪽 수	1/6

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	5	정희순	○ 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 1. 8	5	김학준	○ 직제 개편에 따라 부서 및 담당자 변경	○ 경영관리부 → 수도특별기동반
2	2002.7.15	5	김성수	○ 직제 개편에 따라 부서 및 담당자 변경	○ 수도특별기동반 → 수도관리부
3	2005. 7.15	5	문윤기	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김성수 → 문윤기
4	2006.4.1	6	유은정	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 문윤기 → 유은정
5	2007.1.15	6	김인철	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 유은정 → 김인철
6	2007.10.15	6	김인철	○ 직제 개편에 따른 부서명칭 변경	○ 수도관리부 → 시설관리부
7	2008.04.29	6	홍맹식	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김인철→ 홍맹식
8	2010. 03.01	6	지선병	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 홍맹식→ 지선병
9	2014.1.15	6	홍기관	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 지선병→ 홍기관
10	2014. 3.13	6	홍기관	○ 직제 개편에 따른 부서명칭 변경	○ 시설관리부 → 시설안전부
11	2015.7.13	6	최선희	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 홍기관→ 최선희

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67501-P
	유수율관리업무절차서	쪽 수	2/6

1. 목  적

본 지침서는 서울시 상수도사업본부(이하“우리본부”라 한다) 및 산하 수도사업소

생산성 향상의 관건인 유수율 향상을 위하여 실질적으로 추진 가능한 계획을 수립,

추진함으로써 상수도 재정의 건전화를 도모하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 지침서 우리본부 및 사업소의 유수율 제고를 위한 계획의 수립, 사업의 시행,

사후평가 등 유수율 제고업무 전반에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 유수율 제고

(1) 상수도생산성 향상을 위해서는 유수율 증대가 관건이며 유수율 증대는 생산량

저감과 요금 수익증대 등 직․간접적인 많은 효과를 유발하고 상수도 재정

의 건전화를 도모케 한다.

(2) 유수율 증대를 위해서는 요금수량을 증대시키는 계량기 미감지량의 축소

와 낭비되는 수돗물을 저감시키는 누수방지 및 절수가 주된 과제이다.

나. 유수율

(1) 정수센터에서 생산된 총수량에 대하여 급수에 의하여 금전적 수입을 유발시킨

수량의 비율을 말한다.

다. 무수율

(1) 정수센터에서 생산된 총수량에 대하여 금전적 수입이 없는 수량의 비율

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67501-P
	유수율관리업무절차서	쪽 수	3/6

라. 유효율

(1) 정수센터에서 생산된 총수량 중에서 소방용수 등 꼭 필요한 부분에 적   합하게 사용된 수량의 비율

마. 무효율

(1) 정수센터에서 생산된 총수량 중에서 누수 등과 같이 무용하게 손실된    양의 비율

※ 유수율, 무수율, 유효율, 무효율의 개념

유수율	유 효 유 수 율	유효율
무수율	유효 무수율(계량기 미감지량, 수도사업용수량 등)
	무효 무수율(누수량, 조정감액수량)	무효율

4. 책임과 권한

유수율관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본 부 장

(1) 유수율 관리업무 총괄

(2) 유수율 종합대책 추진계획의 수립 및 추진의 승인

(3) 유수율 종합대책 추진실적 평가의 승인

나. 부본부장

(1) 유수율 종합대책 추진계획의 수립․추진에 관한 검토

(2) 유수율 종합대책 추진실적 평가의 검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67501-P
	유수율관리업무절차서	쪽 수	4/6

다. 시설안전부장

(1) 유수율종합대책 추진계획의 수립 및 시달

(2) 유수율종합대책 추진실적 관리 및 평가

라. 누수방지과장

(1) 무수원인분석을 위한 현장점검 추진

(2) 무수원인 분석 및 원인별 대책강구

5. 업무절차

가. 유수율 향상 종합추진계획 수립

(1) 실질적으로 추진 가능한 계획을 분야별로 수립.

(2) 무수 요인에 대한 항목별 실태와 문제점을 분석 효과적인 개선방안 제시

나. 유수율 향상 추진계획 시달

(1) 회의 교육 지도점검 등을 통하여 유수율관리 업무가 효과적으로 추진될

수 있는 기반구축

다. 유수율 향상 추진계획의 추진

(1) 무수 요인별 효과적인 대책추진

(가) 가압급수지역 유수율향상 추진

(나) 검침 및 요금조정 분야 점검

(다) 직․간접 혼용배수지의 간접배수 전환 추진

(라) 블록별 유수율 측정

(마) 블록별 노후관 정비

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67501-P
	유수율관리업무절차서	쪽 수	5/6

(바) 수도계량기 미감지량 저감대책 추진

(사) 재개발지역 배급수관 정비

(아) 체계적인 누수탐지

(자) 저조분야 및 사업소 점검 및 지도감독
(2) 상수도 시설의 철저한 관리로 무수발생 예방

(가) 취․정수센터 시설점검

(나) 정수센터 유량계 교정검사 추진

(다) 배수지․가압장 유지관리

(라) 구역유량계 관리

(3) 유수율 향상을 위한 기반구축

(가) 수도계량기 미감지량 조사 및 연구추진

(나) 사업소별 유수율 향상 업무 추진실적 평가

라. 유수율 분석 및 평가

(1) 유수율 종합대책 추진실적 평가로 책임행정체제 구축

(2) 과학적인 분석기법 개발보완으로 향후 유수율 제고에 적용할 수 있는

방안강구

업무개선 idea
실패사례
참고자료

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67501-P
	유수율관리업무절차서	쪽 수	6/6

□ 업무인계․인수 현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자
2001. 1.8.	6급 정희순	2002.7.15.	6급 김학준
	6급 김학준		6급 김성수
2005.7.15.	6급 김성수	2006. 4.1.	6급 문윤기
	6급 문윤기		6급 유은정
2007.1.15.	6급 문윤기	2008.8.29.	6급 김인철
	6급 김인철		6급 홍맹식
2010. 3.1.	6급 홍맹식	2014.1.15.	6급 지선병
	6급 지선병		6급 홍기관
2015.7.13.	6급 홍기관
	6급 최선희

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	유수율향상추진대책수립및시행	1년	누수방지과장	5년	행정운영과장
2	유수율향상추진실적평가	1년	누수방지과장	5년	행정운영과장

7. 관련표준

8. 첨  부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67502-P
	유량계 관리 절차서	쪽 수	1/5

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	5	문동하	○ 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 1. 8	5	이종수	○ 직제개편에 따른 담당 부서 변경	○생산관리부 → 수도특별기동반
2	2002.7.15	5	이종수	○ 직제개편에 따른 담당 부서 변경	○수도특별기동반→ 수도관리부
3	2007.10.15	5	최병석	○ 직제개편에 따른 부서 명칭 변경	○수도관리부 → 시설관리부
4	2009.03.21	5	이광만	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 문병선 → 이광만
5	2012.03.12	5	차경호	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 이광만 → 차경호
6	2014.03.13	6	차경호	○ 직제개편에 따른 부서 명칭 변경	○ 시설관리부 → 시설안전부
7	2014.09.01	7	차경호	○ 직제개편으로 책임과 권한 내용 수정 ○ 기술 및 유지관리분야 세분화 ○ 구역유량계.취송수유량계 분야를 유량계 업무처리 지침으로 통합	- 유량계 설치 및 개량 분야 → 유량계실 크기 (관직경×1.5배이상) 유지 → 다회선 유량계 분야 추가 → KC인증 및 표준규격 사용 의무화 적용 → 유량계 고유명칭 정비등 - 유량계 유지관리 분야 → 유량감시시스템 운영분야 → 방화벽 구축 분야 → 보정값 일일관리 차이량 정도관리 강화 → 휴대용 유량계 활용 → 교정검사 정확도 기준값 강화 (±1.5% → ±0.5%)
8	2015.01.26	5	장준원	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 차경호 → 장준원

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67502-P
	구역유량계 관리 절차서	쪽 수	2/5

1. 목    적

상수도 생산량의 기초 자료인 송수량 산출, 각 수도사업소별 공급량 산출, 유량감시시스템을 통한 급수패턴 분석 등을 위하여 공급관망에 설치된 각종 유량계 설비에 대한 설치, 유지관리, 안전관리 요령 등에 관한 기준을 마련함으로서 효율적 유지관리 및 유량감시 시스템 활용에 만전을 기하고자 한다.

2. 적용의 범위

본 지침은 취․송수유량계, 구역유량계, 배수지유량계, 가압장유량계와 전송설비, 유량감시시스템과 부대설비에 대한 설치, 교체, 이설, 유지관리 등과 관련된 업무를 처리하는데 적용한다.

3. 용어의 정의

가.“취수유량계”라 함은 아리수정수센터에서 원수의 유입량을 계측하는 유량계를 말하며, “송수유량계”는 아리수정수센터에서 수도사업소로 공급되는 유량을 계측하는 유량계로서 생산량의 기초 자료가 된다.

나.“블록”이라 함은 일정한 급수구역을 지역여건 및 관망여건에 따라 분리 독립하여 하나의 구역단위로 공급량 분석이 가능한 구역을 말한다.

다.“대블록”이라 함은 수도사업소별 관할 구역을 하나의 단위로 분리 독립된 구역을 말한다.

라.“중블록”이라 함은 “대블록” 영역 내에서 지역여건 및 관망여건에 따라 분리 독립된 좀 더 세분화된 블록구역을 말한다.

마.“구역유량계”라 함은 각 사업소 경계지점에 설치하여 사업소별(대블록별) 유입․유출량을 계측하는 유량계를 말한다.

바.“중블록유량계”라 함은 중블록별 유입․유출량을 계측하는 유량계로서 해당지역의 공급량 분석, 유수율 분석 등에 활용된다.

사.“가압장유량계”라 함은 가압수 지역에 설치된 유량계로서 가압수 지역의 공급량 분석, 유수율 분석에 활용된다.

아. “배수지유량계”라 함은 배수지에 설치된 유량계로서 배수지 해당지역의 공급량 분석, 유량흐름 분석 등에 활용된다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67502-P
	구역유량계 관리 절차서	쪽 수	3/5

자.“기준유량계”라 함은 공인교정기관의 현장교정용 표준유량계 또는 공인교정기관의 교정을 필한 휴대용 초음파유량계를 말한다.

차.“교정검사”라 함은 현장 유량계의 정확도 유지여부를 확인하기 위해 공인 교정기관 또는 아리수정수센터에서 기준유량계를 이용, 현장 유량계와 비교측정하여 오차율이 기준값을 초과할 경우 기준값 이내로 보정하는 일련의 작업을 말한다.

카.“생산량”이라 함은 아리수정수센터에서 생산한 수돗물 중 자체 사용수 등을 제외하고 수도사업소로 직접 송수한 유량을 말한다.

타.“공급량”이라 함은 송수유량계를 통해 각 수도사업소로 공급되는 유량을 말한다.

파.“확정 공급량”이라 함은 1차 및 2차 보정량을 확정하고 사업소간 이견을 조정하여 최종 확정된 수도사업소별 공급량을 말한다.

하.“미계측 관로”라 함은 블록 경계 지점에서 블록 상호간 확인되지 않는 유입 ․유출관로가 존재하거나, 계측되지 않고 타 블록으로 유입․유출되는 관로를 말한다.

갸.“관리사업소”라 함은 유량계의 유지보수 및 관리 책임이 있는 아리수정수센터와 수도사업소를 말하며 유량계에 대해 유출･입 관련이 있는 사업소는 “관련사업소”라 한다.

냐.“유량감시시스템”이라 함은 취․송수유량, 구역유량, 중블록유량, 가압장․ 배수지유량을 통합하여 감시하도록 아리수정수센터와 수도사업소, 본부에 설치된 계측장치 및 프로그램을 말한다.

4. 책임과 권한

가. 본부장

- 유량계 업무처리 지침 승인

나. 부본부장

- 유량계 업무처리 지침 검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67502-P
	구역유량계 관리 절차서	쪽 수	4/5

다. 시설안전부장

- 유량계 업무처리 지침 검토

라. 누수방지과장

- 유량계 업무처리 지침 작성

마. 관련부서 : 생산부장, 급수부장, 정수센터소장, 수도사업소장

-  유량계 유지관리에 대한 관련자료 제공

5. 업무처리 절차

가. 유량계 업무처리 지침

(1) 유량계 업무유지관리를 위한 기본계획을 수립하여 각 사업소에

통보한다

(2) 각 사업소장은 자체 시행계획을 수립하여 유지관리에 임한다

나. 유량계 업무처리 지침

(1) 유량계 점검 기준을 사업소에 통보 한다

(2) 유량계 설치 기준을 사업소에 통보 한다

(3) 각 사업소장은 자체 업무처리 계획을 수립 시행 한다

업무개선 idca
실 패 사 례
참 고 자 료
□업무인수․인계현황
일 자	인계자	일 자	인계자
	인수자		인수자
2001. 1. 8.	전기7급 문동하	2005. 3.15.	전기7급 이종수
	전기7급 이종수		전기7급 최병석
2007.10.15.	전기7급 최병석	2009. 3.21.	전기7급 문병선
	전기7급 문병선		전기7급 이광만
2012. 3.12.	전기6급 이광만	2015. 1.23.	전기6급 차경호
	전기7급 차경호		전기7급 장준원

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67502-P
	구역유량계 관리 절차서	쪽 수	5/5

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책임자	기 간	책임자
1	유량계 유지관리 관련서류	3년	누수방지과장	3년	행정운영과장
2	유량계 업무처리 관련서류	3년	누수방지과장	3년	행정운영과장

7. 관련표준

- 유량계 업무처리 지침서 (2014.9.01.)

8. 첨  부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67503-P
	배급수관 정비사업 업무절차서	쪽 수	1/5

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000 10.28	4	박채운	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 5. 7	4	김수영	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박채운 → 김수영
2	2004. 1.15.	3	홍갑표	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	4. 책임과 권한 (개정 전) 다. 급수부장 (개정 후) 다. 수도관리부장
3	2007.04.15	3	박처규	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 홍갑표 → 박처규
4	2007.10.15	5	박처규	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	4. 책임과 권한 (개정 전) 다. 수도관리부장 (개정 후) 다. 시설관리부장
5	2009.4.1	5	최명익	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박처규 → 최명익
6	2010.9.13	5	김기상	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 최명익 → 김기상
7	2011.9.9	5	김도섭	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김기상 → 김도섭
8	2012. 3.15	5	이준호	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김도섭 → 이준호
9	2012 10.3	5	박종일	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이준호 → 박종일
10	2014 1.15	5	이동욱	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박종일 → 이동욱
11	2014 1.29	3	이동욱	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	4. 책임과 권한 (개정 전) 다. 시설관리부장 (개정 후) 다. 시설안전부장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67503-P
	배급수관 정비사업 업무절차서	쪽 수	2/5

1. 목    적

정수센터에서 생산한 깨끗한 물을 수도관으로 공급하는 과정에서 노후된 상수도관

으로 인한 적수 등 수질저하를 방지하고 관노후로 인한 누수발생을 최소화함은

물론 소블록별 바둑판모양의 순환 배관망 구축 등 체계적으로 배급수관을 정비

하는데 있음.

2. 적용범위

가. 노후 배급수관(세척갱생관, 무라이닝관) 정비공사

3. 용어의 정의

가.종합정비 계획도 : 1/3,000 지번도를 활용하여 1개 도곽을 64㎝×54㎝로 규격화하여 1개 도곽에는 1개 블록이 다른 도곽에 표시되지 않도록 접합하여 상수도 배관망도 유지관리지침을 참조하여 제작된 도면

나.블록 : 서울시 전역을 소구역으로 분할하여 독립된 관망을 형성시켜 배관망을 쉽게 파악하고 균등수압 유지 및 출수불량, 원인분석, 야간  최소유량조사, 누수방지작업 시 단수구역최소화 등 배∙급수통제를 원활히 수행토록 500~800수전 정도로 나누어 놓은 고립된 구역

다.배관망도 : 지하에 매설된 수도관들의 현황을 도면에 옮겨 놓은 것을 말하며 상수도에 있어서는 일반도(1/10,000, 1/25,000, 1/50,000), 배관도(1/3,000), 관로도(1/500)로 축척과 업무의 용도에 따라 구분하여 사용하고 있다.

라.배수관 : 정수된 수돗물로 급수구역내의 수요자에게 분배하는 관 또는 배수시설에 의하여 소요압력(1.5~4.0㎏/㎠)하에서 소요량만을 급수구역에 운송하며, 배수지를 기점으로 급수장치까지 배수를 목적으로 부설한 관

마. 배수구역 : 급수구역을 급수의 편의상 나눈 소구역을 말한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67503-P
	배급수관정비사업업무절차서	쪽 수	3/5

바. 배수본관 : 배수지, 배수탑을 기점으로 하여 배수를 하기 위해 부설하는

배수관 중에서 근간이 되는 수도관을 말함.

사. 배수지관 : 배수본관에서 분기하여 직접 급수장치에 연결하는 관으로 구경이

350㎜ 이하의 관을 말함.

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 배급수관 정비사업 시행계획 승인

나. 부본부장

(1) 배급수관 정비사업 시행계획 검토

다. 시설안전부장

(1) 배급수관 정비사업 관련업무 담당부서 지정

(2) 배급수관 정비사업 추진계획 검토

라. 누수방지과장

(1) 배급수관 정비사업 추진계획 수립

(2) 사업소 배급수관 정비사업 시행에 관한 업무협조 및 지도

(3) 유수장애 이설업무 추진에 관한 업무협조 및 지도

5. 업무절차

가. 년도별 배급수관 정비사업 추진계획 수립

(1) 수립시기 : 4~5월

(2) 주요내용 : 사업소별 내년도 정비계획목표 확정

나. 사업계획 심사

(1) 심사시기 : 8~9월

(2) 심사내용 : 사업선정의 적정성

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67503-P
	배급수관정비사업업무절차서	쪽 수	4/5

다. 설계서 검토

(1) 검토시기 : 공사발주 전

(2) 검토내용 : 배급수관 정비공사 시행지침 준수여부

라. 개량실적관리

(1) 사업소 개량실적을 보고서식에 의거 관리

업무개선 Idea
실 패 사 례
참 고 자 료
업무 인수 ․ 인계 현황
일 자	인계자			일자	인계자
	인수자				인수자
2004.1.15	주 사		김 수 영	2007.04.15	주 사	홍 갑 표
	주 사		홍 갑 표		6 급	박 처 규
2009.4.1	6 급		박 처 규	2010.9.13	6 급	최 명 익
	6 급		최 명 익		6 급	김 기 상
2011.9.9	6 급		김 기 상	2012.3.15	6 급	김 도 섭
	6 급		김 도 섭		6 급	이 준 호
2012.10.3	6 급		이 준 호	2014.1.15	6 급	박 종 일
	7 급		박 종 일		6 급	이 동 욱

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임자
1	배급수관정비공사일반철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
2	배급수관정비사업실적철	1년	누수방지과장	5년	행정운영과장
3	사업계획심사철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
4	심사결과통보철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
5	유수장애이설 일반철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
6	유수장애이설 실적관계철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67503-P
	배급수관 정비사업 업무절차서	쪽 수	5/5

7. 관련표준

가. 배급수관 정비사업 업무 지침서

나. 세척갱생 처리 지침서

다. 상수도 유수장애 지침서

8. 첨    부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	긴급 누수복구 업무 절차서	쪽 수	1/6

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000 10.28	52	오태명	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001 7.11	3, 4	박채운	○ 업무절차에 나열되어 있는 지침서 종류를 관련표준 으로 변경	○ “(1)원인자 및 손괴자부담금 부과개선”, “(2)상수도돌발사고처리지침”, “(3)상수도긴급누수복구공사 단가계약 시행지침” “(4)누수신고 포상금 지급 지침”을 관련표준으로 변경
		5 ～ 52	박채운	○ 절차서철에 지침서가 첨부되어 있어 삭제하고 지침서철에 등재	○ “[별표1]상수도돌발누수사고 처리지침”,“[별표2]원인자 및 손괴자부담금 부과업무 개선”,“상수도긴급누수복구 공사 단가계약시행지침”, “설계일반지침서”, “관 접합공, 절단공, 철거공, 수채공 단가산정기준” “차량 운행경비 산정” “상수도 긴급누수보수공사 시방서” “누수신고보상금 및 포상금 지급 지침”을 삭제
		3	박채운	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 오 태명 → 박 채운
2	2005. 1. 5.	3	노영석	○ 직제개편으로 책임과 권한 내용 수정	○ 급수부장 → 수도관리부장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	긴급 누수복구 업무 절차서	쪽 수	2/6

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
3	2006 01.01	6	이경재	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 노영석 → 이경재
4	2007. 10.15	6	이경재	○ 직제개편으로 책임과 권한 내용 수정	○ 수도관리부장 → 시설관리부장
5	2008.09.11	6	김달회	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이경재 → 김달회
6	2009.3.21	6	김수영	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김달회 → 김수영
7	2012.03.15	6	김도섭	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김수영 → 김도섭
8	2014.01.29	6	김도섭	○ 직제개편으로 책임과 권한 내용 수정	○ 시설관리부장 → 시설안전부장
9	2015.07.13	6	이태형	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김도섭 → 이태형

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	긴급 누수복구 업무 절차서	쪽 수	3/6

1. 목  적

상수도사업본부 산하 각 수도사업소에서 발생되는 상수도 돌발누수 사고시 체계적

이고 신속한 상황처리 및 긴급누수복구로 사고로 인한 피해를 미연에 방지하고

원활한 시민급수와 통행불편을 최소화하는데 있음.

2. 적용범위

가.구경 150㎜ 이상의 상수도 관로상 누수사고

나.주요 간선도로로 차량통행에 지장이 있는 돌발사고 누수

다.단수세대 1,000세대 이상 수계조절이 예상되는 경우

라.집단민원 및 재산과 인명의 피해가 예상되는 경우

마.방송, 언론매체에 보도되었거나 기타 보고가 필요하다고 판단되는 경우

3. 용어의 정의

가.긴급누수복구 : 지중에 매설되어있는 상수도시설물에서의 누수발생시 누수되는 부위에 대해 기존의 기능을 유지할 수 있도록 원상복구

나.손괴자부담금 : 수도시설을 손괴하거나 수도공사의 하자로 누수가 발생한 경우 그로 인하여 필요하게 된 수도시설의 수선 및 유지에 관한 비용이나, 손괴 예방을 위하여 필요한 시설의 비용을 사업자 또는 행위자에게 부담하는 금액

다. 누수신고 보상금 :  지중에 매설되어 있는 상수도관에서 누수발생사항을 최초로

신고한 시민에게 지급하는 보상금

라. 누수신고 포상금 : 구경 80㎜ 이상의 상수도 관로에서의 발생된 다량의 누수를

발견하여 유수율 증대에 크게 기여한 공무원

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 상수도 돌발 누수사고 처리지침 승인

나. 부본부장

(1) 상수도 돌발 누수사고 처리지침 검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	긴급누수복구업무 절차서	쪽 수	4/6

다.시설안전부장

(1) 상수도 누수복구 관련 업무 분장

(2) 상수도 누수복구 관련업무 지도감독

(3) 상수도 누수복구 관련업무 시행계획 검토

라. 누수방지과장

(1) 상수도 누수복구 관련업무 시행계획 수립 및 시행

5. 업무절차

가. 각 수도사업소에서 상수도관로상의 돌발누수발생시 업무처리기준이 되는           지침을 작성하여 시달

나. 상수도돌발누수사고 발생 시 현장지원

(1) 복구공사에 대한 기술지도

(2) 대형관로 누수발생 시 복구자재 지원

(3) 단수세대가 많은 경우 수계조절 등 급수지원

다. 누수원인분석

(1) 월별분석 : 각 수도사업소에 대한 누수원인분석

(2) 반기 및 년말 분석 : 누수원인 종합분석

업무개선idea
실 패 사 례
참 고 자 료	◦수도법 제54조 및 시행령 36조 ◦서울특별시 수도시설이설 등 원인자 및 손괴부담금 징수조례
○ 업무인계․인수현황
일 자		인 계 자	일 자	인 계 자
		인 수 자		인 수 자
2002. 1. 7		6급 박 채 운	2003. 7. 15	6급 조 상 덕
		6급 조 상 덕		6급 노 영 석

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	긴급누수복구업무 절차서	쪽 수	5/6

○ 업무인계․인수현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자
2006. 1. 1	6급 노 영 석	2008.09.11	6급 이 경 재
	6급 이 경 재		6급 김 달 회
2009.3.21	6급 김 달 회	2012.03.15	6급 김 수 영
	6급 김 수 영		6급 김 도 섭
2015.7.13	6급 김 도 섭
	6급 이 태 형

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책임자	기 간	책임자
1	월별 누수원인분석 관계철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
2	년간 종합원인분석 관계철	1년	〃	3년	〃
3	누수발생 보고서 관계철	1년	〃	1년	〃
4	누수신고 포상금 및 보상금 관계철	1년	〃	5년	〃
5	시민불편사항 관계철	1년	〃	1년	〃
6	누수복구 일반문서철	1년	〃	3년	〃

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	긴급 누수복구 업무 절차서	쪽 수	6/6

7. 관련표준

가. 상수도돌발누수사고 처리지침서

나. 원인자 및 손괴자 부담금 부과업무지침서

다. 상수도 긴급 누수복구공사 단가계약 시행지침

라. 설계일반 지침서

마. 차량운행 경비산정 지침서

바. 누수신고 포상금 지침서

8. 첨     부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	1/13

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000 10.28	26	류동열	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001 7.11	4	류동열	○ 특정연도 계획서가 첨부되어 있어 삭제	○ “(1) 별표1:2000년 지하누수 탐지계획서, “(2) 별표2:2000년 사업소별 누수탐지목표 삭제
		5～ 17	류동열	○ 첨부물 중 특정연도 계획서 삭제	○ “2000년도 지하누수탐지계획”, “사업소별 누수탐지 목표” 삭제
2	2005. 1. 5.	2	김달회	○ 직제개편에 따른 책임과 권한내용 수정	○ 급수부장 → 수도관리부장
3	2007.10.15	13	김달회	○ 직제개편에 따른 책임과 권한내용 수정	○ 수도관리부장 → 시설관리부장
4	2009.3.20	13	박종일	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김달회 → 박종일
5	2012. 01.01	13	이준호	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 박종일 → 이준호
6	2012. 01.29	13	이준호	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 시설관리부장 → 시설안전부장
7	2014. 08.01	13	이태형	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 이준호 → 이태형
8	2014.7.13	13	한현숙	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 이태형 → 한현숙

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	2/13

1. 목    적

지중에 매설된 각종 상수도시설물에서 지하로 누수되는 지점을 지하누수탐지기로

조기에 발견하여 누수부위를 보수함으로서 누수량을 줄이고 유수율을 향상시키고 원활한 시민급수로 상수도경영의 합리화를 도모코자 함

2. 적용범위

가. 야간최소유량측정에 의한 측정값이 불량한 블록의 누수탐지

나. 가압 및 재개발지역의 누수탐지

다. 시장 및 상가지역, 지하철역사 주변지역 등 취약지역의 누수탐지

3. 용어의 정의

가. 누수탐지 : 지중에 매설된 각종 상수도 시설물에서 누수되는 지점을 찾아

내어 수리함으로서 누수방지

나. 야간최소유량측정 : 수돗물을 거의 사용하지 않는 시간대인 00시～04시 사이에

블록을 고립시키고 블록내 유입배수관에 유량계를 설치하여

유입량과 수압을 측정하고 측정시간대에서 최소로 흐르는

유량을 분석하여 누수량의 다소여부를 판단하는 누수방지 기법

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 지하누수탐지업무 시행지침 승인

나. 부본부장

(1)  지하누수탐지업무 시행지침 검토

다. 시설안전부장

(1) 지하누수탐지업무 분장

(2) 지하누수탐지업무 지도감독

(3) 지하누수탐지업무 시행계획검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	3/13

라. 누수방지과장

(1) 지하누수탐지업무 시행계획수립

(2) 지하누수탐지업무 시행

5. 업무절차

가. 누수방지계획 수립

(1) 추진계획수립 및 사업소에 시행계획 시달

나. 야간최소유량측정 추진보고회의 개최

(1) 개최일정 계획수립

(2) 사업소에 계획시달

(3) 추진실적 및 향후계획에 대한 평가

(4) 평가결과를 사업소에 통보하고 추진독려

다. 야간최소유량측정 및 지하누수탐지 추진실적 수합

(1) 사업소실적합계

(2) 부진사업소에 대한 원인규명 및 추진독려

라. 심사평가서 작성

업무개선 idea
실패사례
참고자료
□ 업무인계∙인수자료
일자	인계자	일자	인계자
	인수자		인수자
2004. 7. 15.	주사 박종찬	2009. 3.20.	주사 김달회
	주사김달회		주사보 박종일
2012. 1. 1.	주사보 박종일	2014. 8. 1.	주사 이준호
	주사 이준호		주사 이태형
2015. 7.13.	주사 이태형
	주사 한현숙

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	4/13

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	지하누수탐지 일반관계철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
2	지하누수탐지 및 야간최소 유량측정 추진실적 월보철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
3	야간 최소유량 측정 보고회의 일반철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장

7. 관련표준

8. 첨    부

가. [별지1] : 지하누수탐지 및 야간최소유량측정 추진실적보고(1～9)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	5/13

[별지1]

누수탐지 및 야간최소유량측정 추진실적 보고

O O 수도사업소

1. 야간최소유량측정 추진 진도

□ 구별 블록수

구 별	전 체 블록수	그 동안 야간최소유량측정 블록의 내용				비 고
		계	양호블록수	보통블록수	불량블록수

□ 야간최소유량측정 추진내용                            (단위:블록수)

대 상(블록)				실 적(블록)				진 도(%)			목표 달성 (1.0㎥/ hr․㎞)	진도 (%)
계	배급수관정비사업	블록 고립화사업	관리 계획	계	배급수관 정비사업	블록 고립화사업	관리 계획	배급수관 정비사업	블록 고립화사업	관리 계획

□ 블록 고립화사업 추진

‘99.목표 (블록수)	추 진 실 적( 블 록 수)
	전 회	금 회	누 계	진 도 (%)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	6/13

□ 야간최소유량측정 횟수

측정 횟수 (블록수)						측정값(블록수)				측정블록내 누수 수리건수	1일 방지량 (톤)
구분	계	1차	2차	3차	4 차 이상	계	1톤 이하	1.1~ 3톤	3.1톤 이상
계
전회
금회

□ 허용누수량 이내(1.0㎥/hr․㎞ 이내) 블록별 현황

연번	구분 블록명	관로연장(㎞)			1회측정			2회측정			3․․ 회 측정	구경별 총 누수 수리건수
		계	배수관	급수관	측정일	측정값㎥/hr ㎞	누수 수리 건수	측정일	측정값㎥/hr ㎞	누수 수리 건수	좌동
계												Ø13～50 건 Ø80 : 건 Ø100
1												Ø13～50 건 Ø80 : 건 Ø100 :건
2												〃
3												〃

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	7/13

2. 누수탐지 실적

□ 누수수리 실적

구 분	계	지 상		지하누수	손괴자누수
		공도누수	옥내누수
전 회
금 회
누 계

※ 지하누수는 누수탐지 건수 임

□ 지하누수 탐지실적

구 분	단 위	지 하 누 수 탐 지 내 역
		계	지 하 철 역사누수	가 압 장 구역누수	시장주변 누 수	하수도 내 부	기타지역
전 회	건
금 회	건
누 계	건

□ 가압급수구역 누수탐지 실적

가압장명	단위	계
전회탐지 건 수	건
금회탐지 건 수	건
누계탐지 건 수	건

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	8/13

□ 시장주변 누수탐지 실적

시장명	단위	계
전회탐지 건 수	건
금회탐지 건 수	건
누계탐지 건 수	건

3. 지하철역사 주변 누수탐사

□ 지하철역사 주변 누수조사

지하철역명	누 수 수리일	관 종	구경(mm)	누수 원인	비 고

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	9/13

□ 지하철역사 누수조사 내용

지하철역사명	누 수 여 부 조 사
	조사일시	전기전도도	잔류염소	PH	인 입 관 탐지여부	판 단

4. 배급수관 정비사업 효과분석 추진실적

구 분	연번	공 사 명	준공 기한	관로 연장 (km)			최소유량측정값 (km당)
				계	배수관	급수관	공사전	공사후	측정차
1단계 공 사 ( 건)	1
	2
	3
	4
	5
	6
2단계 공 사 ( 건)	7
	8
	9
	10
3단계 공 사 ( 건)	11
	12

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	10/13

5. 불용관정비 실적(∮50mm 이상)

□ 구경별 세부정비 내역

연번	공 사 위 치	철거월일	관종	구경	연 장(m)			부설 년도	사 유
					소계	철거	폐쇄
계
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※ 불용관 정비실적은 배급수관정비사업 이외의 누수복구팀 또는

불용관 정비사업 등의 별도사업으로 추진한 내역을 정리

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	11/13

6. 누수방지 추진내용

※ 누수방지작업 추진내용을 6하 원칙에 의하여 구체적으로 작성

7. 향후 추진계획

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	12/13

0000년 사업소별 누수탐지 실적

구 분	목 표 (건)	탐지연장(㎞)	추 진 실 적				진 도 (%)
			탐지건수	누수탐지 방 지 량 (㎥/일)	불용관 철거 폐쇄
					배관탐지 (건)	철거폐쇄 연장(m)
계
중 부
서 부
동 부
북 부
강 서
남 부
강 남
강 동

(   )는 정탐

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67505-P
	지하누수탐지업무절차서	쪽 수	13/13

0000년 사업소별 야간최소유량측정 실적

구분	대상(블록수)				실적(블록수)				목표달성 (1.0㎥/hr.㎞이내)	진도 (%)
	계	배급수관정비사업	블록 고립화 사업	관리계획블록 (기고립)	계	배급수관정비사업	블록 고립화 사업	관리계획블록 (기고립)
계
중부
서부
동부
북부
강서
남부
강남
강동

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	상수도 시공감독 업무 절차서	쪽 수	1/5

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000 10.28	4	오태명	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 07.11	4	박채운	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 오태명 → 박채운
2	2002. 07.15	4	최충남	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박채운 → 최충남
3	2003.07.15	4	이성환	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 최충남 → 이성환
4	2005.01.15	4	박처규	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이성환 → 박처규
5	2006.07.15	4	신근호	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박처규 → 신근호
6	2006.12.26	4	이태형	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 신근호 → 이태형
7	2007.10.15	4	이태형	○ 직제 개편으로 부서 명칭변경	○ 수도관리부 → 시설관리부
8	2011.09.09	4	김윤환	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이태형 → 김윤환
9	2014.01.15	4	이태형	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김윤환 → 이태형
10	2014.01.29	22	이태형	○ 조직개편으로 부서 명칭 변경	○ 시설관리부 → 시설안전부 (시장방침 제13호, ‘14.01.29.)
11	2014.08.01	4	최경서	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이태형 → 최경서

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	상수도 시공감독 업무 절차서	쪽 수	2/5

1. 목    적

사업소에서 시행하는 각종 상수도공사에 대한 시공감독업무 중 일부를 민간에게

위탁함으로서 수도토목직원들의 업무과중으로 소홀해지기 쉬운 현장감독업무를

보완하여 시민불편을 줄이고 공사품질을 향상하기 위함임

2. 적용범위

가. 사업소 급수운영과 및 시설관리과에서 시행하는 각종공사에 대한 시공감독 업무

나. 수도사업소장이 별도로 지시하는 과업에 대한 시공감독업무

3. 용어의 정의

가.시공감독 : 발주자로부터 건설공사의 감독업무를 위탁받은 자가 설계도서기타 관계서류와 관계법령의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하는 업무와 품질관리, 시공관리, 안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 것.

나.감독대행자 : 공사감독에 있어서 감독공무원을 대리하여 계약의 정직한 이행을확보하기 위해서 계약서, 설계도서대로 공사가 이루어지고 있는가를 현장에서 확인하는 감독대행업체 직원

다.위탁업무 : 공사감독업무를 대리하여 주도록 위임한 업무

라.실비정액가산방식 : 직접인건비, 직접경비, 제경비와 기술료의 합계액으로 대가를산출하는 방식

마.수탁자 : 상수도공사 감독업무에 관한 행정기관의 권한을 위임받아 시행하는법인, 단체, 주식회사 또는 개인을 말한다

바. 비상주감독대행자 : 현장에 상주하지 않고 사무실에서 근무하면서 상주 감독대행자들을 업무수행을 보조하고 발주부서의 지시사항 등을 상주 감독대행자에게 전달하는 업무를 수행하는 자

사. 상주 감독대행자 : 현장에 상주하면서 공사감독업무를 수행하는 자

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	상수도 시공감독 업무 절차서	쪽 수	3/5

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사 시공감독업무 시행승인

나. 부본부장

(1) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사 시공감독업무 시행검토

다. 급수부장, 시설안전부장

(1) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사 시공감독업무분장

(2) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사 시공감독업무 지도감독

(3) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사 시공감독업무시행계획 검토

라. 배수과장, 급수설비과장, 누수방지과장, 시설관리과장

(1) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사 시공감독업무 시행계획수립         (2) 각종 상수도공사 및 포장도로굴착복구공사시행

5. 업무절차

가. 위탁업체 선정

(1) 용역발주

(2) 용역입찰공고문작성 및 공고의뢰

(3) 과업설명

(4) 사업수행참여신청서 및 입찰서 접수

(5) 용역참여업체의 수행능력평가실시

(6) 입찰서 및 사업수행능력평가서 송부

나. 위탁계약 및 위탁업무 용역수행계획서 통보

(1) 용역수행계획서 검토

(2) 상주 및 비상주감독대행자의 적정배치여부 확인

(3) 상주 및 비상주 감독대행자의 자격확인

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	상수도 시공감독 업무 절차서	쪽 수	4/5

다. 감독대행자 근무상태 점검

(1) 공사현장 불시 점검 또는 주간 업무보고서에 의한 확인

(2) 부실감리자에 대해서는 벌점조치

(3) 출근부확인에 의한 근무상태 확인

라. 용역수행대가 지급

(1) 출근부에 의거 대가지급

(2) 공휴일 및 야간 근무 시에는 다음날 오전은 휴무처리

(3) 용역업체의 기성지급 신청 시 최대한 빠른 기일내 기성지급

업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료
○ 업무 인수․인계 현황
일 자	인 계 자		일 자	인 계 자
	인 수 자			인 수 자
2003.07.15	최 충 남		2005.07.15	이 성 환
	이 성 환			박 처 규
2006.07.15	박 처 규		2006.12.26	신 근 호
	신 근 호			이 태 형
2011.09.09	이 태 형		2014.01.15	김 윤 환
	김 윤 환			이 태 형
2014.08.01	이 태 형
	최 경 서

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67506-P
	상수도시공감독업무절차서	쪽 수	5/5

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	소규모 상수도공사 감독위탁 업무철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
2	소규모 상수도공사 감독위탁비 지급철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
3	소규모 상수도공사 감독위탁 협의철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장
4	상수도공사 시공감독 위탁 업무철	1년	배수과장	3년	행정운영과장
5	상수도공사 시공감독 위탁 업무철	1년	급수설비과장	3년	행정운영과장
6	상수도공사 시공감독 위탁업무 기성 지급철	1년	급수설비과장	3년	행정운영과장

7. 관련표준

가. 상수도송∙배수관정비공사 시공감독위탁업무 지침서

나. 상수도공사(수탁공사, 시설물공사)및 굴착복구공사 시공감독위탁업무 지침서

8. 첨    부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	1/16

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	16	정윤홍	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2011. 10.27	2	선우요섭	o 책임과 권한 변경	o 차장, 시설부장 → 부본부장, 급수부장
2	2011. 10.27	4	선우요섭	o 업무절차	o 수도자재사업소장 → 수도자재관리센터소장
3	2011. 10.27	6～10	선우요섭	o 업무처리 절차서	o 자재사업소 → 수도자재관리센터
4	2014. 12.10	2	이태형	o 책임과 권한 변경	o 급수부장 → 시설안전부장
5	2014. 12.10	9	이태형	o 기록관리자 변경	o 시설과장→ 누수방지과장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	2/16

1. 목  적

본 절차서는 서울특별시상수도사업본부(이하“우리본부”라 한다.)에서 발주하여  시행되는 각종공사현장에 수도사업을 위한 각종자재를 효과적으로 관리하기위한 자재의 수급계획․구입․출납․발생품․불용품의 관리등 필요한 사항을 규정하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 우리본부에서 시행하는 각종공사현장에서 수도사업을 수행하는 모든 수도사업자의 업무처리에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. “자재”라 함은 수도시설에 사용되는 모든 자재를 말한다.

나. “저장품”이라 함은 저장하고 있는 자재로서 청구에 의하여 불출될 수 있는 정상적인 자재로서 저장품계정으로 분류되는 자재를 말한다.

다. “조달기간”이라 함은 자재를 구입하기 위한 결재일 또는 구입계약일로부터 검수완료     되어 입고조치가 완료된 날까지의 기간을 말한다.

4. 책임과 권한

가. 본 부 장

(1) 1건당 5천만원 이상인 물품제조 구매 결정에 대한 승인

나. 부본부장

(1) 1건당 1천만원 이상 5천만원 미만의 물품제조 구매 결정에 대한 승인

다. 시설안전부장

(1) 자재사용계획 수립 및 제출

(2) 자재사용계획의 변경 승인

(3) 1건당 1천만원 미만의 물품제조 구매 결정에 대한 승인

(4) 발생품(재용,불용)에 대한 입고

(5) 출고 요청

(6) 발생품평가에 대한 승인

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	3/16

라. 시설과장

(1) 자재사용계획서 작성

(2) 자재사용계획의 변경 작성

(3) 자재의 구입 및 절차 계획서 작성

(4) 입고요청서 작성

(5) 출고 요청서 작성

(6) 발생품평가서 작성

5. 업무절차

가. 자재(재용,불용)업무처리 지침

(1) 자재사용계획서 수립

(가) 당해 사업년도의 예산이 확정되면 각 부의 장은 자재사용계획을 수립하여야 한다.

(나) 매년 1월 말일까지 자재사용계획서를 작성하여 본부장에게 제출하여야 한다.

(다) 자재사용계획서는 예산서에 구분․표시된 공사 및 자재사용을 수반하는 예산 과목별로 각각 작성하여야 한다.

(2) 자재 사용계획의 변경

(가)  주관부의 장은 세출예산의 추가 또는 수정이 있거나 자재사용계획서       작성 당시 미정이었던 공사설계의 완성으로 인하여 자재사용계획을        수정 또는 변경하고자 하는 경우에는 본부장으로부터 승인을 받아야 한다.

(3) 자재의 구입 및 절차

(가)  자재의 구입은 자재사용계획서에 맞는 적정량을 구입하여야 한다.      다만 긴급, 특별한 사정으로 자재를 구입하여야 하는 경우가 발생      하는 때에는 그러하지 아니한다.

(나)  특수자재 또는 가격앙등의 우려가 있다고 판단되는 경우에는 6월       또는 1년의 소요량을 일시에 구입할 수 있다. 이 경우 일시구입량을 저장할 능력이  부족하거나  자금사정으로  인하여  일시에  구입함이 적정하지 않다고  판단되는 경우에는 단가계약에 의하여 수시로납품 하도록 할 수 있다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	4/16

(다) 자재를 구입하고자 하는 경우에는 자재 구입여부를 결정하고 구매부서로 구매 요구하여야 한다.

1) 구입 품명의 수량

2) 구입하려는 사유

3) 산출가격 및 예산과목

4) 계약방법

5) 기타 구입에 필요하다고 인정하는 사항

(4) 입고

(가) 주관부서의 장은 발생품이 발생되었을때 입고의뢰서와 발생품 평가조서를 작성하여 발생품을 입고 조치하여야 한다.

(나) 수도자재센터소장은 발생품을 수납하는 경우에는 입고의뢰서와 발생품 평가조서를 확인하고 이와 일치하는 경우에 한하여 입고할 수 있도록 하여야 한다.

(다)  수도자재센터소장은 입고가 완료되는 경우 입고전표를 작성하고      이를 지체없이 입고를 의뢰한 자에게 송부하여야 한다.

(5) 출고

(가) 자재를 청구하고자 하는 자는 자재청구서를 수도자재사업소장에게 제출하여야 한다.

(나) 자재청구서를 접수받은 수도자재사업소장은 이를 확인하고 이상이 없는 경우 자재를 출고하여야 한다. 이 경우 자재를 출고한 수도자재사업소장은 출고전표를 작성하여 청구한 자에게 송부하여야 한다.

(6) 발생품

(가) 각 주관부서의 장이 각호의 1에 해당하는 자재를 발견하는 경우에는 지체없이 그 발생원인을 명기한 입고의뢰서 및 발생품평가조서를

작성하고 이를 수도자재사업소장에게 송부하여야 한다.

1) 공사 등이 시공에 따르는 발생품

2) 공사잔품 또는 잉여품

3) 기부재료를 받는 경우의 기부품

4) 불용품 및 기타물품 등

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	5/16

(나) 발생품평가조서에는 입고하고자 하는 자재를 다음 각호와 같이 구분   하여야 한다.

1) 재용품 : 신품에 대한 가용도 50%이상

2) 불용품 : 신품에 대한 가용도 50%미만

(다) 재용품 또는 불용품으로 구분하기 위하여는 다음 순서에 따라 평가하고  그 결과를 발생품평가조서에 기재하여야 한다.

1) 1차평가 : 공사감독자

2) 2차평가 : 공사주관 부서의 장

3) 3차평가 : 물품관리관

(라) 재용품가격은 최근의 조달가액에 발생품평가조서에 의한 신품에 대한     가용도를 곱한 금액으로 한다.

(마) 재용품 또는 잉여품은 수도자재사업소장의 출․입고 절차를 필하지 아니하고 동일공사 또는 타 공사에 사용할 수 없다. 다만, 시설부에서 발생하는 잉여품 또는 재용품을 당해 시설부에서 적극적으로 재사용하기 위하여 자체 보관․관리할 수 있으며, 당해 시설부장의 결정에 의하여 동일공사 또는 타 공사에 사용할 수 있다.

6. 업무 처리절차 및 지침

업무개요	◦자재사용계획서 수립 및 변경 ◦자재의 구입 ◦발생품(재용,불용)의 입.출고	관련법규	◦서울특별시 규칙제2880호 서울특별시수도자재관리규칙

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	6/16

세부 업무방법 및 유의사항	관련부서	결재자	업무흐름
가. 자재사용계획서 수립 및 변경 (1) 당해 사업년도의 예산이 확정되면 자재사용 계획수립한다. (2) 매년 1월말일까지 자재사용 계획서를 작성하여 본부장에게 제출한다. (3) 자재사용 계획서는 예산서에 구분. 표시된 공사 및 자재사용을 수반하는 예산 과목별로 각각 작성하여야한다. (4) 세출예산의 추가 또는수정이 있거나 자재사용 계획을 수정 또는 변경하고자 또는변경하고자 하는 경우에는 부장으로부터 승인을 받아야 한다. 나. 자재의 구입 및 절차 (1) 자재의 구입은 자재사용 계획서에 맞는 적정량을 구입하여야 한다. (2) 특별한 사정으로 자재를 구입하여야 하는 경우가 발생하는 때에는 그러하지 아니한다. (3) 특수자재 또는 가격앙등의 우려가 있다고 판단되는 경우에는 6월 또는 1년의 소요량을 일시에 구입할 수 있다. (4) 자재를 구입하고자하는 경우에는 자재 구입여부를 결정하고 구매 부서로 구매 요구하여야 한다. (가) 구입 품명의 수량 (나) 구입하려는 사유 (다) 산출가격 및 예산과목 (라) 계약방법 (마) 기타 구입에 필요하다고 인정하는 사항	본부 각 부 수도자재관리센터 본부 각 부 수도자재관리센터	부 장 본부장	자재사용 계획수립 ↓ 본부장에게 제출 자재사용 계획서에 의거 자재구매 요구서 작성 및 결정 ↓ 잉여품,재용품 확인 ↓ 자재구매 요구서 제출 ↓

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	7/16

세부 업무방법 및 유의사항	관련부서	결재자	업무흐름
다. 발생품(재용,불용)의 입.출고 (1) 자재를 청구하고자 하는 자는 자재 청구서를 수도자재관리센터소장에게 제출하여야 한다. (2) 자재청구서를 접수받은 수도자재 관리센터소장은 이를 확인하고 이상이 없는 경우 자재를 출고하여야 한다. (3) 이 경우 자재를 출고한 수도자재 관리센터소장은 출고전표를 작성하여 청구한 자에게 송부하여야 한다. (4) 각 주관부서의 장이 각호의 1에 해당하는 자재를 발견하는 경우 에는 지체없이 그 발생원인을 명 기한 입고의뢰서 및 발생품평가 조서를 작성하고 이를 수도자재 관리센터소장에게 송부하여야 한다. (가) 공사 등이 시공에 따르는 발생품 (나) 공사잔품 또는 잉여품 (다) 기부재료를 받는 경우의 기부품 (라) 불용품 및 기타물품 등 (5) 발생품평가조서에는 입고하고자 하는 자재를 다음 각호와 같이 구분 하여야 한다. (가) 재용품:신품에 대한 가용도50%이상 (나) 불용품:신품에 대한 가용도50%미만 (6) 발생품 또는 불용품으로 구분하기 위하여는 다음 순서에 따라 평가하고 그 결과를 발생품평가조서에 기재 하여야 한다.	본부 각 부 수도자재관리센터	부 장	자재청구서 작성 및 결정 ↓ 자재청구서 송부 ↓ 잉여품,재용품출고 (출고전표 작성) ↓ 발생품(재용,불용품) 발생 ↓ 입고의뢰서 및 발생품평가조서 작성 ↓ 재용품,불용품으로 구분하여 자재평가 ↓ 입고의뢰서 및 발생품평가조서 송부 ↓ 입 고 ↓ 입고전표 송부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	8/16

세부 업무방법 및 유의사항	관련부서	결재자	업무흐름
(가) 1차 평가 : 공사감독자 (나) 2차 평가 : 공사주관 부서의 장 (다) 3차 평가 : 물품관리관 (7) 재용품 가격은 최근의 조달가액에 발생품평가조서에 의한 신품에 대한 가용도를 곱한 금액으로 한다. (8) 재용품 또는 잉여품은 수도자재관리 센터소장의 출.입고 절차를 필하지 아니하고 동일공사 또는 타 공사에 사용할 수 없다. 다만, 각수도 사업소에서발생하는 잉여품 또는 재용품을 당해 각수도사업소에서 적극적으로 재 사용하기 위하여 자체 보관. 관리할 수 있으며, 당해 시설안전부장의 결정에 의하여 동일공사 또는 타 공사에 사용할 수 있다. (9) 주관부서의 장은 발생품이 발생되 었을 때 입고의뢰서와 발생품평가 조서를 작성하여 발생품을 입고 조치 하여야 한다. (10) 수도자재관리센터소장은 발생품을 수납 하는 경우에는 입고의뢰서와 발생품 평가조서를 확인하고 이와 일치하는 경우에 한하여 입고될 수 있도록 하여야 한다. (11) 수도자재관리센터소장은 입고가 완료 되는 경우 입고전표를 작성하고 이를 지체없이 입고를 의뢰한 자에게 송부하여야 한다.	본부 각 부 수도자재관리센터	부 장	자재청구서 작성 및 결정 ↓ 자재청구서 송부 ↓ 잉여품,재용품출고 (출고전표 작성) ↓ 발생품(재용,불용품)발생 ↓ 입고의뢰서 및 발생품평가조서 작성 ↓ 재용품,불용품으로 구분하여 자재평가 ↓ 입고의뢰서 및 발생품평가조서 송부 ↓ 입 고 ↓ 입고전표 송부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	9/16

업무개선 Idea
실패사업
참고자료
□ 업무 인계․인수현황
일 자		인 계 자	일 자	인 계 자
		인 수 자		인 수 자

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	자재(재용,불용)관계철	1년	누수방지과장	3년	행정운영과장

7. 관련표준

8. 첨  부

가. 별  지

(1) 별지1 : 자재사용계획서

(2) 별지2 : 입고의뢰서

(3) 별지3 : 발생품(재용품,불용품)평가조서

(4) 별지4 : 입고전표

(5) 별지5 : 자재청구서

(6) 별지6 : 출고전표

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	10/16

자재(재용,불용)업무처리 흐름도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

경영관리부 요금관리부		시설안전부		수도자재관리센터
		↓
협 의	←	당해사업년도의 예산 수립
		↓
협 의	←	자재사용계획서 제 출	→	잉여품,재용품 확 인
		↓
협 의	←	자재사용계획서에 의거 자재구매	←	잉여품,재용품 확 인
		↓
		자재청구서 작 성	→ ←	잉여품,재용품 출고(출고전표)
		↓
		발생품(재용품불용품)발생
		↓
		입고의뢰서및발생품평가조서작성
		↓
		입 고	→ ←	입고 전표 송부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	11/16

[별지제1호서식]

자재사용계획서 예산과목 공사명
품명	단위	수량	1/4분기				2/4분기				3/4분기				4/4분기
			1	2	3	계	4	5	6	계	7	8	9	계	10	11	12	계

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	12/16

[별지제2호서식]

입 고 의 뢰 서 년 월 일 귀하 입고의뢰자 발생장소 또는 시공명
품 명	규 격	단 위	수 량	비 고

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	13/16

〔별지 제3호 서식〕

발생품(재용품, 불용품)평가조서 발생장소 및 시공명
품명	규격		단위		수량		평가								비고
							1차	2차	3차		기준액		입고가액
조서작성자 : 1차 2차 3차
품명		규격		단위		수량		평가설명						비고
								1차		2차		3차

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	14/16

〔별지 제4호 서식〕

입 고 전 표 년 월 일
입고전표				물품관리관	담 임	계
입 고 처
○ ○ ○ 물품출납원 ○ ○ ○ 물품관리관 귀하 다음과 같이 자재를 입고하였기 보고합니다.
품 명	입고년월일	규 격	단 위	수 량	적 용	소 장
						담임
						기장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	15/16

〔별지 제5호 서식〕

자 재 청 구 서 년 월 일 청구자 공 사 명 :
품 명	규 격	단 위	수 량	비 고

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67507-P
	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	쪽 수	16/16

〔별지 제6호 서식〕

출 고 전 표 년 월 일
출고전표				물품관리관	담 임	계
출 고 처
○ ○ ○ 물품출납원 ○ ○ ○ 물품관리관 귀하 다음과 같이 자재를 출고하였기 보고합니다.
품 명	출고년월일	규 격	단 위	수 량	적 용	소 장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	1/20

제․개정이력요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	21	강성문	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2000. 11.20	9.10	“	o 건설기술관리법 시행령 변경	o 품질보증계획 →품질보증 계획 또는 품질시험계획
2	2009. 12.01	1	최희권	o 문서번호 재조정	o본부67302-P →본부67301
3	2011. 10.27	1	선우요섭	o 문서번호 재조정	o본부67301-P →본부67401P
4	2011. 10.27	4	선우요섭	o 책임과 권한 변경	o차장 → 부본부장 o시설부장 → 급수부장
5	2011. 10.27	6	선우요섭	o 건설기술관리법 시행규칙 변경	o규칙 제16조제1항 → 규칙 제 39조제1항(품질시험검사)
6	2011. 10.27	7	선우요섭	o 시험검사장비 및 인력기준 추가	o특급품질관리대상공사 추가
7	2011. 10.27	8	선우요섭	o 건설기술관리법 변경 (품질시험계획대상 라항)	o규칙 제13조의5제1항 → 시행령 제41조
8	2011. 10.27	9	선우요섭	o 문구 변경	o품질보증 → 품질관리
9	2014. 05.23	5~16	정연준	o 건설기술진흥법 제정․시행	o 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 변경
10	2015. 11.30	3	정연준	o 책임과 권한 변경	o급수부장 → 시설안전부장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	2/20

1. 목   적

본 절차서의 목적은 서울특별시 상수도사업본부(이하 본부라한다)의 합리적,

경제적 내구적인 구조물을 만들어 내는 것으로 소정의 품질을 확보하고 품질을     종래 보다 향상 개선하며 또한 편차를 적게 하고 균일한 품질을 유지함으로써      실수, 손실, CLAIM등을 방지하여 품질에 대한 신뢰성 증가와 원가절감을 도모하는데     있다.

2. 적용범위

본 절차서는 본부에서 시행하는 모든 공사의 체계적 지속적인 중점 관리를

통해 품질을 일정 수준까지 향상시켜 신뢰할 수 잇는 품질을 확보코자 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 品質經營 : 품질방침, 목표 및 책임을 결정하고, 이들을 품질계획수립,    품질관리, 품질보증, 품질개선과 같은 수단에 의해 품질시스템

내에서 실행하는 전반적 관리 기능에 관한 모든 활동

나. 品質시스템 : 품질경영을 실행하는데 필요한 조직적 구조, 책임, 절차, 과정 및 지원

다. 品質管理 : 품질에 대한 요구사항을 충족시키는데 사용되는 운영기법 및 활동

라. 品質保證 : 제품 또는 서비스가 주어진 품질요구를 충족시킬 것이라는 적절한 확신을 주기 위해 품질시스템 내에서 수행되는 모든 계획적이고 체계적인 활동

마. 品 質 : 제품 또는 서비스가 명시적 또는 묵시적 요구를 만족시키는 능력의 특징 또는 특성의 총체

바. 試驗(INSPECTION) : 試料 및 시험편에 대하여 그 特性을 조사하여                                   자료(DATA)를 내는 것

사. 檢査(TESTING) : 시험결과를 判定基準과 비교하여 합격품과 불합격품의                                  判定을 내리는 것

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	3/20

4. 책임과 권한

건설공사 품질 관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 건설공사 품질 관리 점검계획 수립 승인

나. 부본부장

(1) 점검계획 수립 검토

다. 시설안전부장

(1) 건설공사 품질 관리 점검계획 수립 및 승인 추진                          (2) 건설공사 품질 관리 점검계획 준수

5. 업무절차

가. 품질관리 업무 내용

(1) 시공 관련팀

(가) 품질 및 안전관리 계획 방침 수립 및 운영

(나) 공사 현장별 평가 결과에 대한 분석

(다) 관련 업무 자료 수집

(라) 기타 관련업무 개선 방안 연구검토 등

(마) 품질관리 계획 지침에 의한 공사현장 품질관리 업무 실시 운영 총괄

(바) 공사현장 품질관리체계 확립 유지 지도

(사) 품질관리 점검반 운영, 공사현장 일상․특별 점검 확인 및 평가 실시

(아) 공사 시공실태 설계도서 적합여부 점검 확인 및 시정

(자) 부실시공 적출, 시정 및 관련자 문책 조치(행정처분 등)

(차) 감리단, 시공사 품질관리팀 지도교육 실시

(카) 공사현장별 품질관리에 대한 관련자료 관리

(타) 기타 관련업무 자료수집 및 개선방안 연구 검토 등

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	4/20

(2) 업무 지원자

(가) 담당공사현장 품질보증(시험) 계획서 검토, 확인 처리

(나) 현장 품질관리 확행(계획서 내용과 같이) 여부 확인 및 지도

(다) 총괄팀 업무협조 및 업무대행

(라) 공사 분야별 주요 공종 실명제 실시 지도, 확인

(마) 부실시공 방조 또는 방치여부 적출 보고 및 후속 조치

(재시공, 관련자 문책 조치 등)

(바) 감리원 및 시공사 품질관리인 자질 등 당해 현장 적격 여부 확인

판단 조치

(사) 현장 품질관리 개선방안 연구 검토

(아) 기타 품질관리 전반에 관한 사항 지도 및 확인 등

(3) 감리단 품질관리팀

(가) 현장 품질보증(시험)계획 수립의 적정성 검토 및 확인

(나) 현장 품질관리체계 확립 및 시험실 관리 감독

(다) 현장시공 및 반입자재 품질 책임 확인

(라) 총괄팀 업무협조 및 지시사항 이행

(마) 공사 분야별 주요공종 실명제 실시 확인

(바) 현장 우수시공사례 발굴 보고 및 품질관리 교육 실시

(사) 현장 품질관리 개선방안 연구검토, 보고

(아) 기타 품질관리 전반에 관한 사항 확인 및 지도감독 등

(4) 시공사 품질관리팀

(가) 현장 품질보증(시험) 계획 수립 및 실시 이행

(나) 현장 품질관리체계 확립(하도급자 포함) 및 시험실 운영

(다) 현장시공 및 반입자재 품질 책임관리

(라) 현장 부실사항 책임시정 및 결과보고

(마) 감리단 품질관리팀 업무협조 및 지시사항 이행

(바) 공사 분야별 주요공종 실명제 실시 이행

(사) 품질관리(시험 등) 실적 자료관리

(아) 기타 현장 품질관리 전반에 관한 사항 이행 등

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	5/20

나. 품질시험 및 검사

(1) 품질시험 및 검사의 실시

(가) 건설업자와 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질시험 및 검사를 하여야 한다. 이 경우 건설업자나 주택건설등록업자에게 고용되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 그 업무를 수행하여야 한다.(법 제55조제2항)

(나)   법 제55조제2항 또는 법 제60조제1항에 따라 품질시험 및 검사(이하 "품질검사"라 한다)를 하거나 대행하는 자는 별지 제42호서식의 품질검사 대장에 품질검사의 결과를 적되, 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리하여야 한다.(규칙 제50조제1항)

(다)  품질시험․검사 결과에 대하여 품질시험․검사대장에 감독자(감리자)의 확인을             받아야 한다.

(라) 품질시험 및 검사를 실시할 때 건설공사 현장에서 실시함이 적절한                    시험 및 검사는 건설 공사현장에서 시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(마)  구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험종목의 품질시험을                 실시할 때에는 발주자가 확인하여야 한다.

(2) 품질시험 및 검사기준(영 제91조제1항)

법 제55조제2항에 따른 품질시험 및 검사(이하 "품질검사"라 한다)는 한국산업표준, 법 제44조제1항 각 호에 따른 건설공사 설계기준 및 건설공사 시공기준 또는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 건설공사 품질검사기준에 따라 실시하여야 한다.

(3) 품질시험 및 검사를 실시하지 아니할 수 있는 경우(영 제91조제2항)

제1항에도 불구하고 건설업자와 주택건설등록업자는 다음 각 호의 재료에 대해서는 품질검사를 하지 아니할 수 있다. 다만, 시간경과 또는 장소 이동 등으로 재료의 품질 변화가 우려되어 발주자가 품질검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	6/20

1. 법 제60조제1항에 따라 품질검사를 대행하는 국립·공립 시험기관 또는 건설기술용역업자의 시험성적서가 제출되는 재료. 이 경우 시험성적서가 제출되는 재료(자재·부재를 포함한다. 이하 같다)는 발주자 또는 건설사업관리용역업자의 봉인(封印) 또는 확인을 거쳐 시험한 것으로 한정한다.

2. 한국산업표준 인증제품

3. 「주택법」 등 관계 법령에 따라 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 재료

(4) 품질시험기준에 명시되지 아니한 자재

(가) 당해 공사의 설계도서에 제시된 시험 공종, 방법 및 빈도에 따라 품질을   확인하여야한다.

(5) 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준(시행규칙 제50조제4항관련)

대상공사 구분	공사규모	시험ㆍ검사장비	시험실 규모	건설기술자
특급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	100㎡ 이상	가. 특급기술자 1명 이상 나. 중급기술자 2명 이상
고급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 특급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	50㎡ 이상	가. 고급기술자 1명 이상 나. 중급기술자 2명 이상
중급 품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	30㎡ 이상	가. 중급기술자 1명 이상 나. 초급기술자 1명 이상
초급 품질관리 대상공사	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	20㎡ 이상	초급기술자 1명 이상

비고

1. 건설기술자는 법 제21제1항에 따른 신고를 마치고 품질관리 업무를 수행하는 사람을 말하며, 건설기술자란의 각각의 등급은 영 별표 1에 따라 산정된 등급을 말한다.

2. 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류ㆍ규모 및 현지 실정과 법 제60조제1항에 따른 국립ㆍ공립 시험기관 또는 건설기술용역업자의 시험ㆍ검사대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	7/20

(6) 품질시험 또는 검사성과의 관리 등

(가) 건설업자나 주택건설등록업자는 품질검사를 완료하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 품질시험 또는 검사 성과 총괄표를 작성해야 한다(영 제93조제1항)

(나) 영 제93조제1항에 따른 품질검사 성과 총괄표는 별지 제43호서식과 같다.(규칙 제51조)

(다) 건설업자 및 주택건설등록업자는 기성부분검사, 예비준공검사 및 준공  검사를 신청하는 때에는 이를(품질시험․검사성과 총괄표) 발주자에게  제출하여야 한다.

(라) 준공등의 검사자는 제출된 “품질시험․검사성과 촐괄표”의 내용을 검토              하여야 한다.

(마) 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제2조제2호 및 제3호의 규정에 의한 1종 시설물 및 2종시설물에 관한 건설공사의 발주자는 공사 완공후 시설물의 관리주체에 시설물 인계시 품질시험․검사성과 총괄표도 함께 인계하여야 한다.

(바) 인계받은 관리주체는 당해 시설물의 존속기간 동안 품질시험․검사성과  총괄표를 보존하여야한다.

다. 품질시험계획

(1) 대 상(영 제89조제2항)

(가) 총공사비 5억원 이상인 토목공사

(나) 연면적 660㎡이상인 건축물의 건축공사

(다) 총공사비 2억원 이상인 전문공사

(2) 품질시험계획 수립(영 제90조제1항)

건설업자와 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 건설공사의 발주자(이하 이 절에서 "발주자"라 한다)에게 제출

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	8/20

하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공(건설공사현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다. 이하 제98조제2항에서 같다)하기 전에 발주자의 승인을 받아야 한다. 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다.

(3) 품질관리의 지도․감독 등(영 제92조)

(가) 발주자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 수립한 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리 업무를 적절하게 수행하고 있는지 확인할 수 있다. 다만, 법 제55조제3항에 따른 품질관리의 적절성이 확인된 경우에는 따로 확인하지 아니할 수 있다.(영 제92조제2항)

(나) 발주자는 제2항에 따라 품질관리 업무를 적절하게 수행하고 있는지를 확인하려는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 참여할 수 있도록 하여야 한다.(영 제92조제3항)

(다)  발주자는 제2항에 따른 확인 결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 건설업자 또는 주택건설등록업자에게 시정을 요구할 수 있다. 이 경우 시정을 요구받은 건설업자 또는 주택건설등록업자는 지체 없이 이를 시정한 후 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.(영 제92조제4항)

(라) 발주자는 제2항에 따른 확인을 법 제60조제1항에 따라 품질검사를 대행하는 국립·공립 시험기관 또는 건설기술용역업자에게 의뢰하여 실시할 수 있다.(영 제89조제5항)

라. 품질관리계획

(1) 대상공사의 범위(영 제89조제1항)

법 제55조제1항에 따른 품질관리계획(이하 "품질관리계획"이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 다음 각 호의 건설공사로 한다.

1. 감독 권한대행 등 건설사업관리 대상인 건설공사로서 총공사비(관급자재비를 포함하되, 토지 등의 취득·사용에 따른 보상비는 제외한 금액을 말한다. 이하 같다)가 500억원 이상인 건설공사

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	9/20

2. 「건축법 시행령」 제5조의5제1항제4호에 따른 다중이용 건축물의 건설공사로서 연면적이 3만제곱미터 이상인 건축물의 건설공사

3. 해당 건설공사의 계약에 품질관리계획을 수립하도록 되어 있는 건설공사

(2) 건설공사의 품질관리(법 제55조제2항)

(가) 건설업자와 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질시험 및 검사를 하여야 한다.

(나) 이 경우 건설업자나 주택건설등록업자에게 고용되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 그 업무를 수행하여야 한다.

(3) 품질관리계획등의 수립절차(영 제90조)

(가)  건설업자와 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 건설공사의 발주자(이하 이 절에서 "발주자"라 한다)에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공(건설공사현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다. 이하 제98조제2항에서 같다)하기 전에 발주자의 승인을 받아야 한다. 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다.

(나) 법 제55조제1항에 따라 품질관리계획 또는 품질시험계획을 제출받은 발주자나 인·허가기관의 장은 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자로 하여금 보완하도록 하여야 한다.

(4) 품질관리의 지도․감독

(가) 발주자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 수립한 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리 업무를 적절하게 수행하고 있는지 확인할 수 있다. (영 제92조제2항)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	10/20

(나) 발주자는 제2항에 따라 품질관리 업무를 적절하게 수행하고 있는지를 확인하려는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 참여할 수 있도록 하여야 한다.(영 제92조제3항)

(5) 품질관리 적정성 확인 실시

(가) 발주청, 인ㆍ허가기관의 장 및 대통령령으로 정하는 기관의 장은 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사에 대하여 건설업자와 주택건설등록업자가 제2항에 따라 품질관리계획에 따른 품질관리를 적절하게 하는지를 확인할 수 있다.(법 제55조제3항)

(나) 법 제55조제3항에 따른 품질관리의 적절성 확인은 해마다 한 번 이상 실시하되, 해당 건설공사의 준공 2개월 전까지 하여야 한다.(규칙 제52조제1항)

(다) 제1항에 따른 적절성 확인의 기준 및 요령은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.(규칙 제52조제2항)

마. 건설공사의 감독자 및 감리자 업무

(1) 건설공사 감독자의 감독의무(법제49조)

(가) 발주청이 발주하는 건설공사의 공사감독자는 그 감독업무를 성실히  수행하여야 한다.

(2) 발주청의 업무범위(영 56조)

(가) 발주청은 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 소속 직원으로 하여금 다음 각 호의 업무를 수행하게 하여야 한다.(영 제56조제1항)

1. 공사의 시행에 따른 업무연락 및 문제점 파악

2. 용지 보상 지원 및 민원 해결

3. 법 제55조 및 제62조에 따른 품질관리 및 안전관리에 관한 지도

4. 제59조제3항제9호에 따라 건설사업관리기술자가 확인한 설계 변경에 관한 사항의 검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	11/20

5. 예비준공검사

(나) 발주청 소속 직원은 감독권한 대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 제1항에 따른 업무, 건설사업관리 용역 발주자로서의 감독 업무, 건설사업관리를 수행하는 건설기술용역업자와 계약으로 정한 사항 외에는 정당한 사유 없이 건설사업관리용역업자 및 건설사업관리기술자의 업무에 개입 또는 간섭하거나 권한을 침해해서는 아니된다.(영 제56조3항)

(3) 품질관리 관련 감리업무

(가) 품질관리계획의 관리

1) 감리원은 시공자가 공사계약문서에서 정한 품질관리계획 요건대로    품질에 영향을 미치는 모든작업을 성실하게 수행하는지 검사․확인   및 관리할 책임이 있다.

2) 감리원은 시공자가 품질관리계획 요건의 이행을 위해 제출되는 문서를   검토 확인 후 발주기관에 승인을 요청하여야 한다.

3) 감리원은 품질관리계획이 발주기관으로부터 승인되기 전까지는 원칙적으로    시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 아니된다.

4)  품질관리계획과 관련하여 감리원이 검토․확인하여야 할 문서는      계획서,절차서 및 지침서 등을 말한다.

(나) 품질관리계획의 이행확인

감리원은 시공자가 작성한 품질관리계획서에 따라 품질관리업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여야 하며, 검사결과 시정이 필요한 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 시공자는 이를 지체없이 시정하여야 한다.

(다) 중점 품질관리

1) 공종의 선정

감리원은 당해 건설공사의 설계도서,시방서, 공정계획 등을 검토하여            품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 시공후 시정이           어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종또는 부위를 중점 품질관리           대상으로 선정하여 타공종에 비하여  우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인            하여야 한다. 중점 품질관리 공종 선정시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	12/20

가) 공정계획에 의한 월별, 공종별 시험종목 및 시험회수

나) 시공자의 품질관리 요원 인원수 및 공정에 따른 충원계획

다) 품질관리 담당 감리원의 인원수 및 직접 입회, 확인이 가능한 적정                시험 여부

라) 공종의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접확인할 수 있는지                여부

마) 작업조건의 양, 불량 상태

바) 타현장의 시공사례에서 하자발생 빈도가 높은 공종인지 여부

사) 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지 여부

아) 시공후 지중에 매몰되어 추후 품질확인이 어렵고 재시공이 곤란                한지 여부

자) 품질불량시 인근부위 또는 타공종에 미치는 영향의 대소

차) 시공이 광활한 지역에서 이루어져 접근이 용이한지 여부

2) 중점 품질관리 방안의 수립

감리원은 선정된 중점품질관리 공종별 관리방안을 수립하여 시공자로            하여금 이를 실행토록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다.            중점품질관리방안은 다음의 내용이 포함되어야 한다.

가) 중점품질관리 공종의 선정

나) 중점 품질관리 공종별 시공중 및 시공후 발생예상 문제점

다) 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침

라) 중점 품질관리 대상 구조물, 시공부위, 하자발생 가능성이 큰 지역                 또는 부위선정

마) 중점 품질관리 대상의 세부관리항목 선정

바) 중점 품질관리 공종의 품질확인 지침

사) 중점 품질관리대장을 작성, 기록관리하고 확인하는 절차

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	13/20

3) 관리방법

중점품질관리 대상으로 선정된 공종의 효율적인 품질관리를 위하여             다음과 같이 관리한다.

가) 감리원은 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종에 대한 관리방안  을  수립하여 시행전 발주기관에 보고하고 시공자에게도 통보

나) 해당공종 및 시공부위는 상황판이나 도면 등에 표기하여 발주기관의 직원, 감리원, 시공자 모두가 이를 항상 숙지토록 함

다) 공정계획시 중점 품질관리 대상 공종이 동시에 여러개소 시공되거나   공휴일, 야간등 관리가 소홀해질 수 있는 시기에 시공되지 않도록 조정

라) 필요시 해당부위에 “중점 품질관리공종” 팻말을 설치하고 주의                  사항을 명기

마) 특히 콘크리트 타설시에는 무단으로 가수하는 행위가 발생하지   않도록 사전 교육시켜야 하며 시공중 감리원은 물론 시공회사의 담당   기술자가 반드시 입회

바)  바다 모래를 콘크리트용 세골재로 사용할 경우에는 세척사를     시방기준(콘크리트표준시방서3.4.5해사 참조)에 만족하는지 확인  하여야한다.

바. 건설품질관리 관계규정

(1) 건설산업기본법

제28조(건설공사 수급인의 하자담보책임)

건설공사의 목적물이 벽돌쌓기식 구조, 철근콘크리트 구조, 철골구조 등의 경우         완공일로부터 10년의 범위내에서, 기타 구조의 경우 5년 범위 내에서         공사종류별로 대통령이 정한 기간내에서 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있다.

제40조(건설기술자의 배치)

건설업자는 공사의 시공 및 기술상의 관리를 하게 하기 위하여 시공관          리를 할 수 있는 자격을 가진 건설기술자를 1인 이상 배치하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	14/20

제44조(건설업자의 손해배상 책임)

건설업자가 고의, 과실로 인하여 건설공사의 시공을 조잡하게 하여              타인에게 손해를 가한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있으며, 손해가 발          주자의 중대한 과실에 의하여 발생한 것일 때에는 건설업자는 발주자에          게 구상권을 행사할 수 있다.

(2) 건설기술진흥법

제24조(건설기술자의 업무정지 등)

국토교통부장관은 건설기술자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 2년 이내의 기간을 정하여 건설공사 또는 건설기술용역 업무의 수행을 정지하게 할 수 있다.

1. 제21조제1항에 따라 신고 또는 변경신고를 하면서 근무처 및 경력등을 거짓으로 신고하거나 변경신고한 경우

2. 제23조제1항을 위반하여 자기의 성명을 사용하여 다른 사람에게 건설공사 또는 건설기술용역 업무를 수행하게 하거나 건설기술경력증을 빌려 준 경우

3. 제2항에 따른 시정지시 등을 3회 이상 받은 경우

4. 공사 관리 등과 관련하여 발주자 또는 건설사업관리를 수행하는 건설기술자의 정당한 시정명령에 따르지 아니한 경우

5. 정당한 사유 없이 공사현장을 무단 이탈하여 공사 시행에 차질이 생기게 한 경우

6. 고의 또는 중대한 과실로 발주청에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우

7. 다른 행정기관이 법령에 따라 업무정지를 요청한 경우

제53조(건설공사 등의 부실 측정)제1항

국토교통부장관, 발주청(「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업인 경우에는 같은 법 제2조제4호에 따른 주무관청을 말한다. 이하 이 조에서 같다)과 인ㆍ허가기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 건설기술용역, 건축설계, 「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리 또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 및 제47조에 따른 건설공사의 타당성

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	15/20

조사(이하 "타당성 조사"라 한다)에서 건설공사에 대한 수요 예측을 고의 또는 과실로 부실하게 하여 발주청에 손해를 끼친 경우에는 부실의 정도를 측정하여 벌점을 주어야 한다.

제54조(건설공사현장 등의 점검)제1항

국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 현장 등을 점검할 수 있으며, 점검 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제53조제1항 각 호의 자에게 시정명령 등의 조치를 하거나 관계 기관에 대하여 관계 법률에 따른 영업정지 등의 요청을 할 수 있다.

제55조(건설공사의 품질관리)

건설공사의 품질시험 및 안전관리의 종류, 방법 등에 대하여 규정

-시  행  령 : 품질관리의 지도․감독, 품질보증계획 수립대상공사범  위, 품질관리계획의 수립기준, 품질관리 적정성확인  대상 건설공사의 범위, 품질시험의 적정성확인 기관,  품질관리계획등의 수립절차, 품질시험 또는 검사성과의  관리 및 활용

-시행규칙 : 품질관리에 따른 시험․검사의 실시, 품질시험계획 수립절차, 품질관리 계획수립 대상공사가 아닌 건설공사, 품질관리계획 수립절차, 품질관리의 적정성확인, 품질  시험 및 검사의 실시, 품질시험성과관리, 품질관리비의  산출 및 사용기준

제60조(품질검사의 대행 등)제1항

건설공사의 발주자, 건설업자 또는 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 국립ㆍ공립 시험기관 또는 건설기술용역업자로 하여금 건설공사의 품질관리를 위한 시험ㆍ검사(이하 "품질검사"라 한다) 등을 대행하게 할 수 있다.

제44조(설게 및 시공 기준)

건설공사의 기술향상 및 품질확보와 적정한 공사관리를 위하여 설계 및            시공 기준규정

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	16/20

제49조(건설공사 감독자의 감독의무)

건설공사의 공사감독자는 감독업무를 성실히 수행하여야 한다.

제52조(건설공사의 사후평가)

건설업자의 기술수준 향상과 건설공사의 품질확보를 위한 공사, 용역            및 시공에 관한 평가 실시에 대하여 규정

기    타 : 건설감리협회, 한국건설기술인 협회, 벌칙 등 규정

□ 업무인계․인수현황

일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자

6. 기록관리

NO	기록명	보관		보 존
		기간	책임자	기간	책임자
1	품질관리 관계철	3	시설과장	3	행정운영과장
2

7. 관련표준

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	17/20

8. 첨    부

가. 별표

별표1 : 품질관리 업무 흐름도

나. 별지

별지1 : 품질시험-검사대장

별지2 : 품질시험-검사성과 총괄표

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	18/20

(별표1)

품질관리 업무 흐름도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

품질보증(시험)계획서 작성	제출	검토, 확인 (1차)
시 공 사	수정,보완	감 리 단

※ 건설기술관리법 시행령 제41조

제출	검토,확인(2차) 및 승인		계획수행여부점검,확인
수정,보완 지시	공사업무 담당부서		시설과 시공관련팀

※ 동법시행령제40조(일상 및 특별점검)

결과통보	점검결과사항 수명	통보및지시	지적사항 시정지시	시정조치사항 확인
시정조치 결과보고	공사업무 담당부서	시정조치 확인 및 결과보고	감 리 단

※ 기록관리, 활용

이행지시	지적사항 시정
시정조치 결과보고	시 공 사

※ 실적자료 관리

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	19/20

(별지1)

품질시험․검사대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

① 일련 번호	② 연월일	③ 검 사 ․ 검사구분	④ 재 료	⑤ 시험 ․ 검사항목	⑥ 시험성과	⑦ 시험․ 검사자	⑧ 공사감독자 (감리원)의확인

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67508-P
	건설공사 품질관리 업무절차서	쪽 수	20/20

(별지2)

품질시험 ․ 검사성과 총괄표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공 사 명:

공사기간:              ～                     공  정 :             %

공 종	시험․검사 종류(재료)	시험․검사 회수					비고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

작성일시 :       년     월     일

작 성 자 : 소속 :           직위 :

성명 :             (서명 또는 인)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	1/11

제․개정이력요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	11	정재성	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2009. 12.01	1	최희권	o 문서번호 재조정
2	2011. 10.27	1	선우요섭	o 문서번호 재조정	o본부67302-P→본부67402
3	2011. 10.27	3.4	선우요섭	o 책임과 권한	o차장 → 부본부장
4	2014. 05.23	2~9	이용구	o 건설기술진흥법 제정․시행	o 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 변경

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	2/11

1. 목  적

본절차서는 서울특별시 상수도사업본부(이하본부라한다)의 상수도사업을   효율적이고 체계적으로 수행하기 위한 서울시상수도사업본부(이하“본부”라함)와 각 계약상대자의 공정관리 체계의 수립 및 운영에 관한 절차와 방법을 규정한다.

2. 적용범위

가. 본절차서는 본부의 공정관리체계 수립 및 운영업무에 적용한다.

나. 상수도건설사업에 참여하는 본부의 관련부서와 모든 계약상대자는 본 절차서를        기준으로 자체 공정관리업무를 수행한다.

3. 용어의 정의

가. □공정관리체계□

공정관리를 하기위해 갖추어야 하는 체계로서 크게 조직, 절차서, 공정관리구조        등으로 구성

나. 기본공정표(PMS : Project Master Schedule)

상수도건설사업을 공기내 완성하기 위해 현장별로 수행일정계획을 결정하여  자금수요계획 및 관리기준 공정표의 작성기준이 되는 최상위 공정표

다. 종합공정표(PSS : Project Summary Schedule)

기본공정표와 관리기준 공정표의 중간단계 공정표로서 업무 및 분야별    현황파악을 목적을 사용되며, 관리기준 공정표상의 작업을 요약한 공정표

라. 관리기준 공정표(IPS : Integrated Project Schedule)

상수도건설사업을 사업공기내에 완성하기 위해 공정관리담당 부서가    작성하여 사업공정관리의 기준으로 사용하는 공정표로서 설계, 구매, 시공    및 시운전의 주요업무를 포함하며 사업에 참여하는 모든계약 상대자에게   제시되는 공정표

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	3/11

마. 시행공정표(PDS : Project Detail Schedule)

구매 및 시운전 업무의 계약공정표 접수후 구매 및 시운전 담당부서가  작성하여 유지 및 관리하는 공정표로써 관리기준 공정표의 일정기준 내에서

작성되며 관련업무의 세부항목을 포함

바. 계약공정표 (PCS : Project Contract Schedule)

상수도건설사업의 계약 단위별로 작성되며, 각 계약대상자가 본부의 공정표  작성 지침에 의하여 계약 직후 작성, 제출해야 이는 전체사업 공정진도   현황 측정의 기초가 된다.

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 상수도건설사업의 책임자로서 공정관리계획 수립 및 운영에 대한 총괄 책임

(2) 공정관리절차서의 승인

(3) 기본공정표의 승인

(4) 방침결정

나. 부본부장

(1) 본부장을 보좌하며 상수도 건설사업의 공정관리 계획 수립 및 운영에   대한 검토 및 승인 업무 수행

(2) 공정관리절차서 검토 및 승인

(3) 기본공정표의 검토 및 평가

(4) 종합공정표의 승인

(5) 관리기준공정표의 승인

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	4/11

다. 공정관리 담당부서장

(1) 공정관리 종합계획 수립, 운영 및 보고(부본부장의 검토와 본부장의 승인)

(2)  공정관리절차서 및 공정표 등의 작성 및 관리(기본공정표, 종합공정표,     관리기준공정표)

(3) 상수도건설사업의 진도현황 종합분석, 집계 및 보고 (부본부장, 본부장)

(4) 시행공정표 및 계약공정표의 검토

(5) 주요 공정관리업무 수행

(6) 관련부서 간의 공정관리업무 조정

라. 관련부서 과장

(1) 각 관련분야의 공정관리 계획 수립

(2) 계약상대자(책임감리용역 계약상대자 포함) 공정관리업무 지도, 점검,   감독 업무 수행

(3) 각 관련분야의 진도현황 종합집계, 분석 및 공정관리 담당부서장에게            결과 통보

(4) 시행공정표의 작성 및 관리(구매, 시운전분야)

(5) 주요 공정에 대한 해결책 수립 및 이행

마. 계약상대자

(1) 자체 공정관리계획서 작성 및 제출

(2) 계약공정표 작성, 관리 및 제출

(3) 진도관리 및 작성, 관리 및 제출

바. 책임감리용역 계약상대자

(1) 계약상대자 공정관리계획서의 검토 및 승인업무

(2)  계약공정표 검토 및 공정관리담당부서장과 관련부서장에게 제출

(3) 계약공정표상의 공정진도현황 확인 및 실적 검토

(4) 공정관리담당부서장 및 관련부서장에게 공정진도현황 보고

(5) 계약상대자 공정관리업무 지도, 감독

(6) 기타 계약문서 또는 감리업무수행지침서에 규정된 공정관리업무 수행

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	5/11

5. 업무절차

가. 공사관리관의 기본임무(발주청)

(1) 발주청은 건설공사의 계획․설계․발주․감리․시공․사후평가 전반을     총괄하고, 감리 및 공정계약 이행에 필요한 다음 각호의 사항을 지원,     협력 하여야 하며 감리용역계약에 규정된 바에 따라 감리가 성실히    공정관리를 수행하고 있는지에 대한 지도․점검을 실시하여야 한다.

나. 공사관리관(발주청)의 지도감독)

(1) 발주청은 감리가 공정관리에 대하여 성실히 수행되고 있는지에대한 지도   점검을 실시하고 부적정하게 수행되고 있다고 인정될 때에는 당해 감리    전문회사의 대표자 및 책임감리원에게 이 사실을 통보하고 시정토록    하여야 한다.

다. 감리업무

감리원은 당해공사가 정해진 공기 내에 시방서, 도면 등에 의거하여 소요의  품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가 있어서    공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 감리  하여야 한다.

(1) 공정관리계획

감리원은 공사 착공일로부터 60일 이내에 시공자로부터 공정관리       계획서를 제출 받아 조속한 시일내에 검토하여 승인하고 이를 발주청에 제출하여야 하며   그 세부 검토사항은 다음과 같다.

(가) 공정관리 기법

1) 감리원은 시공자의 공정관리 기법이 공사의 규모, 특성에 적합한지           여부를 검토하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	6/11

2) 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있는 경우에는                      명시된 공정관리 기법으로 시행되도록 감리하여야 한다.

3)  감리원은 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있지          않을 경우에는 단순한 공종 및 보통의 공종 공사인 경우에는          공사 조건에 적합한 공정관리 기법을 적용토록 하고, 복잡한          공종의 공사 또는 감리원이 PERT/CPM 이론을 기본으로 한         공정관리가 필요하다고 판단하는 경우에는 별도의 PERT/CPM          기법에 의한 공정관리를 적용토록 시공자를 감리하여야 한다.

4) 감리원은 특수한 현장여건(돌관공사 등)으로 전산공정관리 등이         필요하다고 판단되는 경우에는 발주청에 별도의 공정관리를        시행하도록 건의하여야 한다.

(나) 공정관리 형태

감리원은 일정관리아 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리 형태의 공정관리가 되도록 감리하여야 한다.

(다) 공정관리 조직

감리원은 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 시공자가 공정

관리업무를 성공적으로 수행할 수 있는 공정관리 조직을 갖추도록 감리 하여야 한다.

1) 공정관리 요원 자격 및 그 요원수 적합 여부

2) SOFTWARE와 HAREWARE 규격 및 그 수량 적합 여부

3) 보고체계의 적합성 여부

(라) 실시 공정표

감리원은 시공자로부터 실시공정표를 제출 받아 다음 사항을 검토       확인 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	7/11

1) 작성방법 검토

가) 공정표의 작성기법이 공정관리기법의 이론에 부합되는지 여부

나) 시공 순서 적합 여부

다) 일정, 진도관리가 용이한가 여부

라) 공사수행에 필요한 간접작업의 반영 여부

① 각종 서류 제출, 승인

② 용지보상

③ 인허가 요청 및 관련사항

④ 외부 조립을 요하는 특수 자재나 장비조달

⑤ 장기간이나 시급을 요하는 자재와 장비의 반입

⑥ 기타 작업에 영향을 주는 사항

2) 공기산정 검토

가) 계약공기 준수 여부

나)  각 작업(ACTIVITY)공기에 품질, 안전관리가 고려되었는지 여부

다)  지정휴일, 천후조건 감안 여부

라) 자원조달에 무리가 없는지 여부

마) 주공정의 적합 여부

바) 공사주변 여건, 법적제약조건 감안 여부

사) 동원 가능한 장비, 기타 부대설비 및 그 성능 감안 여부

아) 특수장비 동원을 위한 준비기간의 반영 여부

자) 동원 가능한 작업인원과 작업자의 숙련도 감안 여부

3) 자원 배분 검토

가) 투입자원의 일일 최대 가용량 적합 여부

나) 투입 예정자원의 적기 조달 가능성 여부

다) 각 작업(ACTIVITY)별 각각의 자원배분량이 효율적 진도 관리에 적합 여부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	8/11

라) 주재료의 관급, 사급, 의자, 내자의 구분 여부

마) 자원조달 계획수립 여부 (필요시 별도 공정표 작성관리)

4) 기타 감리자가 필요하다고 판단되는 사항

(2) 공사진도 관리

(가)  감리원은 시공자로부터 전체 실시공정표에 의거한 월간, 주간                  상세 공정표를 사전에 제출 받아 검토․확인하여야 한다.

1) 월간상세공정표 : 작업착수 1주전 제출

2) 주간상세공정표 : 작업착수 2일전 제출

(나) 감리원은 매주 또는 매월 정기적으로 공사진도를 확인하여 예정     공정과 실시 공정을 비교하여 공사의 부진 여부를 검토한다.

(다) 감리원은 현장여건, 기상조건, 지장물 이설등에 다른 관련기관       협의사항이 정상적으로 추진되는지를 검토․확인하여야 한다.

(라) 공정진척도 현황은 최근 1주전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고      공정지연을 방지하기 위하여 주공정 중심의 일정관리가 될 수      있도록 시공자를 감리하여야 한다.

(마)   감리원은 주간단위의 공정계획 및 실적을 시공자로부터 제출받아 이를

검토․확인하고, 필요한 경우 시공자측 현장책임자를 포함한 관계직원

합동으로 금주작업에 대한 실적을 분석․평가하고 공사추진에 지장을

초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 지시와

재해방지책, 공정진도의 평가, 기타 공사추진상 필요한 내용의 협의를

위한 주간 또는 월간 공사추진회의를 주관하여 실시하고 그 회의록을

유지하여야 한다.

(3) 부진공정 만회대

(가)  감리원은 공사진도율이 계획공정대비 월간공정실적이 20% 이상 지연   되거나 누계공정 실적이 10% 이상 지연될 때는 시공자로 하여금 부진   사유분석, 만회대책 및 만회공정표 수립을  지시하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	9/11

(나) 감리원은 시공자가 제출한 부진공정만회대책을 검토․확인하고 그   이행 상태를 주간단위로 점검평가하고 공사추진회의 등을 통하여  미조치 내용에 대한 필요 대책 등을 수립하고 정상공정을 회복할 수   있도록 조치하여야 한다.

(다) 감리원은 검토․확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검평가

결과를 감리 월간보고서에 수록, 발주청에 보고하여야 한다.

(4) 수정 공정 계획

(가) 감리원은 설계변경 등으로 인한 물공량의 증감, 공법변경, 공사중 재해,             천재지변 등 불가항력에 의한 공사중지, 지급자재공급지연, 공사용지의             제공의 지연, 문화재발굴 조사 등의 현장실정 또는 시공자의 사정 등으로              인하여 공사진척 실적이 지속적으로 부진할 경우 공정계획을 재검토하여              수정 공정계획 수립의 필요성을 검토하여야 한다.

(나) 감리원은 시공자의 요청 또는 감리원의 판단에 의해 수정공정      계획을 수립할 시 시공자로부터 수정공정계획을 제출 받아 제출일로     부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 발주청에 보고하여야 한다.

(다) 감리원은 수정공정계획 검토시 수정목표 종료일이 당초 계약 종료일을      초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과 할 경우는 그 사유를      분석하여 감리원의 검토안을 작성하고 필요시 수정 공정계획과     함께 발주청에 보고하여야 한다.

(5) 준공기한 연기

감리원은 사공자의 준공기한 연기원에 대하여 이의 타당성을 검토 확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

(6) 공정현황보고

(가) 감리원은 주간 및 월간단위의 공정현황을 시공자로부터 제출받아      이를 검토․확인하여야 한다.

(나) 감리원은 월간 공정현황을 정기감리보고서에 포함하여 발주청에                 보고하여야 한다.(별지 제1호 서식)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	10/11

라. 참고사항

업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료
□ 업무인계․인수현황
일 자		인 계 자	일 자	인 계 자
		인 수 자		인 수 자

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	공사공정관리관계철	1년	시설과장	3년	행정운영과장

7. 관련표준

가. 건설기술진흥법

8. 첨  부

별지 1 : 공정보고 서식

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67509-P
	공사공정관리 지원처리 절차서	쪽 수	11/11

[별지 제1호 서식]

공   정   보   고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제    호 :

공 사 명 :

수    신 :

◦ 월간 공정보고를 아래와 같이 보고함.

보  고  자 :                  (인)

공 정	전월까지 누계(%)			금 월(%)			누 계(%)			비고
	계 획	실 적	대 비	계 획	실 적	대 비	계 획	실 적	대 비

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67510-P
	공사 안전관리 업무절차서	쪽 수	1/4

제․개정이력요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	4	손진곤	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2009. 12.01	1	최희권	o 문서번호 재조정	o 본부67304-P → 본부67303-P
2	2011. 10.27	1	선우요섭	o 문서번호 재조정	o 본부67303-P → 본부67510-P
3	2011. 10.27	2	선우요섭	o 책임과 권한	o 차장, 시설부장 → 부본부장, 급수부장
4	2014. 12.08	2	문현수	o 용어의 정의	o 법 및 조항 변경
5	2014. 12.08	2	문현수	o 책임과 권한	o 부본부장, 급수부장 → 부본부장, 시설안전부장
6	2014. 12.08	4	문현수	o 관련근거	o 건설기술관리법→ 건설기술 진흥법
7	2015. 11.30	2	라승보	o 관련근거	o 건설기술관리법→ 건설기술 진흥법

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67510-P
	공사 안전관리 업무절차서	쪽 수	2/4

1. 목   적

본 지침서는 서울특별시 상수도사업본부(이하 “우리본부”라 한다)가 시행하는 건설공사에서 발생할 수 있는 위험요인을 찾아내어 사전에 방지하여 안전시공을 도모함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 지침서는 우리본부가 시행하는 모든 건설공사에 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 안전관리 : 생산성의 향상과 손실을 최소화시키기 위하여 비능률적 요소인 사고가 발생하지 않는 상태를 유지하기 위한 활동, 즉 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 체계적인 제반활동을 말한다.

나. 시 공 자 : 건설산업기본법 제2조제7호의 규정에 의한 건설업자 및 주택법 제9조의 규정에 의한 주택건설사업의 등록한 자로서 당해공사를 도급 받은 건설업자(하도급업자를 포함한다)를 말한다.

다. 감 리 원 :  일정한 자격을 갖추고 건설기술진흥법 제26조의 규정에 의한 감리전문회사의 감리원으로 등록한 자로서 감리전문회사에 종사하면서 책임감리 업무를 수행하는 자를 말한다.

4. 책임과 권한

가. 본부장, 부본부장, 시설안전부장

전 건설공사 현장에 대하여 안전관리에 관한 전반적인 사항을 총괄 감독

나. 행정운영과장

(1) 안전관리에 관한 종합보고서의 보존책임

다. 시설과장

(1) 안전관리에 관한 종합보고서의 보관책임

(2) 안전관리계획수립 감독

(3) 안전관리비의 사용내역 감독

(4) 안전관리계획에 의거 안전점검이 실시되는지 감독

(5) 그 외 안전관리 전반에 대하여 총괄 감독

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67510-P
	공사 안전관리 업무절차서	쪽 수	3/4

5. 업무절차

가. 안전관리 조직편성

건설공사의 안전시공 추진을 위해서는 안전조직이 갖추어져야 하고 안전조직은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에 산업안전보건법의 해당규정(산업안전보건법 제13조 안전보건관리책임자 선임, 제14조 관리․감독자 및 안전담당자지정, 제15조 안전관리자 배치, 제18조 안전 보건총괄책임자 선임 및 안전보건협의회 운영)에 명시된 업무도 수행되도록 한다.

나. 안전관리계획의 수립

(1) 안전관리계획 수립 : 시공자는 안전관리 계획을 작성하여 감독자

(감리원)의 확인을 받아 발주자(우리본부 : 이하 발주자는 “우리본부”임)

에게 제출하여 발주자의 검토를 받아야 하며, 발주자는 검토후

보완 조치가 가능하다.

(2) 안전관리계획의 내용

(가) 건설공사의 개요 및 안전관리 조직

(나) 공종별 안전점검계획

(다) 공사장 주변의 안전관리 대책

(라) 통행안전시설의 설치 및 교통소통에 관한 계획

(마) 안전관리비 집행계획

(바) 안전교육 및 비상시 긴급조치계획

(사) 공종별 안전관리계획(대상시설물별 건설공법 및 시공절차 포함)

다. 안전관리계획서의 작성

(1) 총괄 안전관리 계획

(2) 공종별 안전관리계획(대상시설물별 건설공법․시공절차 등)

라. 안전점검의 실시 및 보고서 제출

시공자는 매일 자체안전점검을 실시하고, 안전관리계획서에서 정한 시기         및 횟수에 따라 건설안전점검기관의 정기안전점검(시공자가 발주자와

사전협의, 건설안전점검기관에 의뢰 실시)을 실시하여야 하며, 필요에 따라

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67510-P
	공사 안전관리 업무절차서	쪽 수	4/4

(발주자 요청시나, 구조물에 심각한 결함이 발견된 경우) 정기 안전점검과          동일한 방법으로 정밀안전점검을 실시하고 점검결과를 발주자에게 보고          하여야 한다.(점검결과 보고서 제출)

마. 시공자는 건설업 표준안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 안전관리비를 산출하여 안전관리에 사용하여야 한다.

바. 안전교육

감리원은 시공자로부터 안전교육 계획을 수립하고 이에 따라 안전교육을 실시하도록 하여야 한다.

6. 기록관리

NO	기록명	보 관		보 존
		기간	책임자	기간	책임자
1	안전점검에 관한 종합보고서	3년	시설과장	5년	행정운영과장
2	안전점검에 관한 일체의 보고서	3년	시설과장	5년	행정운영과장

7. 관련표준

공사안전관리업무처리지침서

8. 첨  부

9. 관련근거

가. 건설기술 진흥법

나. 산업안전보건법

다. 시설물의 특별관리에 관한 법

라. 엔지니어링 기술 진흥법

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	1/15

제․개정이력요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	16	우택명	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2009. 12.01	1	최희권	o 문서번호 재조정	o 본부67305-P → 본부67304-P
2	2011. 10.27	1	선우요섭	o 문서번호 재조정	o 본부67304-P → 본부67511-P
3	2011. 10.27	4	선우요섭	o 책임과 권한 변경	o 차장, 부장 → 부본부장, 급수부장
4	2014. 05.23	1~15	이용구	o 건설기술진흥법 제정․시행	o 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 변경
5	2015. 11.30	3~4	라승보	o 관련법 개정에 따른 용어 정의 수정	o 건설기술관리법 용어정의 → 건설기술진흥법 용어정의
6	2015. 11.30	4~15	라승보	o 관련법 개정에 따른 용어 수정	o 공사업무지원자 → 공사관리관 o 감리 → 건설사업관리 o 감리원 → 건설사업관리기술자 o 비상주감리원 → 기술지원 건설사업관리기술자

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	2/15

1. 목  적

본 절차서는 서울특별시 상수도사업본부(이하 본부라한다)의 책임감리를  시행하는 건설공사에 있어서 공사시행에 따른 업무연락 및 문제점의 파악, 용지 보상지원, 민원해결, 기타 필요한 업무수행을 원활하게 도모하는데 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 본부에서 책임감리를 시행하는 건설공사 업무지원시 적용한다.

3. 용어의 정의

가. □건설공사□라 함은 건설산업기본법 제2조 제4호의 규정에 의한 건설공사를          말한다.

나. □건설기술□이라 함은 다음 각목의 사항에 관한 기술을 말한다. 다만,          안전에 관하여는 산업안전보건법에 의한 근로자의 안전에 관한 사항을          말한다.

(1)  건설공사에 관한 계획․조사(측량을 포함한다. 이하 같다)․설계        (건축사법 제2조 제3호의 규정에 의한 설계를 제외한다. 이하 같다)․     설계감리․시공․ 안전점검․정밀 안전진단 및 안전성검토

(2) 시설물의 유지․보수․철거․관리 및 운용

(3) 건설공사에 필요한 물자의 구매 및 조달

(4) 건설공사에 관한 시험․평가․자문 및 지도

(5) 건설공사의 감리

(6) 건설장비의 시운전

(7) 건설사업관리

(8) 기타 건설공사에 관한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	3/15

다. “건설기술용역□이라 함은 다른 사람의 위탁을 받아 건설기술에 관한     업무를 수행하는 것을 말한다. 다만, 건설공사의 시공 및 시설물의 보수·철거 업무는 제외한다.

라. “건설사업관리”란 건설공사에 관한 기획, 타당성 조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, 감리, 평가 또는 사후관리 등에 관한 관리를 수행하는 것을 말한다.

마.  “감리”란 건설공사가 관계 법령이나 기준, 설계도서 또는 그 밖의 관계 서류 등에 따라 적정하게 시행될 수 있도록 관리하거나 시공관리·품질관리·안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 건설사업관리 업무를 말한다.

바. "발주청"이란 건설공사 또는 건설기술용역을 발주(發注)하는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업·준정부기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장을 말한다.

사. □건설업자□라 함은 건설산업기본법 제2조 제7호의 규정에 의한         건설업자를 말한다.

아.  “건설기술자”란 「국가기술자격법」 등 관계 법률에 따른 건설공사 또는 건설기술용역에 관한 자격, 학력 또는 경력을 가진 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람을 말한다.

자. "건설기술용역업자"란 건설기술용역을 영업의 수단으로 하려는 자로서 제26조에 따라 등록한 자를 말한다.

차. □건설사업관리기술자□라 함은 건설기술용역업에 종사하면서 건설사업관리 업무를 수행하는 자를 말한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	4/15

카 . "공사관리관"이란 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 영 제56조제1항제1호부터 제4호까지의 업무를 수행하는 발주청의 소속 직원을 말한다.

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 설계변경 및 계약금액의 조정승인

(2) 준공기한 연기원, 준공검사원 승인

(3) 주요 현장 실정보고 승인

나. 부본부장

(1) 설계변경 및 계약금액의 조정 검토․승인

(2) 준공기한 연기원, 준공검사원 검토

(3) 현장 실정보고 검토․승인

다. 시설안전부장

(1) 설계변경 및 계약금액의 조정검토

(2) 준공기한 연기원, 준공검사원 검토

(3) 약식 준공검사서(기성) 승인

(4) 현장 실정보고 검토․승인

라. 시설과장

(1) 설계변경 및 계약금액의 조정검토

(2) 준공기한 연기원, 준공검사원 검토

(3) 약식준공검사서 (기성)검토

(4) 현장실정보고 검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	5/15

5. 업무절차

가. 공사관리관의 기본임무(발주청)

(1) 발주청은 건설공사의 계획․설계․발주․감리․시공․사후평가 전반을     총괄하고, 감리 및 시공계약 이행에 필요한 다음 각호의 사항을 지원,      협력 하여야 하며 건설사업관리용역 계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리기술자가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도․점검을 실시하여야 한다.

(가) 감리 및 시공에 필요한 설계도면, 문서, 참고자료와 건설사업관리 용역계약 문서에 명기한 자재․장비․비품․설비의 제공

(나) 건설공사 시행에 따른 업무연락, 문제점 파악 및 민원해결

(다) 건설공사 시행에 필요한 용지 및 지장물 보상과 국가, 지방자치단체,    기타 공공기관의 허가․인가 등의 처분을 얻을수 있도록 조치 또는 협력

(라) 건설사업관기술자가 건설사업관리용역 계약 이행에 필요한 시공자의 문서, 도면, 자재, 장비, 설비, 직원등에 대한 자료제출 및 조사의 보장

(마) 건설사업관리기술자가 보고한 설계변경, 준공기한 연기요청, 기타 현장실정보고 등 방침 요구사항에 대하여 건설사업관리 업무수행에 지장이 없도록 의사를  결정하여 통보

(바) 특수공법 등 주요공종에 대해 외부 전문가의 자문․감리가 필요하다고

인정되는 경우에는 별도 조치

(사) 기타 건설사업관리 용역업체와 계약으로 정한 사항등 건설사업관리용역 발주자로서의 감독업무

(2) 발주청은 관계법령에서 별도로 정하는 사항 및 가목에서 정하는 사항   외에는 정당한 사유없이 건설사업관리기술자의 업무에 개입 또는 간섭하거나 건설사업관리기술자의 권한을 침해할 수 없다.

(3) 발주청은 특별한 사유가 없는 한 건설공사의 착공전에 건설사업관리 용역업체를 선정하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	6/15

(4) 영 제45조의 규정에 의하여 발주청은 건설사업관리용역 계약내용 및 건설사업관리기술자 배치 내용을 구분에 따라 한국건설기술관리협회로 통보하여야 한다.

(가) 건설사업관리용역 계약 및 변경계약시 : 규칙 제27호 서식에 의한 건설사업관리용역 계약 및 변경계약현황 통보

(나) 건설사업관리기술자의 배치 및 변경배치시 : 건설사업관리기술자의 배치 및 변경배치(기술지원건설사업관리기술자를 포함하며, 업체선정 당시의 배치계획 및 당초 발주청에 제출한 배치계획과 다른 건설사업관리기술자를 배치하는 경우로서 영 제60조 제4항에 의한 교체를 포함한다)시 규칙 별지 제28호서식에 의하여 통보 이 경우 배치 구분란에 □신규□또는 □교체□로 구분 기재하되 다음의 경우에는 신규로 기재

1)  규칙 제35조 제2항 및 제3항에 의하여 발주청이 조정배치토록한 경우

2)  입대, 3월이상 요양을 요하는 부상등 발주청이 부득이한 사유에

해당 된다고 인정한 경우

(다) 건설사업관리용역 완료시 : 감리용역 완공내용을 규칙 별지 제27호 서식에 의하여 통보

(5) 이 지침의 내용중 시공자가 지켜야할 의무사항에 대하여는 발주청과

시공자간의 계약문서에 이를 규정하여야 한다.

나. 공사관리관(발주청)의 지도 감독

(1) 발주청은 건설사업관리용역 계약문서에 규정된 바에 따라 건설사업관리기술자를 지도․감독하며 모든 지시는 감리전문회사 대표자 또는 책임감리원을 통하여 하도록 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	7/15

(2) 발주청은 건설사업관리기술자가 시공자에게 지시한 사항에 대해 시공자로부터 이의 제기가 있는 경우 그 내용을 조사하여 건설사업관리기술자와 협의하여 조정할 수`있다.

(3) 발주청은 건설사업관리기술자에게 업무지시, 협의 등을 할 때는 서면으로 하는 것을 원칙으로 한다

(4) 발주청이 시공자에게 직접 통보한 내용이 있는 경우에는 건설사업관리기술자에게도 즉시 서면으로 통지하여야 한다.

(5) 발주청은 건설사업관리기술자가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도 점검을 실시하고 부적정하게 수행되고 있다고 인정될 때에는 당해 건설기술용역업체의 대표자 및 책임건설사업관리기술자에게 이 사실을 통보하고 시정토록 하여야 한다.

o 지도 점검시기 : 건설사업관리업무 수행초기 및 당해 공사 추진상황을 고려하여 실시

o 지도 점검자 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률의 규정에 의해     지정된 건설사업관리용역 감독자 또는 발주청이 별도 지정하는 자

(가) 건설사업관리기술자의 적정자격 보유여부 및 상주 이행 상태

(나) 품위 손상 여부 및 근무자세

(다) 발주청 지시사항의 이행 상태

(라) 행정서류 및 비치서류 처리상태

(마) 각종 보고서의 처리상태

다. 공사관리관의 업무 범위

발주청의 공사관리관은 당해 공사의 수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원업무 및 감리원의 지도․점검업무를 수행하며 현장 비상주를 원칙으로 하되, 공사의 중요도 및 현장 여건상 현장 상주함이

공사추진상 효율적이라 인정되는 경우에는 현장 상주근무를 할 수 있다.

공사관리관은 반드시 건설사업관리기술자을 통하여 발주청의 지시사항 등을 전달    하며 공사의 시공과 관련하여 시공자에게 직접 지시하지 아니한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	8/15

공사관리관은 감리원이 공사중지 또는 제시공 명령을 행사하고자 하는 경우, 사전에 이를 승인받도록 하므로서 건설사업관리기술자의 권한을 제약하는 일이 발생하지 않도록 하여야 하며 각 현장에서 수행한 업무수행 내용을 지원업무수행 기록부(별지서식 제2호)에 기록하여 비치하여야 한다. 공사관리관의 공사추진 단계별 주요업무는 다음과 같다.

(1) 공사착수단계

(가) 건설사업관리용역 계약체결

1) 입찰참가자격사전심사(P.Q) 기준작성

2) 건설사업관리업무수행계획서, 건설사업관리기술자 배치계획서 검토

(나) 보상 담당부서에서 수행하는 통상적인 보상업무외에 건설사업관리기술자 및 시공자와 협조하여 용지측량, 기공승락, 지장물 이설 확인 등의 용지보상 지원업무수행.

(2) 공사진행단계

(가) 건설사업관리기술자에 대한 지도․점검(근태사항 등)

(나) 건설사업관리기술자이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 관․민원업무 및 인허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등을 추진

(다) 설계변경, 공기연장등 주요사항 발생시 발주청으로부터 검토 지시가                있을 경우 현지확인 및 검토․보고

(라) 공사관계자 회의등에 참석, 발주청의 지시사항 전달 및 공사수행상   문제점 파악․보고

(마) 필요시 기성검사 입회

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	9/15

(3) 공사준공단계

(가) 준공검사시 입회

(나) 준공도서등의 인수

(다) 하자발생시 현지조사 및 사후조치

라. 건설사업관리업무실태 지도점검

(1) 주요지도 점검사항

(가) 건설사업관리발주 및 계약사항

(나) 상주 건설사업관리기술자의 현장근무 방법 및 근무실태

(다) 기술지원 건설사업관리기술자의 업무실태 및 업무범위

(라) 공사착수 단계의 업무

(마) 공사시행 단계의 업무

(바) 설계변경 및 계약금액의 조정관련 업무

(사) 기성 및 준공검사 관련업무

(아) 시설물 인수․인계 관련 감리 업무

(자) 각종 업무 처리 서식의 적정성

(2) 지도점검 방향

(가) 지도점검 대상현장의 업무실태를 사전에 파악하고

(나) 착안사항에 대한 연구분석을 통하여 상과있고 능률적인 점검업무수행

(다) 분야별 지도점검사항에 대한 결과 보고서 작성 등 종합적인 정리

(라) 점검결과에 대한 원인 및 문제점을 분석하여 시정조치 및 개선방향 제시

(마) 행정업무 개선 사항으로 반영될 수 있도록 조치

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	10/15

(3) 지도점검 착안사항

점검분야	착안사항	중 점 점 검 사 항	비고
1.건설사업관리 일반사항	가. 건설사업관리 기술자의 기본임무 나. 건설사업관리 기술자 근무실태	- 건설사업관리발주(공종적용)의 적정성 여부 - 최소배치 인원의 준수여부 - 건설사업관리일지 작성유무(일일작성) - 검측업무 수행계획(검측체크리스트)수립여부 - 검측업무 수행 적정여부(검측요청 즉시수행) - 건설사업관리기술자 현장이탈(1일이상)시 업무일지에 기록여부 - 발주청 지시사항의 이행상태 - 행정서류 및 각종 보고서의 처리상태 - 건설사업관리기술자로 감리협회 등록여부
2. 공사착수 단계	가. 건설사업관리 업무 착수 나. 설계서등의 검토여부 다. 착공신고서 검토 라. 하도급 관련사항	- 건설사업관리착수 신고시 감리원별 담당업무지정 적정여부 - 책임건설사업관리기술자 교체 적정여부 (PQ심사 선정시 제출자와 동등한 점수해당자 이상) - 건설사업관리기술자의 현장부임과 변경시 비상연락 전화번호 및 우편연락처등 발주청에 보고여부 - 공사시행전 설계서등의 적정성 검토여부 (현장조건 부합여부 및 설계서 누락등 검토결과 발주청에 보고여부) - 설계서 등의 관리적정 여부 (공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서등 발주청에서 인수시 관리번호 부여, 관리대장 작성 여부) - 착공신고서 검토 및 보고 적정여부 (시공사에서 접수된 착공신고서를 발주청보고 기일준수(7일내)여부 - 하도급 신고내역 검토적정 여부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	11/15

점검분야	착안사항	중 점 점 검 사 항	비고
3. 공사시행 단계	가. 일반행정업무 나. 품질관리 다. 기록관리	- 시공상세도 승인 검토사항 - 현장정기교육(현장종사자) 주1회 실시(기능공포함)여부 - 문서가 성격별로 분류하여 관리되고 있는지 여부 - 월간또는 분기보고서가 다음달 7일이내에 보고되었는지 여부 - 기성또는 준공금이 하도급자에게 법정기간내에 지불되었는지 확인여부 - 하자관리대장 비취 및 작성여부 - 중점품질 관리방안 수립여부 - 설계변경시 기술검토 (기술지원 건설사업관리기술자 활용) - 주요자재(사급) 공급원 승인검토 - 관급자재 관리현황 - 산업재해 예방을 위한 안전관리 지도 - 시공자와 관련된 수명사항의 처리 - 공사진행과정에 대하여 공종별로 착공전부터 전과정에 대한 사진촬영 및 특기사항 설명서 첨부여부
4. 설계변경 및 계약금액조정	가. 설계변경 나. 단가적용의 적정 다. 물가변동 사항 라. 계약금액 조정	- 확인측량실시 설계변경 반영여부 - 방침 결정사항 처리내용 - 신규단가 적용 적정여부 (발주청의 요구에 의한 설계 변경의 경우) - 공사기간, 운반거리 변경 등 실비산정 조정 적정여부 - 물가변동으로 인한 계약금액 적정 여부 - 변경설계도서 작성 및 검토 적정여부(계약금액조정 검토팀의 지적사항 반영 적정여부)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	12/15

점검분야	착안사항	중 점 점 검 사 항	비고
5. 기성 및 준공검사	가. 검사자의 임명 나. 검사기간 다. 준공절차	- 기성(준공)계 접수후 기성검사자 임명여부 (비상주 고급이상) - 차수별 준공시 예비준공검사 실시후 발주처에 보고여부(준공1개월전 실시) - 준공검사시 시설물인수(유지관리)기관의 입회여부 - 검사원 접수후 신속히 검토후 지체없이 감리조서 첨부하여 3일이내 검사자 임명여부 - 검사자 임명후 8일이내 검사완료여부 (기술지원 건설사업관리기술자의 기성(준공)검사 방문 기록 확인) - 검사완료 일로부터 3일이내에 검사결과 보고여부(발주처 접수확인) - 기성부분 내역확인 및 구비서류 검토 (매몰부분. 철근배근. 안전관리비. 품질시험등) - 준공시 시공자로 하여금 시운전계획을 수립토록하고 검토확정후 시운전 30일 전까지 발주청에 보고여부 - 준공 표지석의 규격 표지문등이 규격에 맞게 설치되었는지 여부
6.시설물 인수. 인계 관련	가. 시설물 인수.인계	- 준공검사 실시후 14일 이내에 시설물의 인수.인계를 위한 계획수립 검토여부 - 인수.인계 계획서상의 포함하여야할 서류 확인(감리업무지침 6-2참조) - 건설사업관리용역 준공후 14일 이내에 발주청과 협의한 현장문서를 발주청에 인계여부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	13/15

라.  업무처리 절차도

□ 업 무 명 : 건설공사 공사관리관 업무

업무개요	◦ 공사 착공․시공, 기성부분 및 준공 검사 인수인계		관련법규	건설기술진흥법 제35조 동법시행령 제56조 제59조 동법시행규칙 제32조
세부업무 방법 및 유의사항			관련부서	업무흐름
(1) 건설사업관리용역 계약체결 (가) P.Q 기준 (나) 건설사업관리업무 수행계획서 (2) 품질보증계획(품질시험계획) (3) 공사시공 (가) 건설사업관리기술자에 대한 지도관리 (나) 민원사항처리 (다) 시험․검사성과 처리 (라) 현장실정보고 (마) 특수공법협의 (바) 지급자재의 검수․관리 (사) 설계변경 및 계약금액의 조정 (아) 공정관리 (자) 준공기한 연기원 (차) 안전전검 (카) 시설물의 인수․인계			본 부	시 공 사 (현장실정보고) ↓ 건설사업관리단 (현장실정보고 및 검토․확인) ↓ 공사관리관 (검토․확인 및 승인 업무지시) ↓ 건설사업관리단 (지적사항 시정지시) ↓ 시 공 사 (지직사항 시정지시)
업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	14/15

□ 업무 인계․인수현황

일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자
0000.00.00.	0 0 0
	0 0 0

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1
2

7. 관련표준(근거)

가.건설산업 기본법

나.산업안전 보건법

다.국가기술 자격법

8. 첨   부

별지1 : 공사관리관 업무수행 기록부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67511-P
	공사업무 지원처리 절차서	쪽 수	15/15

[별지 제51호 서식]

공사관리관 업무수행 기록부

사업부서의 장

공 사 명 :

일자/시간	업무수행사항	지시 또는 중요사항 (현장실정 등)	면담자 (직/성명)
20 . . . 공사관리관 : 직급 성명 서명 또는 날인 ※ 작성요령 1. 규격은 A4(16절)용지에 종으로 작성 2. 면담자를 기준으로 협의내용, 지시사항 등을 기술 3. 현장별로 작성하여 비치하며, 발주청과 공사현장 간 정보시스템을 운영하는 경우 3일 이내에 시스템에 입력

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재, 재해 업무 절차서	쪽 수	1/29

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	30	김영삼	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 11.20	18,19 22,23	"	o 정수장 및 사업소 긴급 복구업체 변경 o 유관기관 및 취.정수장 전화번호변경	o 변경된 단가계약업체로 수정 o 변경된 전화번호로 수정
2	2009. 12.01	1	최희권	o 문서번호 재조정	o 본부67307-P → 본부67306-P
3	2011. 10.27	1	선우요섭	o 문서번호 재조정	o 본부67306-P → 본부67512-P
4	2011. 10.27	2.3	선우요섭	o 책임과 권한 변경	o 차장, 총부부, 시설부, 급수부 → 부본부장, 고객지원부, 급수부, 배수과
5	2011. 10.27	4	선우요섭	o 복구반 조직 변경	o 생산관리부 → 생산부, 시설관리부
6	2011. 10.27	4.5	선우요섭	o 업무절차 방재조직 및 시설현황 변경	o 정수사업소 → 정수센터 o 2종시설물 수량 변경
7	2011. 10.27	8	선우요섭	o 원수취수 현황 변경	o 취․정수장현황 수정
8	2011. 10.27	13～ 23	선우요섭	o 조직도 및 보고체계도 변경	o 조직도 및 보고체계도 수정
9	2014. 12.11	1~29	문현수	o 조직도 및 시설현황, 비상연락망 등 변경	o 전면수정
10	2015. 11.30	5	라승보	o 시설물현황 수정	o 시설물현황 수정
11	2015. 11.30	14	라승보	o 수도사업소 재해대책 조직도 수정	o 급수운영과장 → 시설관리과장 시설관리과장 → 급수운영과장

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	2/29

1. 목   적

본 절차서는 서울특별시 상수도사업본부(이하 “우리본부”라 한다.)의   자연재해에 대한 적극적인 대처와 재해취약 시설에 대한 일제 점검․  정비를 실시, 위험요인을 사전에 제거하고 각종 방재물자 확보․비축,  인접 자치단체간 확고한 응원체계 구축으로 재해발생시 신속한 응급복구 및 구호활동 등을 실시할 수 있도록 준비태세를 완비, 인명 및 재산피해를   최소화 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 우리본부의 각종 재해에 대비한 사전준비 및 적극적인 대처에 필요한 사항에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 재해

태풍․홍수․호우․폭풍․해일․폭설․가뭄 또는 지진 기타 이에 준하는  자연현상으로 발생하는 피해를 말한다.

나. 재난

화재․붕괴․폭발․교통사고․화생방사고․환경오염 등 인위적인 사고로  인하여 발생하는 피해를 말한다.

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 방재 재해업무 계획 총괄승인

(2) 비상사태 발생시 총괄 지휘․통제

(3) 재해대책 3단계(비상체제)시 총괄지휘

나. 부본부장

(1) 본부장 부재시 임무대행

(2) 재해대책 2단계(경계체제)시 총괄지휘

다. 각 부장

(1) 단계별 비상근무 체제시 각 조원에게 임무부여 및 조별 총괄

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	3/29

라. 각 반별 임무

(1) 행정반 (요금관리부, 경영관리부)

(가)사무실 및 차량의 관리, 통신망구성 및 유지관리사항

(나) 본부요원 근무지정 협조 및 복무에 관한 사항

(다) 수해 응급복구에 관한 각종 보고자료 수합․정리 및 행정지원 등

(라) 본부 조직 및 운영관리

(마) 풍수해 사전대책, 수방활동 및 복구상황 점검

(바) 본부운영, 예산집행, 예산편성 및 회계에 관한 사항

(사) 상황실 상황판 정리에 관한 사항

(2) 총괄반 (시설안전부)

(가) 각종 기상 예․경보발령 및 해제에 관한 사항

(나) 기상 개황 및 분석보고

(다) 시간별 기상(강우량) 및 수위자료 제보에 관한 사항

(라) 한강수계의 홍수통제에 관한 사항

(마) 피해 통계작성 및 상황보고

(바) 상황판 관리에 관한 사항

(사) 피해상황(해당 시설별 관할구청에 통보)

(아) 관계부서간의 수해대책에 관한 협의사항 추진

(자) 각 공사장 수방단 지휘감독 및 안전점검

(차) 기타 이에 준하는 사항

(3) 급수반(배수과)

(가) 재해지역 급수지원

(나) 급수차 운행 및 수계조절

(다) 재해로 인한 배급수관 파손시 응급복구 및 지원

(라) 각 사업소 수방단 지휘감독

(마) 기타 이에 준하는 사항

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	4/29

(4) 복구반(생산부, 시설안전부)

(가) 복구용 중기동원에 관한 사항

(나) 복구용 중기 이동상황 파악

(다) 수해 응급조치 장비종원 및 조사명령에 관한 사항

(라) 응급조치의 지시협조에 관한 사항

(마) 분야별 복구계획서 작성

(바) 피해상황 현지조사 및 복구사업 지도감독

(사) 피해분야별 내역서 작성 및 응급조치사항 보고자료 작성

(아) 복구용 수방자재 수급 및 배정에 관한 사항

(자) 복구장비 수송에 관한 사항

5. 업무절차

가. 상황근무기준

(1) 방재조직 - 본부1, 수도사업소8, 정수센터6, 본부시행 공사현장

(가) 본부 : 5개반(반별 4개조편성, 2명 1조)

(나) 수도사업소 : 3개반(반별 4개조편성, 2명 1조)

(다) 정수센터 : 2개반(반별 4개조편성, 2명 1조)

(라) 현장 : 자체실정에 맞게 편성 운영

(마) 재해대책본부 조직도 및 수도사업소, 정수사업소 조직도는 [별표1]과 같고,

재해대책본부 지휘계통도는 [별표2]와 같다.

(2) 비상근무 체제

(가) 평시 : 예방, 호우 예상 시

(나) 1단계 : 준비, 호우주의보. 폭풍주의보

(다) 2단계 : 경계, 호우경보. 폭풍경보

(라) 3단계 : 비상, 홍수경보, 태풍경보

(마) 단계별 상황기준 및 비상근무체제는 [별표3]과 같다.

(3) 응급복구

(가) 재해발생시 신속한 응급복구 및 항구복구 시행

(나) 유관기관 협조로 신속한 복구동원

(다) 수방자재, 장비, 인력 등 사전동원 태세를 확립하여 수해 발생시 응급

대처로 피해확산방지

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	5/29

(4) 재해 취약시설(공사장)의 사전점검․ 정비

(가) 점검 대상  : 본부시행 공사 현장

(나) 점검반 편성 : 3개조 12명

(다) 중점 점검사항

1) 재해위험시설 점검시 지적사항 중점점검, 정비

2) 각 현장별 주요 수해 취약지역 공종정비 관리상태

3) 공사장내 배수로 정비상태

4) 진입로, 절개지 등 사면부 안정성 및 관리실태

5) 하천구간의 작업계획, 자재, 장비, 대피계획 적정여부

6) 현장내 우수 유입 여부

7) 수방자재, 장비, 대피계획 적정여부

8) 공사시 교통장애 등 시민불편 사항

9) 위험개소 안정관리상태

10) 위험개소 특별안전관리 여부

11) 공사로 인한 웅덩이 방치 여부

12) 가시설(비계, 동바리, 작업발판, 난간 등) 설치상태

(5) 중점추진사항

(가) 24시간 행정체제 유지

(나) 수방취약시설 및 대형공사장 재해대비 사전점검 및 우기 전 보강조치

(다) 수방대책용 자재, 장비 사전확보

나. 상수도 시설 안전관리

(1) 중점관리대상 시설 현황

(가) 1종시설물 : 시설물 178개소

1) 취수장 : 4개소(취수시설용량 : 616만톤/일)

2) 정수장 : 6개소(정수시설용량 : 460만톤/일)

3) 배수지 : 102개소(1만톤이상 대형 41개소, 소형 61개소)

4) 가압장 : 64개소(유인 8개소, 무인 56개소)

5) 공업용수도 : 1개소

6) 도, 송수관로 609km

(나) 기타 시설물 : 본부 및 사업소 청사 25개동

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	6/29

(2) 상수도 시설물 관리주체별 재해사고 예방

(가) 분야별 체계적인 안전점검과 적기 정비․보수시행으로 취약 요인을 사전 제거

(나) 안전점검, 일상정비․보수 등 24시간 안전관리체계 구축

(3) 재해 취약시설물에 대한 특별관리

(가) 관리카드 작성 기록관리 및 간부직책임자 지정관리

(나) 점검자 및 보수․보강책임자 실명화

다. 공사장 안전관리

(1) 대형공사장 : 배수지 건설공사, 송수관 부설공사

(2) 공사장 안전관리 추진계획

(가) 안전관리 : 사전점검으로 사고 예방

1) 계획점검(년6회) : 설날, 해빙기, 하절기, 추석, 절기, 연말연시

2) 수시점검 : 필요시 수시점검

3) 외부전문가 합동점검(특별점검) : 중간 준공검사시 동시 실시

※ 필요시 외부전문가 활용 기동점검

(나) 품질관리 : 품질시험계획의 이행 확인으로 공사품질 향상

1) 시공자가 수립한 품질시험계획에 따라 공사의 시공 및 사용 재료에 대한

관리업무에 적정한 수행여부 확인

2) 공사현장 시험실 운영강화 : 안전점검시 병행하여 시험실 운영실태 점검

(다) 환경관리 : 주변환경의 적정한 관리 보전

1) 비산먼지 방지대책 및 환경관리상태 점검

(라) 현장관리 강화

1) 현장대리인 및 안전관리자 현장근무상태

2) 책임감리원 및 감리원 현장근무실태 수시 확인

(마) 공사현장 안전관리 점검기준은 [별지1]와 같다.

라. 재해예방시책 추진

(1) 재해대비 종합상황 관리체계 구축

(가) 근무요령

1) 재해대책 기간 중에는 주간 시설과 재해담당1명 근무 및 야간 당직근무자가

재해대책본부를 병행 운영한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	7/29

2) 상황실 근무요원은 각 단계별 근무조 근무요령에 의거 재해대책본부

급수상황실에서 고정 근무한다.(별도 근무명령)

3) 대기조는 각 부에서 상황실지원 및 각 부 소관 재해 관련업무를 처리한다.

4) 수도사업소, 정수사업소 및 주요공사현장 수방단은 본부의 재해대책에

준하여 현지실정에 적합하도록 수방단을 편성하고 운용계획을 수립한다.

(나) 근무

1) 상황실 요원 : 상황실에서 근무

2) 대기조 : 각 부 사무실에서 근무

3) 수방단 : 해당부서에서 근무

(다) 현장상황반은 재해현장에 파견, 상황파악 및 지원활동 전개

(2) 안전점검 및 재해 위험시설 관리

(가) 목적

1) 재해발생의 위험이 높은 시설이나 지역에 대한 체계적인 안전점검과 정비․

보수 시행으로 재해발생의 위험성 해소

2) 재해위험시설 등의 「안전검검-지정-안전조치-장․단기계획수립」이

철저히 이루어지는 안전관리체계구축으로 재해를 예방

(나) 보고 체계도 : [별표5]

마. 재해의 수합 복구대책 추진

(1) 재해상황 발생시 조치계획

(가) 시설물 복구체계

1) 정수장, 배수지, 가압장

가) 정수장 : 경미한 사고는 자체 수습

※ 수․배전, 모타펌프 등 위험시설물 사고시 긴급복구 협력 업체 복구

◦ 정수장 긴급복구 협력업체 : [별표6]

2) 가압장․배수지시설 : 전기사고 관계는 생산부에서 처리하며 합의된

지정업체에 복구 임무고지

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	8/29

3) 송․배수관 및 현수관

가) 송․배수관 : 사업소별로 연간단가계약에 의거 시행중인긴급누수                복구업체에 대하여 작업 지시하여 복구

◦ 상수도 관로 긴급복구 지정업체 : [별표7]

나) 현수관로 : 상수도관 자체 누수시 별도 계약에 의한 복구 교량과

연계된 사고시에는 교량 관리부서와 협의 복구

(나) 상수도(수질오염)대책

1) 목표

가) 유해물질의 상수원 유입을 미연에 방지하여 깨끗한 수돗물 공급

나) 오염사고 방생시 피해를 최소화하기 위한 방재능력 제고

2) 기본방침

가) 수질오염사고시 신속한 대처를 위한 비상대응 능력 제고

나) 상수원수 수질감시 기능 강화

다) 수질관리기관간 협력체제 유지

3) 원수취수 현황	(단위 : 천톤/일)

정수장 (6개소)		취수장 (5개소)
명 칭	시설용량	명 칭	시설용량
계	4,350	계	6,160
광 암	400	-	-
암 사	1,600	암사	1,710
구 의	250	구의	-
뚝 도	500	자양	1,450
영등포	600	풍납	700
강 북	1,000	강북	2,300

4) 추진계획

가) 상수원 수질감시기능 강화

① 상수원 수질자동감시장치 운용현황

㉮ 대상 : 서울시 주요 4개 취수원(강북, 암사, 자양, 풍납)

㉯ 항목 : 시안, 페놀, 암모니아성질소, TOC, 수온, pH, 탁도

㉰ 방법 : 오염물질유입시 경보발생(24시간 연속 감시)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	9/29

② 수질검사기능 강화

㉮ 검사항목 : 먹는물 수질기준 163항목

㉯ 시험항목 및 시험주기

구 분	총검사 항목	검사기관	주기	검 사 항 목
정수	163항목 (19항목 중복)	상수도 연구원 (163)	월간 63	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균, 경도, 과망간산칼륨소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, pH, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄, 세제, 불소, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 납, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 크롬, 카드뮴, 페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산, 잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄 하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 포름 알데히드. 총유기탄소, 입자수, 지오스민, 2-MIB,
			분기61	장구균, 저온일반세균, 지아디아, 크립토스포리디움, 나트륨, 마그네슘, 몰리브덴, 베릴륨, 스트론튬, 은, 주석, 칼륨, 칼슘, 아질산성질소, 퍼클로레이트, 우라늄, 노닐페놀, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈 레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로 에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 모노클로로에탄, 비스페놀 A, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 글라이포세이트, 디메토에이트, 1,2-디클로로프로판, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로로피리포스, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이, 에피클로로히드린, 브로메이트, 클로레이트, 클로라이트, 디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로 아세톤, 브로모클로로아세토니트릴, 클로로피크린, 브로모포름, 바륨, 브롬이온, 부틸벤질프탈레이트, 메토밀, 2.4,5-T, 아세트알데히드
			연간39	녹농균, 살모넬라, 쉬겔라, 분원성연쇄상구균, 아황산환원 혐기성포자형성균, 총배양성바이러스, 니켈, 안티몬, 벤조(a)피렌, 스티렌, 염화비닐, 1,3-디클로로프로펜, 모노클로로벤젠, MTBE, 1,4-디클로로벤젠, 마이크로시스틴, 2,4-디, 2,4-DB, 디엘드린, 메톨라클러, 메틸디메톤, 시마진, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, EPN, 카보푸란, 터부틸아진, 페노브카브, 펜타클로로페놀, 펜토 에이트헵타클로, 헵타클로에폭사이드, 2-클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀
		정수 센터 (23)	일일 8 (10)	pH, 암모니아성질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 잔류염소, 과망간산칼륨소비량, 수온, 알칼리도
			주간 10 (13)	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 염소이온, 증발잔류물, 경도, 황산이온, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB

나) 방재장비확보

① 대    상 : 서울시 4개 취수장(암사, 풍납, 자양, 강북)

② 보유장비 : 오일휀스, 유흡착제, 모타보트

다) 수질오염사고 발생시 상황별 대응요령

① 한강상류 수질오염사고 발생시

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	10/29

㉮ 상황접수 및 전파(비상연락망 참조)

㉯ 오염물질 종류확인 및 상수도연구원 현장출동

․ 출동장소 : 오염확산 예상지역(한강 상류)

․ 수질검사결과 수시 보고(본부)

㉰ 취․정수장 비상근무 실시

․ 방제장비 및 취․송수설비 점검

․ 유류등 부유 오염물질 유입대비 오일휀스 설치

② 취수원 수질오염사고 발생시

㉮ 즉시 취수 중단

㉯ 취수장 주변 오염항목 수질검사 수시 실시

㉰ 송수 중단시 단수홍보, 장기간 취수 불가능시 비상급수 체제 돌입

㉱ 한국수자원공사에 팔당댐 방류량 증대(상수원 물갈이)요청

③ 오염된 정수 일부가 공급된 경우

㉮ 오염상황 홍보

․홍보내용 : 수돗물 중단 및 퇴수 실시

․언론기관(방송국, 신문사)에 긴급속보 요청

㉯ 수도사업소 수질검사요원 출동 및 수질검사 실시

․상수도연구원 정밀수질검사 실시

㉰ 오염된 배수지, 저수조, 등 단계별 퇴수 및 세척 실시

㉱ 오염물질 제거후 이상유무 확인 및 송수체계(정상급수 홍보)

(다) 지원체제

1) 재해대책 본부설치 : 본부 및 사업소

시설물 관련 담당 부서별 업무추진

2) 주민홍보

가) 방송, 신문등 언론매체와 유관기관을 통하여 홍보

나) 단수시 최소한의 생활용수만 사용토록 절수운동전개

3) 재해예방 및 복구장비 예산의 확보

가) 급수시설물 관리 및 급수대책비에 편성 관리부서별 운영

나) 관로 등 긴급복구비는 사업소별 예산편성운영

◦ 상수도시설 복구장비 보유현황 : [별표8]

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	11/29

업무개선 idea	서울시 재해대책본부에서 재해대책 단계별 비상발령시 시설부 FAX로만 접수되어 주간에는 각 사업소로 신속히 전파할수 있으나 야간에는 비상발령 상태를 확인이 않되니 상황발생 우려시는 당직근무자에게 시설부FAX를 수시로 확인하여 전파할수 있도록 전달이 필요
실 패 사 례
참 고 자 료	ㅇ 2011 지역방재계획(풍수해) ㅇ 2011 자연재해조사 및 복구계획수립 지침 ㅇ 2011 지진방재 종합대책 ㅇ 2011 재난관리계획 ㅇ 2011 재난대비 자원동원계획
□ 업무인계․인수현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	2001 방재계획(풍수해)	1년	시설과장	3년	행정운영과장

7. 관련표준

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	12/29

8. 첨  부

가. 별표

(1) 별표1 : 재해대책본부, 수도사업소, 정수센터재해대책 조직도

(2) 별표2 : 재해대책본부 지휘계통도

(3) 별표3 : 단계별 상황기준 및 비상근무체제

(4) 별표4 : 보고체계도

(5) 별표5 : 정수장 긴급복구 협력업체

(6) 별표6 : 상수도 관로 긴급복구 지정업체

(7) 별표7 : 상수도 시설 복구장비 보유현황

(8) 별표8 : 비상연락망 구축

(9) 별표9 : 유관기관 연락망

(10) 별표10 : 정수장 및 취수장 비상연락망

나. 별지

(1) 별지1 : 공사현장 안전관리 점검기준

(2) 별지2 : 재해상황 보고서식

(3) 별지3 : 피해 현황

(4) 별지4 : 중요 조치사항

(5) 별지5 : 시설복구계획 내역

(6) 별지6 : 인명피해 확인조서

(7) 별지7 : 수방자재 및 장비확보현황

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	13/29

[별표1]

상수도사업본부 재해대책본부 조직도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

				상수도사업본부 재해대책본부장							본 부 장
								부본부장
행정반			총괄반						급수반				시설복구반					대기조
경영관리부 요금관리부			시설안전부						급수부				생산부					각부 2명
반원2명			반원2명						반원2명				반원2명					반원2명
2명1개조로 4개조편성			2명1개조로 4개조편성						2명1개조로 4개조편성				2명1개조로 4개조편성					2명1개조로 4개조편성
			공사현장						수도사업소 8개				정수센터 6개

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	14/29

수도사업소 재해대책 조직도 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
			단장
			사업소장
행정반			긴급복구반			급수지원반
총무과장			시설관리과장			급수운영과장
반원 : 2명			반원 : 2명			반원 : 2명
2명1개조로 4개조 편성			2명1개조로 4개조 편성			2명1개조로 4개조 편성

정수센터 재해대책 조직도 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
			단 장
			사업소장
시설복구반						수질관리반
정수시설과장						정수과장
반원 : 2명						반원 : 2명
2명1개조로 4개조 편성						2명1개조로 4개조 편성

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	15/29

[별표2]

대책 본부 지휘 계통도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

급 수 부(배수과)

시설안전부(누수방지과)

◦사업소 지휘통제

◦복구업무지휘

◦단수지역 홍보

◦수계조절등 송배수

관할구청 종합상황실

급수공급등 홍보협조

관할동사무소

◦급수차배차시안내

유  관  기  관

◦급수공급 협조

본   부   장

부 본 부 장

시설관리부장, 급수부장

본부 재난상황실

◦침수 등 사고 상황파악

◦상황전파

◦행정지원과, 현장민원과

- 상황파악 주관과 처리

통보 처리결과 기록

- 급수공사 시간, 위치 등

홍보

◦급수운영과, 시설관리과

- 복구지휘, 제수변 조절

- 급수공급 및 시간홍보

- 수계조절 및 배수통제

- 피해상황 조치

- 상황보고

수 도 사 업 소 장

정 수 센 터 소 장

◦송수통제 및

제수변조절

생산부장

지시

지시

지시

지시

보고

보고

보고

보고

보고

통보

통보

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	16/29

[별표3]

단계별 상황기준 및 비상근무체제

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◦ 평      시 : 당직 근무체제

◦ 1, 2, 3단계 : 단계별 비상 근무체제

구분 체제별	상 황 기 준	근 무 체 제 ( A․B․C․D 조편성)
평시 (예방)	◦ 상황유지 필요시 ◦ 예방활동 필요시	◦ 평상시 상황 유지 근무
1단계 (준비)	◦ 호우주의보 발령시 ∙시간당 강우량 20㎜ 이상 ∙일 강우량 80㎜ 이상 ∙한강인도교 수위 4.5m 도달시	◦ 총 괄 : 시설안전부장 ◦ 재해대책본부요원 : 1개조(19명) 근무 조 장 A조 ; 경영관리부장 B조 : 생산부장 C조 : 요금관리부장 D조 : 급수부장 ◦ 재해대책본부 운영체제 돌입 (조직점검) ◦ 각종 상황전파 및 처리
2단계 (경계)	◦ 호우경보 발령시 ∙일 강우량 150㎜ 이상 ◦ 홍수 주의보 발령시 ∙한강인도교 수위 8.5m 도달시 ◦ 태풍주의보 발령시	◦ 총 괄 : 부본부장 ◦ 재해대책본부 요원 : 2개조(38명) 12시간 비상근무 조 장 A조 : 경영관리부장 생산부장 B조 : 요금관리부장 급수부장
3단계 (비상)	◦ 홍수경보 발령시 ∙한강인도교 수위 10.5m 도달시 ◦ 태풍경보 발령시	◦ 총 괄 : 본부장 ◦ 재해대책본부 요원 : 1개조(76명) ◦ 24시간 비상근무 (전직원)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	17/29

[별표4]

보 고 체 계 도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

			중앙재해대책본부 (3703-5420)
							↑↓
			서울특별시 재해대책본부 (2199-0071~4)
							↑↓
			상수도사업본부 본부장 (사)3146-1010
							↑↓
			상수도사업본부 통제관 (부본부장) (사)3146-1020
							↑↓
			상수도사업본부 재해대책 상황실 ∘일반 : 3146-1590, 행정 : 1590 ∘FAX : 3146-1594
경영관리부			요금관리부				생산부				급수부				시설안전부
3146-1111～27 행정 1111 FAX:3146-1149			3146-1181～94 행정 1181.11182 FAX:3146-1209				3146-1311～18 행정 1311.1312 FAX:3146-1319				3146-1411～16 행정 1411.1412 FAX:3146-1429				3146-1511～23 행정 1511.1512 FAX:3146-1529
							아리수정수센타				수도사업소				공사현장
※기상청				2189-0900				※한강관리사업소					3780-0777~8
※자동예보				131				※한강홍수통제소					590-9990~8
※한국전력공사				3456-3114				※서울종합방재센타					737-0119, 726-2071
※한강수위 자동음성서비스				592-7700				※팔당댐

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	18/29

[별표5]

정수장 긴급복구 협력업체지정 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구분 정수장	복 구 지 정 업 체
	수 배 전	모 터 펌 프	염 소 가 스
광 암	재향군인회 02-475-1843 ************* 경인엔지니어링㈜ 031-689-3095	원일기계산업 02-497-3304 ************* 펌프텍코리라 032-772-4004 ************	홍인화학 02-2276-0361 ************ -한국가스안전공사 3411-2082~5
구 의	㈜남동인덱스 032-822-1990	효성굿스프링스 3279-8293 ㈜이앤에이치코리아 6053-9108	홍인화학 2269-6390 -한국가스안전공사 3411-2081, 2217-8611
뚝도	대원계전(주) 462-9405 청석전기(주)031-969-2390	효성굿스프링스 3279-8297 디케이앰엔이 462-0041	협)흥인화학 2612-0061 백광산업 212-0061 -한국가스안전공사 3411-2082~5
영등포	신한중전기(주) 464-2729 백제전력(주) 928-5600	상원기공(주) 2679-0588 금호펌프(주) 927-4772	협)백광화학 2612-0061 -한국가스안전공사
암사	대신파워텍(주) 994-7878 신한중전기(주) 464-2729	상원기공 2679-0588 ㈜터보엔에스 3272-9417	흥인화학(주) 2269-6390 동방수기 423-3053 -한국가스안전공사
강북	㈜일산전기 552-6245 (주)효성 3668-5724	물과함께 031)313-8442	흥인화학 2276-0361 -한국가스안전공사

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	19/29

[별표6]

상수도관로 긴급복구 지정업체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소	긴급누수 복구업체(년간단가계약)현황
	업체명	대표자	전 화	소 재 지
중 부	덕원엔지니어링	이두환	798-6767	양천구 남부순환로 700 2층 3호
서 부	㈜일승토건	박명환	3216-6761	은평구 증산서길 65 3층 302호
동 부	대맥건설	대맥건설	457-3529	경기도 김포시 대곶면 거물대로 35-1
북 부	소니종건(주)	유연학	900-4336	관악구 신림동 1680-5 3층
강 서	상협건설	주상호	2696-2190	강남구 논현로 64길 33 한호빌딩 2층
남 부	㈜해정글로벌	류춘석	822-3022	강서구 화곡로 119 303호
강 남	청파건설	김종개	576-0668	광진구 광나루로 450
강 동	㈜건설넷	박정민	3437-9861	강남구 압구정로 2길 35 5층

※연간단가계약이 만료되어 다음업체 선정시 자동 승계

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	20/29

[별표7]

상수도시설 복구장비 보유현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

장비명	규 격	단 위	장 비 보 유			비 고
			계	본 부 사 업 소	복구업체 (8개업체)
계			146		146
작업차량	2.5톤이상	대	18	-	18
포크레인	0.4㎡이상	“	13	-	13
수중펌프	80~150mm	“	21	-	21
양 수 기	엔 진	“	51	-	51
브레이카	콤프레사용	“	14	-	14
발 전 기	40kW	“	10	-	10
콤프레샤	3.3m/분	“	7	-	7
용 접 기	16kW이상	“	12	-	12

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	21/29

[별표8]

비상연락망 구축

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 상황전파 우선순위

가. 직하류의 취수, 정수사업소 및 상수도사업본부(유해물질 유입방지)

나. 한강관리사업소 및 구청(방재사업)

다. 본청상황실(환경관리실), 환경부, 한강환경관리청, 인천시, 경기도 등에 상황전파

2. 상황전파 체계도

취 수 장, 정 수 장

상 수 도 사 업 본 부

한강본류 감시상황실

(한강관리사업소)또는

○○구 지천감시상황실

본청 상황실(환경관리실)

환경부(상하수도국)

상수도연구원

인천시, 경기도

취수, 정수장

한강환경관리청

수자원공사

보건환경연구원

한국전력공사

군  부  대

경  찰  서

소  방  서

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	22/29

[별표9]

유 관 기 관  연 락 망

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명	전화번호	기관명	전화번호
환경부	044-201-6001	한국수자원공사	(042)629-3114
- 수도정책과	044-201-7110	- 충주권 관리단	043-840-1203
- 물환경정책과	044-201-7001	- 팔당권관리단	031-790-3323
한강유역환경청	031-790-2420	- 소양강댐관리단	033-259-7211
국립환경과학원	032-560-7114
-한강물환경연구소	031-770-7200
경기도청	031-8008-2298 031-120
경기도수자원본부	031-8008-6920 Fax031-8008-6869
인천광역시	(032)440-2114
- 상수도사업본부	(032)720-2114

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	23/29

[별표10]

정수장 및 취수장 비상연락망

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

정수장명	전화번호	관련부서
팔당댐	(031)	수자원공사
	793-3391
암사	3146-5784	암사정수장
풍납	3146-4031	영등포정수장
풍납 (인천)	720-3042	인 천 시
자양	3146-2230	뚝도정수장
일산	(031) 930-1211	수자원공사
강북	3146-5230	강북정수장

<정수사업소>

정수장명	전화번호	관련취수장
광암	3146-5300	팔당댐
암사	3146-5700	암사
구의	3146-5400	구의
뚝도	3146-5500	자양
영등포	3146-5600	풍납
강북	3146-5800	강북

<취  수  장>

<관련부서>

상수도사업본부	(주)3146-1311, (야)3146-1590	한국수자원공사 수도권지역본부	02-2150-0240
	Fax 3146-1319, 1594		Fax 02-2150-0246
상수도연구원	3146-1700	한강관리사업소	(주)3780-0777~8 (야)3780-0777~8
물관리정책과	2133-3751
시 보건환경연구원	570-3375~9

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	24/29

[별지1]

공사현장 안전관리 점검 기준표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◦공 사 명 :

◦점검기간 :

점 검 사 항	점 검 결 과
가. 공사장 안전관리 대책 (1) 위험물 취급관리상태 (화약, 유류,LPG 등) (2) 작업원 안전장구 착용 및 지급 여부
나. 취약개소 안전관리 상태 (1) 취약개소 안전관리 여부 (2) 공사장내 배수로 정비 상태 (3) 가 시설(비계, 동바리)설치 상태 (4) 절개지 관리상태
다. 공사현장 환경관리 상태 (1) 공사현장 주변 청소 상태 (2) 안전 시설물 설치 상태 (3) 소음 및 분진방지 대책, 공사장 무단소각 방지 대책 (4) 세륜시설 설치 및 사용 실태
라. 기타 공사장 안전관리 상태 (1) 현장대리인 및 안전관리자 상주 여부 (2) 포장도로 복구 상태 (3) 야간 보안등,경고등,유도등 설치 및 관리 산태 (4) 수방대책 수립 및 준비 상태

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	25/29

점 검 사 항	점 검 결 과
마. 안전관리 계획 및 교육 관련 (1) 안전관리 계획수립 및 이행적정 여부 (2) 안전관리비 집행 내역과 안전장구 수불 부작성 여부 (3) 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성 여부 (4) 절개지 관리상태
바. 책임감리원 및 감리업무 관련 (1) 출근부,근무상황부,비치 및 정리상태 (2) 감리일지(종합,감리원)비치 및 작성실태 (3) 각종 대장(검측,시험,자재) 비치 및 정리 실태 (4) 업무지시사항 이행 실태
사. 기타 안전업무 관련사항 (1) 비상연락망 및 유관기관 연락체계도 비치등 (2) 민원사항 처리 적정 여부 (3) 현장안전관리 관련 문서관리 적정여부

0000.    .    .

점검자 :            (인)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	26/29

[별지2]

피해상황보고서(발생보고)
발 신 : 수도사업소재해대책본부 수 신 : 상수도사업본부재해대책본부 발 신 자 : 소속 직급 성명 보고일시 : 년 월 일 시
강 우 량	년 월 일 시부터 년 월 일 시까지 (mm)
피 해 원 인
피해발생일시	년 월 일 시
피해발생지역 또는 장소
피 해 개 요 및 피 해 액
응급조치상황
기 타 사 황

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	27/29

[별지3]

피  해  현  황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

년    월    일  ～    년   월   일

연번	피해구분	피해현황	피해액 (천 원)	조 치 현 황		소관 부서
				응급복구	향후계획

[별지4]

중  요  조  치  사  항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일 시	제 목	조 치 내 용

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	28/29

[별지5]

시 설 복 구 계 획 내 역

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(단위 : 천원)

구별	공사명	위 치	피해내용		복 구 소 요						비고
			물량	금 액	금액계	재 원 별
						국 고	의연금	지방비	융자	수익자 및 자력

[별지6]

인 명  피 해  확 인  조 사 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

.  .  .부터     .  .  .까지

구별	피해일시	피 해 구 분	피해장소	인 적 사 항						장의위로금지급 유무
				성 명	성	(나이)	주민등록번 호	세대주 와 관계	주소

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67512-P
	방재,재해업무절차서	쪽 수	29/29

[별지7]

수방자재 및 장비확보현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 자재 보유현황

품 명	단 위	규 격	수 량	비 고

○ 장비 보유현황

품 명	단 위	규 격	수 량	비 고

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	1/25

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	25	손진곤	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2011. 10.27	3	선우요섭	o 책임과 권한	o 차장 → 부본부장
2	2014. 05.23	2, 9	최이영	o 건설기술진흥법 제정․시행	o 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 변경

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	2/25

1. 목  적

본 절차서는 서울시상수도사업본부(이하 “우리본부”라 한다)에서 시행하는   상수도시설공사의 감독업무 수행에 필요한 사항을 정하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 건설기술진흥법 제49조(건설공사 감독자의 감독의무) 규정에  의하여 우리본부에서 발주하는 상수도 시설공사에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 시공자

건설기술진흥법 제2조의 규정에 의한 건설업자 및 주택법 제9조(주택건설사업등의 등록)의 규정에 의한 주택건설사업의 등록한 자로서 당해공사를 도급받은 건설업자  <하도급업자 포함>(이하 당해 공사 건설업자를 "시공자"라 한다)를 말한다.

나. 설계서

공사시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다. 다만, 공사추정가격이 1억원   이상인 공사에 있어서는 공종별 목적물 물량이 표시된 내역서를 포함한다.

다. 공사계약문서

계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

라. 검 사

공사계약문서에 나타난 시공등의 단계 및 재료에 대해서 완성품 및 품질을 확보하기 위해 시공자의 확인검사에 근거하여 검사원이 완성품, 품질, 규격, 수량등을   확인하는 것을 말한다. 이 경우 시공자가 실시한 확인 결과 중 대표가 되는   부분을 추출하여 실시할 수 있다. 또 시공에 대한 합격판정은 검사원이 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	3/25

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 중요공사의 기본방침 결정

(2) 1건당 도급비 1억원 이상의 공사발주 승인

(3) 1건당 도급비 1억원 이상의 공사의 공사중지, 준공기한 연기, 준공검사 승인

(4) 1건당 도급비 1억원 이상의 설계변경 승인

나. 부본부장

(1) 1건당 도급비 5천만원 이상 1억원 미만의 공사발주 승인

(2) 1건당 도급비 도급비 5천만원 이상 1억원 미만의 공사의 공사중지, 준공  기한 연기, 준공검사 승인

(3) 1건당 도급비 5천만원 이상 1억원 미만의 설계변경 승인                다. 부 장

(1) 공사착공명령

(2) 공사감독자 및 업무담당자 지정

(3) 준공검사원 지정

(4) 기성부분의 준공검사

다. 담당과장

(1) 공사발주설계서 작성

(2) 공사감독업무 수행

5. 절   차

가. 업무처리 방법

(1) (발주청의 서류 작성․비치) 공사감독자는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 서류를 작성․비치하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	4/25

(가) 별지 제1호서식의 공사감독일지

(나) 별지 제2호서식의 발생품 정리부

(다) 별지 제3서식의 지급자재 수불부

(라) 별지 제4호서식의 공정보고서

(마) 별지 제5호서식의 주요자재 검사부

(바) 매몰부분 검측부 및 사진과 구조물검측부 및 대장

(사) 건설공사 단속․점검 실명제 기록일지

(아) 기타 필요한 서류 및 도표

(2) (시공자가 비치하는 서류의 확인)공사감독자는 건설업자(이하 "시공자"라 한다)가 작성한 다음의 서류를 검토․확인하도록 하여야 한다.

(가) 별지 제6 호서식의 품질시험계획 또는 품질보증계획서

(나) 별지 제7 호서식의 품질시험․검사대장

(다) 별지 제8 호서식의 품질시험․검사성과 총괄표

(라) 별지 제9 호서식의 품질시험․검사실적보고서

(마) 별지 제10호서식의 현장교육실적부

(바) 별지 제11호서식의 구조물부위별 사용콘크리트 종류기록서

(사) 시공자의 제반 안전관리실적(교육계획 등), 안전관리비사용실적 관계서류

(아) 주요자재수불부

(자) 공사측량성과

(차) 공사진척현황에 대한 사진첩 또는 비디오 테이프

(타) 기타 필요한 서류 및 도표

(3) (공사단계별 업무)공사감독자는 다음의 공사단계별로 당해 공사가 설계서 등에 적합하게 시공되도록 하여야 한다.

(가) 공사착수단계

1) 공사감독자는 시공자가 공사안내표지판을 설치하는 경우 공사현장의 시점

및 종점과 주요구조물 현장 기타 일반인이 보기 쉬운 곳에 공사내용을

알리는 공사안내표지판을 설치하게 하여야 한다.

2) 공사검측에 필요한 수준점 및 양수표들을 공사기간동안 보존될 수 있도록

설치하게 하고, 그 위치 및 표고를 평면도 등에 표시하여 보관하게 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67407p
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	5/25

3) 선임후 일정기간내에 설계도서의 구조적안전성․시공성 등에 대한 적정

여부를 검토하여야 한다.

4) 설계도서를 숙지하고 착공과 동시에 시공자로 하여금 설계도서와 실제

현장의 이상유무를 확인토록 하고, 시공자의 확인측량결과 설계도서와 상이한

부분에 대하여는 실시설계용역업자와 합동으로 확인한 후도면의 표지에

현장대리인과 실시설계 용역업자의 책임자가 연명으로 서명 또는 날인하여

소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

5) 공사감독자는 필요한 경우 관련기관․주민대표․현장대리인 등으로 구성된

합동회의를 개최하여 구조물의 위치․규격 등을 확정․보고 하여야 한다.

6) 착공즉시 토취장․사토장 및 골재원 등을 확인하여 적정여부를 소속기관의

장에게 보고하여야 한다.

(나) 공사시행단계

1) 공사시방서․설계도서․계약서․예정공정표․품질보증계획 또는 품질

시험계획․도급내역서 등에 의하여 자재 등의 품질 및 시공을 확인하고,

적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공지시 등 필요한 조치를

하여야 하며, 시공자가 이에 따르지 아니하거나 공사에 중대한 결함이

발생할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 공사를 중단하게 하고 소속

기관의 장에게 보고 하여야 한다.

2) 공정계획에 따라 공사를 추진하도록 감독하고, 예정공정과 실시공정을

비교하여 부진한 경우 시공자로 하여금 부진사유, 만회공정이 포함된

만회대책을 수립토록 지시하고 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 시공자로부터 검측결과를 제출받고 그 제출된 내용을 확인하여 이상이

없는 경우에 한하여 다음 공정에 착수하게 하여야 한다.

4) 시공후 매몰되거나 사후검사가 곤란한 구조물은 반드시 현장에 입회하여

지도․감독하고 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록을 비치하게

하여야 한다.

5) 시공자로 하여금 공사시행전에 공사시방서에 명기된 시공상세도를 작성․

제출하도록 하고 제출된 시공상세도면을 검토․확인하여야 하며, 시공

상세도면이 작성되지 아니한 경우에는 구조물을 시공하지 못하도록 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67407
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	6/25

6) 시공자로 하여금 현장종사직원 및 기능공의 견실시공 의식을 고취하기

위하여 현장정기교육을 실시하게 하고 그 내용을 별지 제10호서식에

따라 기록․비치하게 하여야 한다.

7) 시공자로 하여금 별지제12호 서식에 따라 작업참여자 명단을 기록하여

실명으로 관리하여야 한다.

(4) 자재관리

(가) 공사현장에 반입된 검수자재 또는 시험합격재료는 공사현장밖으로 반출

하지 못하도록 하고, 불합격된 자재는 시공자로 하여금 지체없이 공사현장

밖으로 반출하게 하여야 한다.

(나) 지급자재에 대하여는 시공자로 하여금 적정하게 보관․사용하게 하고,

그 사용내역을 보고받아 지급자재수불부에 기록 하여야 한다.

(다) 시공자로 하여금 공정계획에 의거 자재수급계획을 수립하여 자재가

적기에 현장 반입되도록 하여야 한다.

(라) 지급자재를 대체사용하고자 하는 경우에는 반드시 소속기관의 장에게

보고하여 승인을 얻도록 하여야 한다.

(마) 주요자재에 대하여는 시공자가 제출한 자재공급원 승인요청내용을 검토․

확인하고 이를 소속기관의 장에게 보고하여 승인을 얻은 후 사용하도록

하여야 한다.

(바) 잉여지급자재가 발생한 경우에는 품명 및 수량 등을 조사하여 소속기관의

장에게 제출하고 그 지시에 따라야 한다.

(5) 안전관리 및 환경관리

(가) 시공자로부터 현장안전관리계획을 사전에 제출받아 계획대로 시행하는지

여부를 확인 하여야 한다.

(나) 공사로 인하여 대기․수질오염․악취․분진․소음 또는 진동등 환경오염이

발생되지 아니하도록 지도․감독 하여야 한다.

(다) 안전관리소홀로 인한 각종 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 시공자가

수립한 안전관리대책의 적정여부를 검토하여야 하며, 정기적인 안전점검

및 우기․해빙기 특별점검을 실시하도록 하고 영 제46조의4의 규정에 의한

안전점검을 실시하도록 지도․감독하여야 한다.

(라) 안전관리교육을 월 1회이상 실시하도록 하고 시공자의 월간 안전관리비

사용실적을 확인하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67407
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	7/25

(6) 설계변경시 조치사항

(가) 공사시행과정에서 구조물의 구조와 공법의 변경없이 현지여건에 따른

위치변경과 연장증감이나 단순구조물의 추가시공등 경미한 설계변경사항이

발생한 경우에는, 감독자가 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히

검토하여 현장실정에 부합되면, 변경으로 인한  전체공사비의 증감이 균형을

이루는 범위내에서 우선 변경시공하도록 지시하고 사후에 소속기관의 장에게

서면보고 하여야 한다. 다만, 구조․기능상 중요한 설계변경이 필요한 경우에는

그 사유와 의견을 첨부하여 소속기관의 장에게 서면보고하고 승인을 얻은 후

시공하도록 조치하여야 한다.

(나) 시공자로부터 설계변경에 필요한 설계도면․수량산출서등 관계자료를

제출받아 설계변경도서를 작성하여 소속기관의 장에게 제출하여야 한다.

(다) 시공자가 제출한 현장실정보고 등에 의한 물량변경은 물론, 추후 변경   될 수 있는 요인을 사전에 도출하여 설계에 반영함으로써 설계변경회   수를 최대한 줄이도록 하여야 한다.

(7) 명령 및 지시사항 처리

(가) 상급자로부터 시공 등에 관하여 받은 지시사항은 그 내용을 기록하고, 조치

계획 및 그 결과를 보고한 후 비치하여야 한다.

(나) 시공에 관하여 시공자에게 지시하는 모든 사항은 서면을 원칙으로 하며, 조치결과를 제출받아 확인하고 그 내용을 비치하여야 한다.

(다) 소속기관의 장이 민원에 관하여 현지조사 및 대책 등을 지시한 경우 기일내에

조사보고 하여야 한다.

(라) 민원발생이 예상되는 사항을 사전에 도출하여 발생요인의 제거 및 최소화에

노력하여야 하며, 민원인과의 대화는 성실하게 응하고 주요 민원사항에

대하여는 민원내용 및 처리결과를 소속기관의장에게 보고하여야 한다.

(8) 공사현장 관리

준공전에 시공자로 하여금 공사용 임시시설의 철거, 자재반출, 임시도로와   토취장 원상복구 등 공사현장을 정리하게 하여야 한다. 다만, 현장 임시      건물에 대하여는 준공검사의 완료후 철거하게 할 수 있다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	8/25

(9) (시공계획서의 검토․확인) 시공자로부터 세부공정계획, 현장기술자 확보사항,           기타 공사계획에 관한 사항 등을 포함한 시공계획서를 제출받아 검토하고           공사진행상 문제가 있다고 판단될 경우에는 소속기관의 장에게 서면보고하여           그 대책을 강구하여야 한다.

(10) (품질관리 지도․감독)

(가) 공사감독자는 사용자재 및 공사시공상황을 검사함에 있어서 공사시방서

기타 계약관계서류에 특별히 정한 것외에는 법 제24조 및 영 제40조 내지

제45조의 규정에 의하여 시공자의 품질관리여부를 지도․감독하고, 시험

및 검사결과를 기록․비치하게 하여야 한다.

(나) 공사감독자는 현장품질시험의 실시를 위한 시험시설과 시험요원의 확보

상황을 수시확인하고 다음 사항을 감독하여야 한다.

1) 건설공사의 품질향상, 효율적 공사수행을 위한 기술개발 및 보급에  전력하여야 한다.

2) 레미콘 및 아스콘의 공급원 신청시는 시공자․레미콘회사 등 관계자가

타설방법, 타설시의 온도, 현장여건을 감안하여 합동으로 배합설계를 실시

하도록 하여야 하며 구조물부위별로 사용한 콘크리트 배합종류를 기록․

비치하게하여(별지 제11호서식), 구조물부위가 동일한 경우 동일한 레미콘회사의

제품을 사용토록 지도․감독하여야 한다.

3) 현장에 불량레미콘 및 아스콘이 반입되지 아니하도록 철저히 확인하고

불량레미콘 등을 운반한 믹서트럭은 당일 재반입을 금지시키도록 하며,

월간 불량레미콘 반입회수․반입량 및 사유 등을 기록하여 소속기관의 장에게

보고하여야 한다.

(11) (공사현장 관리등) 공사감독자는 공사현장에 다음 사태가 발생한 경우에는 필요한 응급조치를 취한 후에 상세한 경위를 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

(가) 천재․지변 또는 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였거나 이로 인하여 장기간 시공이 불가능한 때

(나) 건설기술자가 계속하여 현장에 주재하지 아니한 때

(다) 시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단한 때

(라) 시공자가 불성실하게 공사를 시행하거나 정당한 지시에 응하지 아니한다

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	9/25

(12) (공사관련 서류검토․보고) 공사감독자는 시공자가 제출하는 다음 서류를

검토하고 의견을 첨부하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

(가) 공사착공신고서

(나) 공사기성부분 검사원

(다) 지급자재 대체사용신청서

(라) 준공기한연기신청서

(마) 준공검사원

(바) 현장실정 보고서

(사) 기타 시공과 관련되는 중요서류

(13) (업무보고) 공사감독자는 다음 사항에 대하여 매월 말일 현재의 추진상황을

다음 달 5일까지 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

(가) 공정계획 및 실적

(나) 지급자재 수불상황

(다) 품질시험실적

(14) (하도급 관리) 공사감독자는 시공자가 불법하도급거래 등 다음의 1에 해당

하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

(가) 하도급통지 또는 승인사항에 위반하여 시공하거나 일괄 하도급하는 경우

(나) 하도급업체가 재하도급하는 경우

(다) 하도급 대금지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

(15) (인계인수) 공사감독자교체의 지시를 받은 경우에는 현장에 비치된 서류․기구․자재 및 기타 공사에 관한 사항을 후임자에게 인계하고, 전․후임자의 연서로 인계인수서를 작성하여 소속기관의 장에게 제출하여야 한다.

(16) (건설기술자 관리등) 공사감독자는 공사에 참여하는 건설기술자 등이 다음 각호에 해당하여 당해 현장에 적절치 않다고 인정되는 경우에는 소속기관의 장에게 실정을 보고하여 교체여부에 대한 방침을 받은 후 교체하도록 지시하여야 한다.

(가) 건설기술자, 안전관리자, 품질관리시험 요원이 건설기술진흥법 등의 규정에 의한 건설기술자 배치기준, 품질시험의무 등 관련법규를 위반하였을 때

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	10/25

(나) 건설기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 당해 건설공사의

현장을 이탈한 때

(다) 건설기술자의 고의 또는 과실로 인하여 건설공사를 조잡하게 시공하거나              또는 부실시공을 하였을 때

(라) 건설기술자가 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나

정당한 사유없이 기성공정이 현격히 미달할 때

(마) 건설기술자의 기술능력이 부족하여 공사시행에 차질을 초래하거나

감독자의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

(17) (변상 또는 원상복구 등) 공사감독자는 시공자가 보관하고 있는 지급자재 및 발생품을 분실 또는 손괴한 경우에는 그 상황을 소속기관의 장에게  보고함과 아울러 상당기간을 정하여 시공자로 하여금 변상 또는 원상복구하도록 하고, 기일내에 원상복구를 하지 아니한 때에는 그 손실의 상황 및 변상을 요하는 금액의 조서를 작성하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

(18) (공사의 준공) 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 다음 사항을 조치하여야 한다.

(가) 준공검사전에 충분한 기간을 두고 공사현장을 정밀히 확인․점검하여     지적사항을 미리 시정조치하도록 하고 예비준공검사를 신청하도록 하여  야 한다.

(나) 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 감독조서를 첨부하여 소속기관의 장에게 접수되도록 하여야 한다.

(다) 준공보고서 및 정산설계도서 등을 검토․확인하고 공사목적물이 소속기관의   장에게 차질없이 인계될수 있도록 하여야 한다.

(라) 시공자가 준공표지판을 설치할 때에는 일반이 보기쉬운 곳에 영구적인  시설물로 준공표지를 설치토록 하여야 한다.

(마) 공사감독자는 그 임무가 완료된 때에는 제2조 및 제3조 제9호 내지 제   10호의 서류를 소속기관의 장에게 제출하여야 한다.

(19) (성실의무) 공사감독자는 다음 각호의 규정에 따라 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	11/25

(가) 감독업무를 수행함에 있어서 당해공사의 설계도서․계약서 기타 관계서류              등의 내용을 숙지하고 당해공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다.

(나) 당해공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속기관의 장의 지시사항 타

관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의적절하게 확인․

검측하여 엄격한 품질관리에 임해야 하고, 기타 시공자에게 품질․시공․

안전관리에 필요한 기술지도․감독을 하고 이를 확인하여야 한다.

(다) 임의로 설계를 변경시키거나 기일 연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하지 않아야 한다.

(라) 공사현장에 문제점이 발생되거나 시공과 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 소속기관의 장에게 서면으로 보고하여야 한다.

(19) (근무요령) 공사감독자는 다음의 요령으로 근무하여야 한다.

(가) 공사현장에 상주를 원칙으로 하며 부득이한 사유로 1일이상 현장을   이탈할 때에는 소속기관의 장의 승인을 얻어야 한다.

(나) 당일 감독업무내용과 행선지 등을 기록하는 근무상황판을 사무실에   비치하고 항상 파악할 수 있도록 하여야 한다.

(다) 당일 공사추진상황 및 감독업무수행내용을 공사감독일지에 구체적으로 기록․비치하고, 시공자가 작성한 별지제12호 서식의 공사작업일지를  확인하 후 그 사본을 공사감독일지에 첨부하여야 한다.

(라) 공사감독자로서의 품위를 유지하여야 한다.

(20) (관계기관 협의) 공사감독자는 공사시행에 따른 관련기관과의 협의시   필요한 서류를 작성하여 소속기관의 장에게 제출하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	12/25

나. 업무처리 절차도

□ 업 무 명 : 상수도시설공사 시공감독업무

업무개요	ㅇ 상수도 시설공사 시공감독업무 단계별 업무요령		관련법규	ㅇ 건설기술진흥법 제49조
세부업무방법 및 유의사항			관련부서	업 무 흐 름
ㅇ 공사착수단계 감독업무 ㅇ 공사시행단계 감독업무 ㅇ 자재관리 업무 ㅇ 안전관리 및 환경관리 업무 ㅇ 공사현장관리 ㅇ 품질관리 ㅇ 준공단계업무			본 부 산하기관	공사발주 ↓ 공사착공 ↓ 공사시행 ↓ 준공
업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료

□ 업무 인계․인수현황

일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	13/25

6. 기록관리

No	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	공사감독 명령부	1 년	시설과장	4 년	행정운영과장

7. 첨  부

가. 별  지

(1) 별지1 : 공사감독일지

(2) 별지2 : 발생품(잉여자재정리부)

(3) 별지3 : 지급자재수불부

(4) 별지4 : 공정보고

(5) 별지5 : 주요자재검사부

(6) 별지6 : 품질시험계획

(7) 별지7 : 품질시험.검사대장

(8) 별지8 : 품질시험.검사성과 총괄표

(9) 별지9 : 품질시험.검사실적보고서( 월분)

(10) 별지10 : 현장교육실적부

(11) 별지11 : 구조물 부위별 사용콘크리트 종류 기록서

(12) 별지12 : 공사작업일지

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	14/25

[별지 제1호]

공 사 감 독 일 지
공사명 : . . .		요일	날씨	공사감독자 : 최 고 기온 : 최 저	(서명 또는 인)
주 요 업 무
구 분	업 무 내 용
※ 작성 및 기재요령 1. 상단에 주요업무를 요약하여 기재합니다 2. 근무시간별로 검측ㆍ품질시험 및 행정 등 업무내용을 6하원칙에 따라 상세히 기록하며, 재시공 및 공사중지에 대한 구두지시는 상세히 기록한 후 별도로 서면지시를 하여야 합니다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	15/25

〔별지 제2호〕

발 생 품(잉여자재) 정 리 부 공사명 : 착공일 : . . . 준공일 : . . .
발생연월일	품 명	규 격	단 위	수 량		발생사유	보관사항 (발주기관인계여부)
				사용가능	사용불가

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	16/25

〔별지 제3호〕

지급자재 수불부 공사명 : 착공일 : . . . 품 명 : 준공일 : . . . 규 격 :
월 일	설 계 량	인 수 량	출 고 량	잔 량	확 인	비 고

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	17/25

□별지 4호□

공 정 보 고 제 호 공 사 명 : 받 음 : ○ 월간 공정보고를 아래와 같이 보고함 보 고 자 : (인)
공정 공종	전월까지 누계 (%)			금 월 (%)			누 계 (%)			비 고
	계획	실적	대비	계획	실적	대비	계획	실적	대비

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	18/25

[별지 제5호]

주 요 자 재 검 사 부 착공일 : 년 월 일 품 명 : 규 격 : 준공일 : 년 월 일
월 일	설 계 량	반입수량	합격수량	불합격수량	반 입 자	검 수 자	적 요

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	19/25

[별지 제6호]

품 질 시 험 계 획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 개요

가. 공사명

나. 시공자

다. 현장대리인

2. 시험계획회수

가. 공종

나. 시험종목

다. 시험계획물량

라. 시험빈도

마. 계획시험회수

바. 기타

3. 시험시설

가. 장비명

나. 규격

다. 단위

라. 수량

마. 시험실배치평면도

바. 기타

4. 시험인력배치계획

가. 성명

나. 등급

다. 품질관리업무수행기간

라. 기술자자격 및 학ㆍ경력사항

마. 기타

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	20/25

[별지 제7호]

품질시험․검사대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

① 일련번호	② 연․월․일	③ 시험․검사구분	④ 재료	⑤ 시험․검사항목	⑥ 시험성과	⑦ 시험․검사자	⑧공사감독자 (감리원)의 확인

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	21/25

[별지 제8호]

품질시험․검사성과 총괄표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공사명 :              공사기간 :   .   .   .  -   .   .   .     공정 :    %

공 종	시험․검사종류(재료)	시험․검사 회수					비 고
		계획	실시	합격	불합격	재시험
작성일시 : 년 월 일 작 성 자 소 속 : 직 위 : 성 명 : (서명 또는 인)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	22/25

[별지 제9호]

품질시험․검사실적보고서 (  월분)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공종	시험검사종목	계획시험 검사 회수	전월까지 시험․검사회수				금월 시험․검사회수				누계 시험․검사회수
			실시	합격	불 합격	재 시험 검사	실시	합격	불 합격	재 시험 검사	실시	합격	불 합격	재 시험 검사

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	23/25

[별지 제10호]

현 장 교 육 실 적 부
일 자	교육담당자	소속	참석자	주민등록번호	교육내용	비고
※ 작성요령 1. 현장 사무실에 집결하여 실시하고, 그 실적을 기록ㆍ비치합니다. 2. 원ㆍ하도급자를 포함한 기능공ㆍ인부 등 모든 현장 근무직원을 교육 대상으로 합니다. 3. 교육담당자를 미리 지정하여야 합니다. 4. 교육내용란에는 다음과 같이 주요내용을 기재합니다. - 전일 또는 전주 시공결과에 대한 분석 및 평가 - 금일 또는 금주 공정계획상 부실요인등 분석 및 토의 - 하도급자의 건의사항에 대한 해결책 강구 - 기타 필요한 사항에 대한 토의등 5. 대표적인 교육광경은 사진 촬영하여 뒷쪽에 붙여야 합니다. 6. 일상교육인 경우에는 참석자란에 참석인원수만 기재하고 비고란에 “일상 교육”으로 기재합니다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	24/25

[별지 제11호]

구조물부위별 사용콘크리트종류 기록서
타설일자	구조물명	타설부위	타설방법	타설시간	타설시 기온	콘크리트 종류	실측 슬럼프치	비고
※ 작성요령 1. 타설방법은 믹서트럭에서 직접 받아 타설하는 경우에는 “직접타설”, 펌프카로 타설하는 경우에는 “펌프”로 기재합니다. 2. 콘크리트종류는 “호칭강도 - 슬럼프 - 굵은 골재의 최대치수”의 순으로 기재합니다. (예) 210 - 8 - 25 3. 현장배치플랜트를 설치․사용하는 경우에는 비고란에 “현장B/P"로 기재합니다. 4. 비고란에는 레미콘납품서의 번호를 기재합니다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67513-P
	상수도시설공사 시공감독에 관한 절차서	쪽 수	25/25

[별지 제12호]

공 사 작 업 일 지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ㅇ공사명 :                                                (최고)

ㅇ일  자 : 200.   .   .  요일       ㅇ날  씨 :       기온 : (최저)

ㅇ작성자 : 현장대리인              (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자              (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공 종	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부
특별인부

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음

※ 작업참여자 명단은 제4조제2호 사목의 공사실명제 규정에 의함

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	1/18

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	25	손진곤	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2011. 10.27	3	선우요섭	o 책임과 권한	o 차장 → 부본부장
2	2014. 05.23	2~9	이호식	o 건설기술진흥법 제정․시행	o 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 변경

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	2/18

1. 목   적

본 절차서는 서울시상수도사업본부(이하 “우리본부”라 한다)에서 시행하는 일정규모 이상의 건설기술용역 또는 건설공사에 대하여 설계 및 시공평가를 실시하여 평가결과 우수업체에 대하여는 우대해 줌으로 건설업자의 기술수준 향상과 건설공사의 품질수준을 향상시키는데 목적이 있다.

2. 적용범위

우리본부에서 시행하는 다음 각호에 해당하는 건설기술용역사업 및 건설공사를 대상으로 한다.

가. 건설기술용역사업 : 계약금액 1억5천만원 이상인 기본설계 또는 실시설계         (건축사법 제2조3호에 의한 설계에 관한 용역사항을 포함)

나. 건설공사 : 총공사비 50억원이상인 건설공사. 다만 단순 반복적인 공사로서 건설교통부령이 정하는 건설공사를 제외한다.

3. 용어의 정의

가. 건설공사 : 건설산업 기본법 제2조 제4호의 규정에 의한 건설공사를 말한다.

나.  건설기술용역 : 다른 사람의 위탁을 받아 건설기술에 관한 업무를 수행          하는 것을 말한다.

다. 발 주 청 : 건설공사 또는 건설기술용역을 발주하는 국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 2분의1 이상을 출자한 기업체의 장을 기타 대통령령이 정하는 기업체의장을 말한다.

라. 건설업자 : 건설산업기본법 제2조5호의 규정에 의한 건설업자를 말한다.

4. 책임과 권한

가. 부본부장

(1) 설계 및 시공평가 계획 승인

(2) 설계 및 시공평가 결과 승인

(3) 용역능력 및 시공능력평가 결과 승인

나. 시설안전부장

(1) 설계 및 시공평가 계획 검토

(2) 설계 및 시공평가 결과 검토

(3) 용역능력 및 시공능력평가 결과 검토

다. 시설과장

(1) 설계 및 시공평가 계획 수립

(2) 설계 및 시공평가 결과 보고

(3) 용역능력 및 시공능력평가 결과 보고

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	3/18

5. 절   차

가. 평가계획 수립

시설과장은 설계 및 시공평가 계획을 수립 시행하며, 시행계획은 부본부장의 승인을 받아야 한다.

나. 설계용역평가

(1) 대상 : 용역비 1.5억원 이상의 기본 및 실시설계(건축사법 제2조3호에 의한 설계에 관한 용역사항을 포함)

(2) 시기 : 기본설계 - 실시설계 준공된 연도의 다음연도 2월말까지

실시설계 - 공사 준공된 연도의 다음년도 2월말까지

(3) 방법 :  7인이상 관계공무원 및 전문가(4인이상)로 평가단을 구성하여 별표2의  설계용역평가표에 의거 평가한다.

라. 시공평가

(1) 중간평가 - 1차평가(주관 : 기술심사담당관, 발주기관)

기술심사담당관-19259(2014.12.08.)

(가) 대    상 : 총공사비 50억원 이상인 건설공사

(나) 평가시기 : 추진공정 30～90% 사이

(다) 평가방법

사업구분	100억이상 토목.건축공사 50억이상 설비.조경공사	50～100억원미만 토목.건축공사
평가주관	기술심사담당관	우리본부
평가방법	∙건설기술심의 사후평가로 시행 ∙공사현장별 상대평가	∙자체평가계획 수립 시행 ∙공사현장별 상대평가 ※건설기술심의 사후 평가계획 참조
평가내용	∙설계심의 지적사항 조치결과 평가 ∙전반적인 시공, 품질관리 및 안전관리 실태등 평가	∙전반적인 시공, 품질관리 및 안전관리 실태등 평가

(라) 평가결과 : 시공평가 총점중 최대 50%까지 반영

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	4/18

(2) 시공평가 - 2차평가(주관 : 우리본부)

(시행규칙 제44조제2항에 의한 단순반복공사 제외)

(가) 대    상 : 총공사비 50억원 이상인 건설공사

(나) 평가시기 : 공정 90% ～ 준공전

(단 부득이한 사유가 있는 경우에는 준공후 평가 가능)

(다) 평가방법 : 7인이상 관계공무원 및 전문가(4인이상)로 평가단을 구성하여 별지1의 시공평가표에 따라 품질관리, 공정관리, 하도급관리, 기술개발, 안전 및 환경관리, 현장관리, 기타 공사특성에 따른 발주기관의 평가등 7개분야 합계 100점 만점으로 평가

※ 평가항목중 7. 기타(공사특성에 따른 발주기관의평가는 공사현장별로 상대평가하여 차등배점

※ 최종평가점수 : 중간평가 10% + 시공평가 90%

(라) 결과보고 : 매년 2월말까지 기술심사담당관 참조 보고

마. 용역능력평가

(1) 대상 : 용역평가 대상용역을 준공한 실적이 있는자

(2) 시기 : 3월말

(3) 방법

(가) 최근 3년이내에 하도급거래공정화에관한법률을 위반하여 동법 제25조의

규정에 의한 시정명령을 받은 경우에는 그 시정명령을 받은 매회수마다    평균점수에서 0.5점씩을 감산할것

(나) 건설기술개발투자비를 영 제30조제2항의 규정에 의한 권고 금액이상을   당해연도에 투자한 경우에는 평균점수에 0.5점을 가산할 것

(다) 제13조의4의 규정에 의하여 부실벌점을준경우에는제47조제1항제6호의    기준에 따라 감산할 것

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	5/18

(라) 품질경영촉진법의 규정에 의한 품질보증체제인증 또는 환경친화적

산업구조로의 전환촉진에관한법률의 규정에 의한 환경경영체제       인증을 받은 경우에는 제47조제1항제7호의 기준에 따라 가산할 것.

(마) 용역능력평가대상인 업체가 당해 발주청에서 발주한 용역평가대상 용역을    당해 연도에 1건 이상 준공한 경우에는 그 초과하는 용역건수마다 0.2점씩   평균점수에 가산하고, 계약금액(설계변경 등으로 계약금액의 변경이 있는    경우에는 변경된 계약금액을 말한다)이  10억원 이상인  용역이 있는 경우   에는  용역건수마다 0.2점씩 평균점수에 가산할 것. 이 경우 가산점은 1점을   초과하지 못한다.

(바) 발주청은 용역평가대상 용역의 시행상 특수성을 고려한 기준을 정하여 2점을 초과하지 아니하는 범위안에서 가감할 수 있다.

바. 시공능력평가

(1) 대상 : 평가대상 공사 준공 실적이 있는 업체

(2) 시기 : 3월말까지

(3) 방법 : 시공평가 결과를 평균한 점수에 다음 각 호의 기준에 따른 점수를  가감하여 산정한 결과(이하 "평가평점"이라 한다)로서 평가한다.

(가) 최근 2년간 당해 발주청에서 준공한 시공평가대상공사의 평균 하자 발생비율에

따라 평균점수에서 다음 점수를 감산할 것

하자발생률	경감점수
하자보수보증금의 100분의 5이상 100분의 10이하인 때	0.5
하자보수보증금의 100분의 10을 초과하는 경우 그 초과 100분의 5마다	0.5

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	6/18

(나) 최근 3년이내에 당해 발주청에서 하도급거래공정화에관한법률 제25조 또는 건설산업기본법 제81조의 규정에 의한 시정명령을 받은 경우에는 그 시정명령을 받은 매 회수마다 평균점수에서 0.5점씩을 감산할 것

(다) 건설기술개발투자비를 영 제30조제2항의 규정에 의한 권고금액이상을 당해연도에 투자한 경우에는 평균점수에서 0.5점을 가산할 것

(라) 제13조의5의 규정에 의하여 부실벌점을 준 경우에는 최근 3년간 당해 발주청의 누계부실벌점에 따라 다음 각목의 점수를 평균점수에서 감산할 것

누계부실벌점	감산점수
3점이상 5점미만	0.5
5점이상 10점미만	1
10점이상 20점미만	1.5
20점이상	2

(마) 품질경영촉진법의 규정에 의한 품질보증체제인증 또는 환경친화적

산업구조로의전환촉진에관한법률의 규정에 의한 환경경영체제인증을 받은 경우에는 다음의 점수를 평균점수에 가산할 것

인증단계	가산점수
KSA, ISO 9001 또는 9003	0.5
KSA, ISO 14001	0.5

(바) 시공능력평가대상인 업체가 당해 연도에 당해 발주청에서 준공한 시공평가대상 건설공사건수가 1건이상인 경우에는 초과하는 매 공사건수마다 0.2점씩 평균점수에 가산하고, 계약금액이 500억원이상인 공사가 있는 경우에는 매 공사건수마다 0.2점씩 평균점수에 가산할 것. 이 경우 가산점은 1.0점을 초과하지 못한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	7/18

나. 업무처리 절차도

□ 업 무 명 : 설계 및 시공평가 업무

업무개요	ㅇ 설계 및 시공평가 ㅇ 용역능력 및 시공능력평가		관련법규	ㅇ 건설기술진흥법 제50조제2항 - 동법시행령제82조제2항 - 동법시행규칙 제44조7항
세부업무방법 및 유의사항			관련부서	업 무 흐 름
(1) 설계 및 시공평가 (가) 설계 및 시공평가 계획수립 (나) 평가요원의 구성 (다) 설계 및 시공평가 실시 (라) 평가 결과 보고 (2) 용역능력 및 시공능력 평가 (가) 자료제출 요청 (나) 평가실시 (다) 평가 결과 보고			본 부 산하기관	계획수립 ↓ 설계 및 시공평가 ↓ 자료제출 ↓ 용역 및 시공능력평가 ↓ 결과보고
업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료

□ 업무 인계․인수현황

일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	8/18

6. 기록관리

No	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	설계시공평가 대장	1 년	시설과장	4 년	행정운영과장

7. 첨  부

가. 별  지

(1) 별표 1 : 시공평가표

(2) 별표 2 : 설계용역평가표

(3) 별표 3 : 시공평가 기준 및 방법

(4) 별표 4 : 환산재해율 산정방법

(5) 별표 5 : 시공평가 총괄표

(6) 별표 6 : 표본추출 항목 선정표

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	9/18

[별표 1]

시 공 평 가 표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공 사 명		시공회사	대표 : 면허번호 :					등록번호
공사개요		소 재 지						도 급 액
		현 공 정	%					공사기간
평가분야 (배점)	평가항목			배점	평가등급						점수
					우수 (×1.0)	보통 (×0.8)	미흡 (×0.6)		불량 (×0.4)
					가(충족, 이행) (×1.0)		부(미충족, 미이행) (×0.5)
1.품질관리 (22)	1.1 품질계획 및 품질시험계획 적기수립			5	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연		14일 초과 지연
	1.2 품질관리원 경력 및 배치사항			2	적정		부정적
	1.3 품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성			10	100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행		80%미만 이행
	1.4 외부점검기관(발주청 포함)의 개선 지적건수			5	1건 이하	2～3건	4～5건		5건 초과
2.공정관리 (6)	2.1 공정관리계획 적기수립			2	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연		14일 초과 지연
	2.2 계약공기 준수여부			4	공기준수	3%이하 지연	3～5% 지연		5%이상 지연
3.시공관리 (45)	3.1 현장인원 배치의 적정 여부			1	적정		부적정
	3.2 시공계획서 적기수립 및 적정성			2	적기수립	7일 이내	14일 이내		14일 초과
	3.3 시공계획서 이행여부			8	100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행		80%미만 이행
	3.4 민원발생 건수			1	1건 이하	3건 이하	5건 이하		5건 초과
	3.5 설계도서 사전 검토 미흡으로 인한 공사비 증액 비율			2	5/1000 이하	10/1000 이하	20/1000 이하		20/1000 초과
	3.6 설계도서 사전 검토를 통한 공사비 절감 비율			3	5/1000 이상	5/1000 미만	2/1000 미만		2/1000 이하
	3.7 설계도서 사전검토를 통한 사용성 및 유지보수성 향상여부			3	10건이상	5건이상	3건이상		2건미만
	3.8 시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부			7	100% 작성	95% 이상 작성	90% 이상 작성		90% 미만 작성
	3.9 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 만족비율			8	100% 만족	95% 이상 만족	90% 이상 만족		90% 미만 만족
	3.10 재시공 여부			5	0건	1건	2건		2건 초과
	3.11 하도급계약서			1	표준계약서 사용		표준계약서 미사용
	3.12 하도급계약의 적정도			2	0건	1건	2건		2건 초과
	3.13 하도급 관리의 적정도			2	0건	2건	3건		3건 초과

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	10/18

공 사 명		시공회사	대표 : 면허번호 :					등록번호
공사개요		소 재 지						도 급 액
		현 공 정	%					공사기간
평가분야 (배점)	평가항목			배점	평가등급						점수
					우수 (×1.0)	보통 (×0.8)	미흡 (×0.6)		불량 (×0.4)
					가(충족, 이행) (×1.0)		부(미충족, 미이행) (×0.5)
4.안전관리 (18)	4.1 안전관리계획 적기수립			2	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연		14일 초과 지연
	4.2 안전관리조직의 적정 구성 여부			1	적정		부적정
	4.3 안전관리계획 이행의 적정성			5	100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행		80%미만 이행
	4.4 당해 현장의 환산재해율(%)			10	0.5배 이하	0.8배 이하	1.0배 이하		1.0배 초과
5.환경관리 (7)	5.1 환경관리계획 이행의 적정성			1	100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행		80%미만 이행
	5.2 현장발생폐기물 처리의 적정성			1	100% 처리	90%이상 처리	80%이상 처리		80%미만 처리
	5.3 환경영향평가 협의내용 이행여부			3	협의내용 100%이행	협의내용 90%이행	협의내용 80%이행		협의내용 80%미만
	5.4 환경관리의 적정성			2	3건 이하	5건 이하	7건 이하		7건 초과
6. 공사 완성도 (2)	8.1 공사 완성도			2.0	2.0점	1.5점	1.0점		0점
가점	- 시공자 제안으로 인한 공사비 절감비율			(3.0)	5/1000 초과 (3.0점)	5/1000 이하 (2.0점)	2/1000 이하 (1.0점)		0.5/1000 이하 (0점)
감점	- 시공자 과실로 발주청에 끼친 재산상 손해			(-3.0)	5/1000 초과 (-3.0점)	5/1000 이하 (2.0점)	2/1000 이하 (-1.0점)		없음 (0점)
합 계
20 년 월 일 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	11/18

[별표 2]

설계용역평가표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

용역발주청 :                                   확인자 : 발주청            (인)                                                  관계자 : 용역평가자        (인)

용역명			용역회사(대표자)
용역개요	착공	(용역기간)	과업 내용
	준공		용역 금액
평가항목			평가연월일
계	배점	세부평가항목		평점	비고
1. 사전조사	25～35	․사전자료조사 적정여부 ․토질, 기초조사, 시험 적정여부 ․현장측량 적정여부 ․자재기준 제시여부 ․설계로인한 민원발생 정도
2. 구조계산	10～20	․구조계산 적정여부 ․구조계산결과 적용여부 ․구조물 설계위치 적정여부
3. 내역산출	10～20	․수량산출 적정여부 ․공사비산출(견적)내용 적정여부
4. 도서작성	25～35	․설계서 작성 적정여부 ․공사시방서 작성 적정여부 ․설계도면 작성 적정여부 ․기술자 서명날인 적정여부 ․설계자문 결과 적용여부
5. 기타	10～15	․각종 시정지시 이행여부 ․친환경 건설설계 반영여부 ․건설폐자재 활용 설계반영 여부 ․신기술 적용여부

※ 1. 설계완료후 평가표는 위 평가표를 참고하여 발주청에서 작성하여 활용할수 있다.(50%적용)

2. 발주청은 용역의 특성상 위 평가항목의조정이 필요한 경우에는 이를 조정하여 평가할수 있다.

3. 기술제안서의 제안내용과 설계결과의 내용이 상이할때는 감점할수 있으며, 이 경우 총 5점의 범위안에서 각 항목을 설정하여 평가한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	12/18

별표 3. 시공평가 기준 및 방법

시공평가 세부기준 및 방법

평가분야	평가항목	세부기준 및 방법
1. 품질관리	1.1 품질계획 및 품질시험계획 적기수립	- 발주청의 요구 또는 건설기술진흥법 시행령 제90조제1항에 의한 적기 제출 및 승인 여부 ※ 건설기술진흥법 시행령 제90조제1항 : 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사 준비는 착공으로 보지 아니한다) 전에 발주청에게 제출 및 승인을 받아야 한다. ※ 건설사업관리기술자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가
	1.2 품질관리원 경력 및 배치사항	- 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준 부합 여부 ※ 발주청이 승인한 경우 조정된 투입시기 및 인원을 기준으로 함
	1.3 품질관리계획 및 품질시험계획 의 이행 적정성	- 공사 기간 전체에 대하여 품질관리계획 및 품질시험계획의 이행여부를 ①~⑤을 참고하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 ① 품질관리계획에 대한 점검사항(시행규칙 제50조,제52조 관련) ② 당해 건설공사 설계․시방서에서 특별히 요구하고 있는 품질시험종목 ③ 건설기술관리법에서 규정한 품질시험 항목 ④ 국토부 품질관리 기준 및 제정시방서에서 정한 품질시험 종목 ⑤ 당해 건설공사 시공상에서 필요하다고 인정하는 품질시험 종목 ※ 설계 변경 등에 의한 계획 조정 시 최종본 기준 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수
	1.4 외부점검기관(발주청 포함)의 개선 지적건수	- 현지시정 이상의 지적건수(동일건 재발송은 제외) ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)
2. 공정관리	2.1 공정관리계획 적기수립	- 계약에 따라 적기 승인 여부 ※ 적기 미승인시 평가자가 사유 확인 후 평가
	2.2 공정관리의 적정성	- 계약공기를 기준으로 하며, 변경된 경우 변경된 공기를 기준으로 함

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	13/18

평가분야	평가항목	세부기준 및 방법
3. 시공관리	3.1 현장인원배치의 적정여부	- 현장대리인 기준 만족 여부 ※ 발주청의 요구사항이 있는 경우 해당 사항 만족여부 함께 고려
	3.2 시공계획 적기수립 및 적정성	- 계약문서와 관련규정에 따른 시공계획서의 적기 승인여부 및 시방서와 관련규정과의 적정성 여부 ※ 건설사업관리기술자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가
	3.3 시공계획서 이행여부	- 수립된 시공계획서(총괄계획서 및 공종별계획서) 이행여부 - 운영지침에 의거하여 제출된 시공계획서중 일부항목을 표본추출하여 계획대비 이행건수 비율을 평가 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수
	3.4 민원발생건수	- 시공자 귀책에 의한 민원건수로 평가 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림) ※ 민원대장 등 확인
	3.5 설계도서 사전 검토 미흡으로 인한 공사비 증액 비율	- 시공자의 사전 설계도서 검토 미흡으로 인해 설계변경이 발생하고 공사비가 증액된 비율(사전 설계검토시 지적되어 변경된 내역은 제외) ※ 증액 비율 = 공사 기간 중 증액된 총액 / 최종 설계변경된 공사금액
	3.6 설계도서 사전 검토를 통한 공사비 절감 비율	- 설계도서 검토를 충실히 하여 절감된 공사비 비율 ※ 절감 비율 = 절감 총액 / 초기 계약 공사금액
	3.7 설계도서 사전검토를 통한 사용성 및 유지보수성 향상여부	- 공사비 증감이 수반되지는 않으나 설계개선 및 신기술 신공법 적용 등으로 구조물의 내구성 및 사용성과 유지보수성을 향상시킨 건수로 평가
	3.8 시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부	- 공사기간 전체를 대상으로 표본추출을 통하여 시방서, 발주청 작성 기준 등 관련 기준에 따라 작성 이행된 건수 비율로 평가 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 이행건수 비율 = 작성 이행 건수 / 표본추출 건수
	3.9 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 만족비율	- 주요 공종 시설물을 대상으로 표본추출을 통하여 도면, 시방서 등 관련 기준에 따라 적절히 시공된 건수 비율 측정 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 시공건수 비율 = 적정 시공 건수 / 표본추출 건수
	3.10 재시공여부	- 재시공된 건수를 평가 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)
	3.11 표준계약서 사용 여부	- 하도급시, 표준계약서 사용여부
	3.12 하도급계약의 적정도	- 하도급계약의 부적정에 의한 발주청의 재발주 요청 건수 및 타절 발생 건수 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)
	3.13 하도급 관리의 적정도	- 하도급거래공정화에 관한 법률 위반(공사비 지불, 재하도급 등)건수 ※ 공사비 지불기간 : 건설산업기본법34조 및 하도급거래공정화에 관한 법률 13조 참조

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	14/18

평가분야	평가항목	세부기준 및 방법
4. 안전관리	4.1 안전관리계획 적기수립	- 발주청의 요구 또는 건설기술진흥법 시행령 제98조제2항에 의한 안전관리계획서(대상시설물별 세부안전관리계획서 포함)의 적기 제출 여부 ※ 건설기술진흥법 시행령 98조제2항(안전관리계획서 제출) : 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 확인을 받아 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다) 전에 발주청에게 제출하여야 한다. ※ 대상시설물별 세부안전관리계획의 제출 : 발주청 요구 기간 내 또는 공사 수행 전 제출 ※ 건설사업관리기술자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ※ 기간은 평균 지연 기간임(총 지연기간/제출 필요 건수)
	4.2 안전관리조직의 적정 구성 여부	- 발주청의 요구사항 또는 다음의 건설기술진흥법 제64조제1항의 요구조건 만족 여부(①~③ 모두 만족) ① 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자 ② 토목ㆍ건축ㆍ전기ㆍ기계ㆍ설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자 ③ 건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자 ※ 발주청이 승인한 경우 조정된 사항을 조직 구성의 기준으로 함
	4.3 안전관리계획 이행의 적정성	- 안전관리계획(공종별 포함)의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 ※ 안전관리계획 조정 시 최종본 기준 ※ 정기 및 정밀안전점검 계획 및 실시 현황 점검 ※ 안전관리계획서 상에 ‘정기 및 정밀 안전점검’에 대한 사항이 누락된 경우, 별도의 관련 계획 확인하여 평가에 반영 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수
	4.4 현장 단위의 환산재해율 (안전사고 발생 건수)	- 현장 단위의 환산재해율을 계산하여 평균환산재해율 대비 비율로 평가(소수 3자리 반올림) ※ 산업안전보건법의 환산재해율(별표3) 기준 준용 ※ 평가 시점에서 가장 최근의 한국산업안전보건공단 평균환산재해율을 기준(’12년 0.43%)으로 평가 ※ 공사기간 전체를 산출 대상으로 함

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	15/18

평가분야	평가항목	세부기준 및 방법
5. 환경관리	5.1 환경관리계획 이행의 적정성	- 수립된 환경관리계획의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 ※ 제출된 시공계획서중 일부 항목을 표본추출하여 계획대비 이행여부를 평가 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수
	5.2 현장발생폐기물 처리의 적정성	- 현장에서 발생된 폐기물의 처리절차 및 완결여부(공사기간 중 현장에서 발생한 전체 폐기물량의 위탁처리 및 재활용 처리여부) ※ 건설폐기물배출 및 처리실적 보고서, 건설폐기물 재활용실적보고서 또는 건설폐기물정보처리 시스템을 통해 폐기물 처리의 적정성을 평가 ※ 처리 비율 = 처리 건수 / 전체 처리 대상 건수
	5.3 환경영향평가 협의내용 이행여부	- 환경영향평가법 제23조(협의내용의 이행 등) 기준 - 환경영향평가를 통한 변경된 사업내용의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수
	5.4 환경관리의 적정성	- 환경점검 지적 건수 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)
6. 공사 완성도	8.1 공사 완성도	- 평가자의 판단에 따른 공사 전반에 걸친 완성도 - 주관적 평가 및 사유 명기
가점	시공자 제안으로 인한 공사비 절감비율	- 시공사 제안에 의한 개선 사항 중 발주청이 채택하여 공사비 절감된 비율(신기술/신공법 적용 포함) ※ 절감 비율 = 공사 기간 중 절감 총액 / 최종 설계변경된 공사금액
감점	시공자 과실로 발주청에 끼친 재산상 손해	- 공사중 시공자 과실로 발주청에 끼친 재산상 손해 금액 비율(원상회복 할 수 없는 손해 비용) ※ 손해액 비율 = 공사 기간 중 손해액 총액 / 최종 설계변경된 공사금액

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	16/18

별표4. 환산재해율 산정방법

1) 산정방법

- 환산재해율 =

환산 재해자 수

상시 근로자 수

×100

연간 국내공사 실정액×노무비율

건설업 월 평균임금×12

- 상시근로자수 =

2) 재해자수 산정기간

- 환산재해자수는 시공평가 현장의 전체 공사기간에 산업재해를 입은 근로자 수의 합계로 산출

3) 산정원칙

◦ 당해 업체의 소속 재해자 수에 하도급업체 소속재해자수를 합산하여 산정

◦ 공동이행방식, 분담이행방식 모두 개별적으로 소속 재해자수를 합계

◦ 장비임대 및 설치, 해체, 물품납품 등에 관한 계약을 체결한 사업주의 소속근로자가 당해 건설공사와 관련된 업무수행중에 재해를 입은 경우 시공회사 재해자수에 합산함.

4) 사망재해 재해자수 산정

- 가중치 부여

◦ 가중치는 일반재해자의 5배

◦ 평가 시점의 사망자만 고려

- 가중치 미부여

◦ 고혈압 등 개인지병에 의한 경우

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	17/18

별표 5. 시공평가 총괄표

시공평가 총괄표
공사발주관서명:						공사비 단위: 백만원
순위	공사명	공사개요		공사 구분	공사비		공사기간	시공회사	대표자	평점	비고
			210mm×297mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67514-P
	설계시공평가절차서	쪽 수	18/18

별표6. 표본추출 항목 선정표

공사별 표본추출 항목 선정 및 점수표

공 사 명			시공회사	대표 : 면허번호 :	등록번호
공사개요			소 재 지		도 급 액
			현 공 정	%	공사기간
평가분야		평가항목	표본추출 항목			가부		백분율
			추가 사용
			추가 사용
20 년 월 일 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인) 평가위원 성 명 : (인)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	1/12

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	7	조면행	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 1. 8	7	오기석	○ 직제 개편에 따라 담당 부서 변경	○급수부 → 수도특별기동반
2	2001. 11.20	5～8	오기석	○ 시설물 유지관리 추진 방법 보완	○ (가) “수도1과………구성 운영하여야 한다” 삽입
				○ 명칭 변경	○ 변류 → 밸브류로 변경
				○ (2) 유지관리세부사항 보완	○ “(가) 일상점검 1) 일상 점검은……(라) 특별점검… ……3)점검사항조치……체결 하여 정비”를 삭제하고 “(가) 일상점검 “1) 일상점검은…… (다)특별점검……4)점검 사항조치……단수시 시행”를 득한다” 삽입 ○ (마)의 3)항 점검사항 “구역관리팀……통 보한다” 삭제하고 가)“도로면과…… 라)……개․폐 여부확인”과 4) 항 삽입 ○ (바)의 1)항 “유관기관으로…… 일일작업지시를 하고”를 삭제 하고 “타기관으로……일일 작업시행 사항”과 가)항을 삽입
3	2003. 1.15		오기석	○ 직제 개편에 따라 담당 부서 변경	○ 수도특별기동반 → 수도관리부

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	2/12

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
4	2004. 3. 10.	12	오기석	○ 관로표지못 설치 개선 방침에 따라 관로 표지별 설치기준 개정	○ 다. 관로표지설치업무 (11/12～12/12쪽)에서 (가),(나),(다),(라)항의 관로표지의 설치기준을 개정 ○ 개정전 - 표지못 : 보도가 없는 포장 도로의 상수도 관로 - 표지석 : 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천둔치의 비 포장 구간 - 표지판 : 보도가 있는 도로의 상수도관로에 설치 ○ 개정후 - 관로표지못 : 도로에 매설된 상수도 관로 직상단에 설치 - 표지석 : 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치 등 비 포장 구간의 관 로 직상단에 설치 - 밸브실 표지판 : 차량 및 보행 인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치의 비 포장 구간의 각종 상수도관의 밸브실 주변에 설치

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	3/12

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
5	2007.10.15	13	김영일	○ 직제개편에 따른 부서 명칭 변경	○ 수도관리부 → 시설관리부
6	2011.9.9	13	이효진	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김영일 → 이효진
7	2014. 3.14	13	이효진	○ 직제개편에 따른 부서 명칭 변경	○ 시설관리부 → 시설안전부
8	2015. 12.4.	6 ~ 10	김동구	○ 직제개편에 따른 부서 명칭 등 변경	○ “급수공사팀”, “시설공사팀”“지리정보팀”삭제 ○ “지역담당팀 점검” 삭제하고 “수시점검” 삽입
9	2015. 12.4.	10	김동구	○ 업무분장에 따른 입회업무 삭제	○ “공사현장 순찰 및 입회”→ “입회”내용 삭제

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	4/12

1. 목    적

상수도 시설물의 체계적인 유지관리와 긴급사항 발생시 신속하게 대처할 수 있도록

평소 시설물에 대한 점검 및  정비를 지속적으로 실시하고, 불량맨홀로 인한 안전

사고가 발생되지 않도록 하여 신뢰받는 상수도 행정을 구현하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

가. 도, 송, 배수관로

나. 각종 밸브류(제수밸브, 공기밸브, 퇴수밸브, 신축관, 감압밸브 등)

다. 현수관로 및  공동구내 상수도시설물

라. 전식방지 시설물(희생양극 측정함)

마. 기타 상수도시설물

3. 용어의 정의

가. 배수지

정수처리된 물을 커다란 물탱크에 저장하였다가 시간적으로 변하는 급수량

을 조절하기 위하여 설치되는 시설을 말한다.

나. 가압장

고지대 등 수돗물이 잘 나오지 않는 지역에 펌프를 설치하여 수압을 높여

수돗물이 잘 나오게 하는 시설을 말한다.

다. 도복장강관

최대사용 정수두 100m 이내의 수도에 사용하는 관으로 도장방법에 따라

아스팔트 도복장강관, 콜탈에나멜 도복장강관 등이 있다.

라. 주철관

철과 탄소의 합금에서 탄소량이 2% 이하인 것을 강이라 하고 2%이상인 것을

주철이라 한다. 수도관에 있어서 주철용 선철, 고철 등을 녹여 섞어 제조된

주철의 주요성분은 탄소, 규소, 망간, 인, 황 등으로 되어 있고, 덕타일 주철관

에는 마그네슘 또는 칼슘 등의 흑연구상화 원소가 미량으로 함유되어 있다.

마. 도수관

원수를 취수지점의 취수시설로부터 정수장까지 관수로 방식에 의하여 보내는

수도관을 말한다

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	5/12

바. 송수관

정수장에서 배수구역 또는 배수지까지 정수 처리된 물을 보내는 수도관을 말한다.

사. 밸브류

밸브의 종류를 말하는 것으로 종류에는 제수밸브, 배기밸브, 퇴수밸브, 소화전밸브  감압밸브 등이 있다.

아. 제수밸브

관의 파열, 누수 등 관로의 일부를 필요에 따라서 개,폐를 위해 설치하는 밸브를

말한다.

자. 공기밸브

관내의 공기배제와 관내에의 공기흡인을 목적으로 관로의 철부(凸)에 설치

하는 밸브를 말한다.

차. 퇴수밸브

누수보수 등 단수를 위한 퇴수와 수질보전 등 관내부의 이물질을 제거하기 위한

기능을 하는 것으로 식수로서 적합한 양질의 수돗물을 공급토록 함에 목적이 있다.

타. 현수관로

한강 등 교량에 첨가되어 있는 상수도관을 말한다.

파. 공동구

지하매설물(전기, 가스, 수도, 통신시설 등)을 공동으로 수용함으로서 도시

계획법의 규정에 의하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다.

하. 철개

밸브류 등을 보호하기 위하여 주로 도로 등에 설치하는 철 종류를 말한다.

버. RT(Radiographic Testing)검사

강이형관의 용접부 품질확보를 위하여 시행하는 방사선 투과시험을 말한다.

서. 전기방식

상수도 관로를 전기부식으로부터 보호하기 위하여 전기방식의 보호기기를 설치

및 운영함으로써 상수도관 부식을 예방하고 관로의 누수 등을 방지하는 시설물

을 말한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	6/12

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 상수도시설물 점검 및 정비계획에 대한 제정․개정․폐기의 승인

나. 부본부장

(1) 상수도시설물 점검 및 정비계획에 대한 제정․개정․폐기의 검토

다. 시설안전부장

(1) 상수도시설물 유지관리 계획 수립

(2) 시설물 정비대상 선정, 관리 및 안전사고 예방 지도감독

라. 시설관리과장

(1) 상수도시설물점검 및 정비결과 확인

(2) 상수도시설물 유지관리에 대한 문제점 파악과 조치

(3) 상수도시설물 현황 파악 관리

5. 업무처리 및 실시절차

가. 시설물유지관리

(1) 시설물 유지관리 추진방법(일반사항)

(가) 급수운영과, 시설관리과에는 상수도시설물의 상시 순찰 및 점검(배수지, 가압장, 관로, 밸브실 및 밸브류, 현수상수도관, 공동구)만을 실시할 수 있도록 별도의 순찰반을 구성 운영하여야 한다.

(나) 시설물 점검은 일상점검, 정기점검, 특별점검, 수시점검으로 구분하여 시행한다.

(다) 일상점검은 육안으로 시설물의 이상유무를 점검하고, 정기점검은 정밀하게 실시하고, 특별점검은 년간단가업체를 활용하고, 업무 수행중 밸브류 사용시 점검을 실시한다.

(라) 일상점검과 정기점검은 오전은 일상점검 오후는 정기점검을 하는 방법

으로 시행하거나 요일별로 일정계획을 수립하는 등 점검계획을 수립

하여 점검한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	7/12

(마) 사업소 과별로 시설물 점검계획을 년초에 수립하고 지난해 점검 중

미비된 지역 및 사고 위험이 있는 우선 점검토록 계획한다.

(2) 유지관리 세부사항

(가) 일상점검

1) 일상점검은 급수운영과 및 시설관리과에 별도로 구성된 순찰반이 점검한다.

2) 일상점검은 1일 1개 노선을 순찰할 수 있는 범위내에서 순찰노선을

정하여 순찰노선도를 작성한다.

3) 사업소 과별 전지역을 월1회 이상 순찰할 수 있도록 계획을 수립한다.

4) 순찰 노선도에 관로 및 밸브류, 희생양극 측정함 등을 표시하여 순찰

시 휴대하고 점검한다.

5) 일상점검 대상

가) 밸브류 및 희생양극 측정함, 관로표지못(석)의 이상유무

나) 관로의 누수발생 여부

다) 현수상수도관 및 노출관로

라) 공동구내 상수도시설물 등

6) 일상점검시 점검사항

가) 도로면과 철개뚜껑(밸브류, 희생양극 측정함 등)높이 불일치 여부확인

나) 뚜껑과 받침의 파손 및 이격으로 소음발생 여부 확인

다) 철개에 삽입된 고무패킹 이탈 여부 확인

라) 누수발생여부

마) 현수상수도관, 노출관로, 공동구내 상수도시설물의 이상유무 등

바) 기타 상수도 시설물의 안전 및 관리에 관한 사항

7) 점검사항 조치

가) 현장에서 조치 가능한 경미한 사항은 즉시 시정조치하고 보수가

요구되는 부분은 즉시 보수토록 조치

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	8/12

나) 누수 등 긴급사항 발생시 유선으로 통보하여 복구업체 출동보수

다) 일상점검 결과는 순찰일지를 작성하여 매일 결재를 득한다.

(나) 정기점검

1) 사업소별 점검계획을 시설관리과(시설물담당)에서 수립 시행하되 점검대상블록은 순찰반과 지역담당이 합동으로 점검한다.

2) 각종 밸브류는 시설물 담당이 년1회 이상 정기적으로 점검하고

작동시험을 실시하여 고장여부를 확인한다.

3) 정기 점검시에는 점검장비를 갖추고 실제로 맨홀뚜껑을 열고 정밀하게

점검한다.

4) 정기점검 대상

가) 시설물 순찰시 의심이 가는 밸브류는 중점점검

나) 설치년도가 오래 경과된 노후시설물 중점점검

다) 대형 밸브류(600mm이상) 우선점검

라) 누수확인이 곤란한 퇴수밸브, 배기밸브 등을 중점점검

마) 하천 및 지천 둔치내의 시설물점검

5) 정기점검시 점검사항

가) 밸브실

① 토사적치 및 침수 확인

② 밸브실 벽체 파손 확인

③ 제수밸브 심도가 필요이상 깊은 곳 확인(고정밸브대 설치 등 검토)

나) 밸브류

① 이음부 이격발생 확인

② 누수확인 및 볼트죠임상태 확인

③ 녹발생 여부 및 노후상태 확인

④ 작동상태

⑤ 각 구동장치 고정상태 확인

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	9/12

⑥ 작동시 개, 폐 여부 확인

⑦ B/V 개도계 정상 작동여부 확인

6) 점검사항 조치 : 토사적치, 밸브실파손 등 고장시설물은  현장보고서

에 의거 보고 후 년간단가계약업체에 지시하여 보수

토록 조치

(다) 특별점검

1) 시설물의 특별점검은 시설물 관리부서(급수운영과 및 시설관리리과)에서 별도의 세부추진계획을 수립하여 점검을 실시하고 연간단가 계약업체를 활용하여 점검하고, 전문기술을 요하는 분야의 점검은 전문 보수업체와 같이 합동으로 실시한다

2) 정기점검 대상

가) 대형 밸브류(600mm 이상)

나) 침수로 인하여 부식이 예상되는 제수밸브

다) 활용도가 많고 긴급을 요하는 제수밸브

3) 특별 점검시 점검사항

가) 대형 밸브류(600mm이상)의 기아박스덮개를 열어 아래 내용을 우선점검

나) 기아 및 구동축에 첨가된 윤활유 변질여부 확인

다) 기아몸체 파손, 균열 및 부식여부

라) 기아배열의 이상유무 및 샤프트의 고정상태

마) 밸브실 침수로 기어박스 부속 등의 부식이 예상되는 제수밸브

4) 점검사항 조치

가) 윤활유 주입 등 일반적인사항 : 년간단가계약업체 활용정비

나) 전문기술을 요하는 사항 : 제수밸브 제작회사 견적에 의거 제작회사

와 계약을 체결하여 정비

다) 교체대상 제수밸브 : 정수장 단수시 교체

라) 점검시 교체대상 제수밸브를 철저히 파악한 후 고장밸브류 목록을 작성

하고 교체계획을 수립하여 정비

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	10/12

마) 단수세대가 많은 대형제수밸브(D=600mm이상)교체는 본부 승인을

득한후 정수장 단수시 시행

(라) 기타 수시 점검

1) 업무 수행중 실제로 맨홀뚜껑을 열고 제수밸브 조절작업시 밸브실 내, 외부의 상태를 점검한다.

2) 기타 수시 점검대상

가) 연락공사 및 수계조절 등으로 사용한 모든 밸브류

나) 기타 밸브류 확인이나 위치를 파악하기 위해 뚜껑을 열고 확인한 밸브

3) 점검사항

가) 도로면과 철개뚜껑 높이 불일치 확인

나) 뚜껑과 받침의 파손 및 이격으로 소음발생 확인

다) 토사적치 및 침수 확인

라) 밸브실 벽체 파손 확인

마) 누수확인 및 노후상태 확인

바) 작동시 개, 폐 여부 확인

4) 점검사항 조치 : 업무 수행중에 사용한 모든 밸브류에 대하여 점검결과   이상유무를 별첨 통보서 양식에 의거 시설물관리 담당에 통보한다.

(마) 공사현장 순찰

1) 공사현장 순찰은 타 기관으로부터 현황을 제출받아 시행하며 순찰 사항은 복명서를 작성 관리한다.

가) 모든 타 기관 공사현장의 순찰은 각과의 순찰반 입회 관리할 수 있도록 한다.

2) 타 기관 공사현장 순찰을 철저히 하고, 필요시 상수도시설의 보호를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	11/12

나. 관로표지설치업무

(1) 업무처리 절차

(가) 표지별 설치기준

1) 관로표지는 표지석, 표지판, 표지못 구분 설치

2) 관로표지못 : 도로에 매설된 상수도 관로 직상단에 설치

3) 표지석     : 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치 등

비 포장 구간의 관로 직상단에 설치

4) 밸브실 표지판 :차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치의 비 포장구간의 각종 상수도관의 밸브실 주변에 설치

(나) 관로표지못 설치

1) 도로에 매설된 상수도 관로 직상단에 설치

2) 설치 위치 및 요령

가) 분기지점 밸브실에서 5~10m 떨어진 위치의 관로 직상단에 설치

나) 송•배수관부설공사(신규 및 기존), 누수복구공사, 급수공사, 및

기타 공사를 위하여 도로굴착 시 노출된 배관 연장선 직상단에 설치

(다) 표지석 설치

1) 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치 등의 비 포장구간에 설치

2) 설치 간격 및 요령

가) 설치간격 : 직선거리 200m 및 변곡점

나) 설치요령 : 관로 직상단에 설치하되 기초 콘크리트를 타설하여 고정

(라) 밸브실 표지판 설치

1) 차량 및 보행인에 지장이 없는 하천 둔치 등에 비포장 구간의 각종

상수도 밸브실에 설치

2) 설치위치 및 요령

가) 설치위치 : 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치 등

비 포장 구간에 각종 상수도 밸브실에 설치

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67515-P
	상수도시설물유지관리절차서	쪽 수	12/12

나) 실치요령 : 상수도 밸브실 주변에 차량 및 보행인의 통행에 지장이

없고 잘 보일 수 있는 곳에 설치하고 기초 콘크리트를 타설

하여 고정

업무개선 idea
실패사례
참고자료
□ 업무인계․인수 현황
일 자		인 계 자	일 자	인 계 자
		인 수 자
				인 수 자
2001. 1. 8		조 면 행	2005. 1.15.	오 기 석
		오 기 석		김 태 형
2007.1.15		김 태 형	2011.9.9	김 영 일
		김 영 일		이 효 진
2015.6.30.		이 효 진
		홍 석 현

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	시설물관계철	1년	시설관리과장	3년	행정운영과장
2	시설물통계철	1년	시설관리과장	3년	행정운영과장
3	하천․지천둔치시설관계철	1년	시설관리과장	3년	행정운영과장
4	구역유량계 설치관계철	1년	시설관리과장	3년	행정운영과장
5	현수관로 관계철	1년	시설관리과장	5년	행정운영과장

7. 관련 표준

가. 상수도시설물 점검업무 지침서

나. 상수도관로 표지 설치지침서

8. 첨     부

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	1/16

제․개정 이력 요약

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	재.개정 사유	개정 전.후 비교
제정	2000. 10.28	15	조창호	◦환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 01.08	15	조창호	◦직제개편에 따라 담당부서 변경	◦급수부 ⇒ 수도특별기동반
2	2001. 11.20	7	조창호	◦명칭변경	◦공무과 ⇒ 수도1과 ◦잔존관 ⇒ 불용관
		10		◦추진계획 삭제	◦8.첨부 나항(1) ～ (11)삭제
		25		◦특정업체가 포함되어 삭제	◦업무 흐름도 삭제
3	2002. 05.20	1～ 20	조창호	◦상수도 GIS 구축사업의 완료(2001.12.31)에 따른 절차서 전면 개정	◦개정전 상수도 GIS 구축사업의 추진 ◦개정후 구축된 GIS DB의 유지관리
4	2003. 04.15	20	이병운	◦업무분장에 따른 담당자 변경	◦조창호 ⇒ 이병운
5	2006. 10.15	20	이승우	◦업무분장에 따른 담당자 변경	◦이병운 ⇒ 이승우
6	2007. 07.15	20	김상웅	◦업무분장에 따른 담당자 변경	◦이승우 ⇒ 김상웅
7	2007. 10.15	20	김상웅	◦직제 개편에 따른 부서 변경	◦급수부 ⇒ 시설관리부
8	2008. 08.04	9~15	김상웅	◦직제 개편에 따른 부서 변경	◦지리정보팀 ⇒ 급수공사팀
9	2008. 09.11	20	김홍준	◦업무분장에 따른 담당자 변경	◦김상웅 ⇒ 김홍준
10	2010. 09.13	20	김영혁	◦업무분장에 따른 담당자 변경	◦김홍준 ⇒ 김영혁
11	2013. 03.15	20	김동구	◦업무분장에 따른 담당자 변경	◦김영혁 ⇒ 김동구
12	2014. 08.01	16	신정민	◦상수도 GIS 지침 개정(2014.07)에 따른 절차서 전면 개정	◦김동구 ⇒ 신정민
13	2015. 12.01	16	신정민	◦직제 개편에 따른 부서 변경	◦지리정보과 ⇒ 공간정보과

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	2/16

1. 목 적

상수도시설물의 위치, 심도 등 정밀측량에 의한 상수도 GIS DB구축으로 과학적인 상수도시설물 관리체계 확립

2. 업무개요

가. 정의

(1) 신규로 부설하는 도‧송‧배수관, 불용관(철거관, 폐쇄관), 밸브, 소화전, 수도계량기 등에 대한 시설자료의 속성을 조사하고 평면위치를 절대측량하여 성과도를 작성하며

(2) 기존에 상대측량으로 구축한 GIS DB자료는 조사, 탐사 및 절대측량을 통해 위치정확도를 수정·보완하는 업무임

(3) 위치정확도는 물론 정위치·구조화 편집에 의해 GIS DB를 생성하고 공공측량 성과심사를 통해 공정성을 확보하여 각종 의사결정의 과학적 근거를 마련함

나. 내용

(1) 신설관로 조사/측량, GIS DB 구축

(2) 기존관로 조사·탐사/측량 및 GIS DB 수정, 보완

(3) 오류데이터 재조사 및 수정

(4) 유지관리의 데이터 공유 및 활용

(5) 시설통계자료 작성 관리 등

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	3/16

다. 일반현황

(1) 주요시설 현항

(`13년 12월말 기준)

구분	배관 (㎞)	밸브류 (개소)	소화전 (개소)	시설물(개소)
				정수장	배수지	가압장	유량계	취수장
수량	13,791	204,728	58,274	6	104	196	564	5

(2) 상수도 GIS용 수치지형 기본도 현황

․ 기본도 : 서울시 연속 수치지형도 2.0

․ 데이터 형식 : 세계측지계 기준 shape 포맷

․ 지역 : 서울시 전지역(595.11㎢)

․ 레이어 : 지형지물 레이어 87개

․ 도엽수 : 2429매

※ 상수도 GIS용은 1/1000을 1/500으로 확대하여 사용

라. DB 구축대상

(1) 대상시설

․ 배관: 취수관, 도수관, 송수관, 배수관, 급수관 등

․ 관부속시설 : 밸브, 소화전, 급수탑, 유량계, 편락관, 신축관, 맨홀 등

․ 일반시설 : 취수장, 정수장, 배수지, 가압장 등

마. DB 구축자료

(1) 시설별 도형 및 속성자료

(2) 일반업무자료

․ 대장자료 : 관로대장, 밸브대장, 시설관리대장 등

․ 공사자료 : 공사대장, 준공도 사진 등, 공사관련 자료

․ 보  고  서 : 누수발생처리보고서, 야간최소유량측정결과 등 각종

보고서 자료

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	4/16

3. 용어정리

◦ 지하시설물(7대 시설물)

국민생활에 기반이 되는 상수도, 하수도, 가스, 송유, 지역난방, 전기, 통신시설을 말하며 서울시지하시설물 통합관리시스템에서는 송유시설을 뺀 6대 지하시설물을 관리하고 있음

◦ 공간정보

공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지 및 의사결정에 필요한 정보

◦ 상수도 지리정보 시스템

상수도 배관 및 부속 시설물, 일반 시설물에 대한 도형 및 속성자료를 수집·가공하여 전산화하고, 이러한 자료들이 시설물 관리 및 의사결정 등에 활용될 수 있도록 하드웨어, 소프트웨어, 응용프로그램으로 구성된 전산정보 체계

◦ 상수도 시설 자료

상수도 지리정보 시스템에 의해서 처리되는 상수도의 모든 시설 관련 도형 및 속성정보

◦ 수치지형도

컴퓨터로 처리 가능하도록 수치화하여 제작된 전자지도

◦ 주 전산기(Server)

상수도 시설 전산자료를 저장·관리하기 위하여 설치된 서버

◦ 단말기(Client)

전산기의 자료를 송수신하기 위하여 설치된 입·출력장치

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	5/16

◦ 데이터베이스(database, 자료기반)

다수의 사용자들이 공동으로 사용할 수 있도록 통합 저장되어있는 운영 자료의 집합. 여기에서는 상수도 관련 시설의 도형, 속성정보를 체계적으로 수록한 전산화된 자료를 의미

◦ 상수도 공간정보 총괄부서

시스템을 관리하고, 운영하는 업무를 총괄하는 부서를 말하며, 상수도사업본부 공간정보과가 됨

◦ 상수도 공간정보 자료 입력부서

상수도 시설물의 변경사항을 입력·수정하는 부서를 말하며, 상수도사업본부는 공간정보과, 수도사업소는 급수운영과가 됨

◦ 도형자료

각종 시설물의 위치와 형상을 벡터 또는 래스터(이미지) 형태로 표현되는 자료를 말하며 여기에는 수치지형도, 상수도배관도 등의 지도와 각종 사진, 스캐닝한 설계도서 등의 영상자료(image data)가 포함됨

◦ 속성자료

각종 시설물의 특성과 성질 등을 문자로 나태는 자료를 말하며 여기에는 각종 대장 및 조서 등이 포함됨

◦ 일반 업무자료

상수도 공간정보 자료 이외에 상수도 시설관리업무에서 발생한 속성자료를 말함. 누수복구, 도로굴착, 횡단굴착, 배관부설공사 등 시스템적으로 도형자료와 직접 연계되지 않고 주로 문서나 대장자료로 입력하는 자료

◦ 조사

시설물의 제원과 속성을 직접 현장에서 확인하는 것

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	6/16

◦ 탐사

지하에 매설된 시설물의 위치와 심도를 탐사기기에 의하여 측정하는 것

◦ 백업

사용하고 있는 파일이나 프로그램 등이 파손될 경우에 대비하여 다른 기억매체에 별도로 복사하여 보관하는 것

◦ 신규(변경)데이터

상수도관로 또는 시설물을 설치하여 새롭게 발생된 자료 상수도관로.   또는 시설물을 개량 또는 정비하여 속성 또는 도형이 변경된 자료

◦ 오류데이터

데이터의 수집 입력단계의 오류로 인하여 잘못된 정보를 가지고 있는 자료

◦ 지거(Offset)

기준이 되는 측선 주위에 있는 지점에서 그 측선에 이르는 수직 거리

◦ 토탈스테이션(Totalstation)

거리와 연직각 및 수평각을 하나의 기계로 관측할 수 있는 장비로서 공간의 위치를 구하기 위한 수평각, 연직각, 사거리를 동시에 관측하며 수치적으로 저장이 가능하여 컴퓨터를 이용하여 대량으로 계산처리를 하거나 이를 이용하여 지형도 등을 작성할 수 있는 장비

◦ Layer(레이어, 층)

도면에서 중첩되는 다양한 자료들로서 데이터베이스 내에서 공통된   좌표체계를 가지며 하나의 주제를 가짐

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	7/16

4. 책임과 권한

가. 업무추진 계계도

		본부장
		부본부장
상수도 공간정보 총괄부서					상수도 공간정보 자료 입력부서
시설안전부장					수도사업소장(8명)
공간정보과					급수공사팀
공간정보과장 팀원 : 5명					급수운영과장 팀원 : 2～4명

나. 본부장

(1) GIS 사업계획의 승인

(2) GIS 관리지침의 승인

다. 부본장

(1) DB 구축관련 계획의 승인

(2) 공공측량 성과심사 계획의 승인

(3) 예산 편성의 승인

라. 시설안전부장

(1) 배관 탐‧조사 계획의 승인

(2) 배관 탐‧조사 성과관리의 승인

(3) 수치배관도 관리 총괄

(4) 데이터 전산입력 및 유지관리업무 관리

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	8/16

마. 총괄부서(본부 공간정보과)

(1) 데이터베이스의 유지관리업무 총괄 (공간정보과장)

(2) GIS 관리지침 작성

(3) DB 구축 계획수립

(4) 공공측량 성과심사 계획수립

(5) 예산편성

(6) 배관 탐‧조사 계획 및 성과 관리

(7) 수치배관도 관리

(8) 데이터 전산입력

바. 자료입력부서(본부 공간정보과, 사업소 급수운영과)

(1) 상수도 시설자료 보완, 갱신

(2) 프로그램 보완 또는 추가 개발요구

(3) 본부와 사업소 단말기 운영상황 등

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	9/16

5. 관련근거규정

가. 관련법령

(1) 국가공간정보에 관한 법률

(2) 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

(3) 도로법 제62조, 동법 시행령 제59조, 제61조, 동법 시행규칙

제31조, 제32조

(4) 서울특별시 정보화 기본조례

(5) 서울특별시 공간정보의 구축 및 활용 등에 관한 조례

나. 관련계획

(1) 국가공간정보정책기본계획, 국가공간정보정책시행계획

(2) 국가정보화기본계획 등

다. 내부업무지침

(1) 상수도 GIS 업무지침 (`14.7월 4차 개정) 등

라. 기타

(1) 서울특별시 지하시설물도 수치지도화 협의회 등

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	10/16

6. 업무체계 흐름도

업무담당자
-공사발주 -배관성과도 작성사항 설계서에 포함 -필요한 수치배관도 시공업체에 제공
시공업체			감리업체
-공사시행 -상수도공사 구간 배관성과도 작성 ‧ 측량방법:수치지형도에 상대측량 ‧ 직선구간은 20m마다, 변곡 및 시설물은 모두 측량 ‧ 곡관부 및 밸브류는 전부 측량 -공사 구간내 철거‧폐쇄 관로현황 작성 -작성사항 감리업체에 확인 요청 -감리업체 지적사항 보완후 업무담당자에게 제출 -제출시점 ‧ 단위발주공사:준공계 제출시 (구간별 분할제출 가능) ‧ 장기계속공사는 연도기준 분할제출하여 익년 1월15일까지 제출 ‧ 단가계약공사 : 완공계 제출시			◦ 책임감리 - 상수도 배관성과도 및 철거폐쇄 현황 작성 상태확인 - 미비점 보완 지시 및 결과 확인 - 작성상태 확인후 발주청에 통보 - 준공검사시는 준공조서에 GIS담당주무관 확인 후 준공처리 ◦ 감리 -작성자료확인 및 보완지시 : 상동 -최종 확인후 시공업체에 통보
업무담당자			GIS 입력부서
-필요사항 확인후 GIS 입력부서에 제출 -자료 반송시 보완하여 제출 -편집완료 통보 접수 후 편집누락 및 오류 사항 확인			-접수대장 등재 -현장샘플확인(필요시 공사관계자 입회) -미비사항 발견시 반송 (3일 이내) -최종 보완 확인후 시스템에 편집 -편집완료사항 업무담당자에게 통보

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	11/16

7. 세부업무내역

가. 자료 관리

(1) 총괄부서 및 자료입력부서는 상수도 지리정보 시스템의 최신성 및 정확성이 유지되도록 관리(보완)하여야 한다.

(2) 자료인수인계

① 상수도 배관공사를 시행하는 부서(이하“시공부서“라 한다)에서는 공사발주와 동시에 공사 현황 자료를 자료입력부서에 제공하여야 한다.

② 시공부서는 1/500 수치배관도에 배관의 평면위치 및 심도를 실측한 성과도, 준공도를 포함한 준공자료, 속성자료를 작성하여 준공검사 전에 자료입력부서에 제출 하여야 한다.

③ 자료입력부서의 확인자는 본부에서는 공간정보과장, 수도사업소에서는 급수운영과 GIS 업무 주무관이 되며 준공자료가 적절히 작성되었는지 확인하여야 한다.

④ 경리부서에서는 준공검사조서에 자료입력부서의 확인이 없으면 접수를 반려하여야 한다.

(3) 자료입력

① 시공부서에서 제공된 속성자료는 수도사업소의 급수운영과에서  입력한다.

② 자료 입력을 할 때에는 오류가 없도록 주의하여 시행하여야 하고, 도형자료와 연계되는 속성자료는 함께 입력한 후 연계여부를 확인한다.

③ 자료의 입력은 접수된 날로부터 7일 이내를 원칙으로 하고, 부득이 한 경우는 관리자의 승인을 받아 일정을 조정하여 입력한다.

④ 자료의 입력은 공간정보 총괄부서 및 자료입력부서에서 하고 자료 제공자는 시스템을 통하여 입력상태를 확인 후 오류사항이 발견되면 통보하여 수정되도록 하여야 한다.

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	12/16

(4) 자료의 정비

① 지역 및 시설물 담당자는 구축된 자료에 오류가 발견되면 조사, 확인하여 자료입력부서에 통보하여야 하며, 자료입력부서는 통보된 오류를 수정 하여야 한다.

② 상수도 공간정보 총괄부서(“상수도본부장“이라 한다) 부서장은 자료를 일정한 기준에 따라 입력, 수정하도록 함으로써 자료의 품질을  확보하고 통일성이 유지 되도록 하여야 한다.

(5) 공개제한 공간정보의 활용

① 공개제한 상수도 시설자료에 대하여 학술연구 등의 목적으로 공개를 요청 받은 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인 검토하여 제공 할 수 있다.

1. 신청인의 인적사항(성명, 주소, 주민등록번호, 소속 기관․단체 및 직책 등)

2. 사용목적 및 타당성

3. 활용 후 관리대책

② 제①항의 규정에 의하여 공개를 요청받은 경우 상수도 공간정보  사용신청서, 서약서 및 인수증을 제출 받으며, 공간정보자료 복제․출력 대장에 기록 관리한다. 단, 도로굴착․건축협의 등 단순 도면형태의 자료를 출력, 제공할 때에는 공간정보자료 복제․출력   대장에만 기록 관리한다.

③ 제①항의 적정성 여부를 심의하기 위하여 상수도 공간정보 자료제공 심의위원회를 구성․ 운영할 수 있으며, 시설안전부장을 위원장으로 하고 총무과장, 공간정보과장, 전산정보과장을 위원으로 한다.(수도사업소의 경우 급수운영과장을 위원장으로 하고 행정관리팀장, GIS 업무 담당주무관 외 1명을 선정하여 위원으로 한다.)

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	13/16

(6) 외주시 수치배관도 제공 및 취급

① 수치배관도를 사업(공사)수행 목적으로 용역 및 시공업체에 제공할 시는 해당사업 목적으로만 사용토록 서약서 및 인수증을 용역 및 시공업체 책임자로부터 반드시 제출하도록 한다.

② 연간단가계약공사의 경우 계약시 서약서를 받아 계약기간 동안    자료를 제공할 수 있다.

③ 사업(공사) 수행 목적으로 용역 및 시공업체에 제공된 수치배관도의   보안관리 책임은 사업 발주부서(해당 부서장 및 담당자)와 용역   및 시공업체가 진다.

④ 제공된 수치배관도는 사업수행 완료시 성과도와 함께 반납토록    하여야 한다.

(6) 보안대책

① 시설자료의 중요성을 감안하여 전산자료를 관리하는 부서에서는 다음 각호를 이행하여야 한다.

1. 시스템의 단말기는 사용하지 않을 시는 로그 아웃 상태에  있도록 해야 한다.

2. 시스템과 전산작업실에서 얻은 비밀은 외부에 누설해서는 안된다.

3. 시스템을 운영 및 관리하는 기관장은 관련 자료의 보안을   위하여 보안점검을 실시해야 한다.

(7) 출력물 관리

① 사용부서의 장은 출력물이 분실, 도난, 훼손되지 않도록 안전한 장소에 보관한다.

② 자료입력부서에 인계되는 성과도(준공자료, 속성자료 포함)․  수정요청자료, 정확도 개선사업 성과품 중 종이문서 등은 5년간 보관하여야 한다.

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	14/16

나. 시설자료 형태별 전산입력 지침

(1) 도형정보 입력

① 상수도 관로

- 상수도 관로는 연속된 관로로서 속성정보(설치일, 재질, 구경 등)가 같은 구간이라도 상수도 시설물에 의해 분할함을 원칙으로 한다.

- 관망이 상하로 교차하는 경우, 관의 상․하 구분은 반원으로  표시된 부분이 하향이면 아래로 지나간 관, 상향이면 위로 지나간 관으로 구분한다.

- 상수도관은 관망해석시 유수방향이 필요하므로 유수 방향대로 입력한다.

- 동일한 용도를 갖는 주관로는 연속된 선으로 그리며 방향성  (유수방향)을 지녀야 한다.

② 밸브류

- 제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브 등 각종 밸브는 입력시 해당   밸브를 입력대상(target)으로 설정하고 입력한다.

③ 기타 상수도 시설물류 입력방법과 동일하다.

- 소화전 설치를 위한 분기 제수밸브는 하나의 독립된 밸브로   입력한다.

④ 급수관 및 수도계량기

- 급수관은 배수관과 수도계량기를 연결하며 방향성을 지녀야 한다.

- 급수관은 독립수전 계량기 및 주계량기까지만 입력한다.

(2) 시설자료 입력주기 및 주체

① 입력주기와 주체는 다음과 같다.

분류	입력주기	입력방법	입력주체
도형 및 속성자료	자료 최종보완 및 확인한 날로부터7일이내	시공부서로부터 현장 조사서를 인수받아 입력, 수정	-본 부 : 공간정보과 -사업소 : 급수운영과

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	15/16

② 도형 및 속성자료의 갱신은 GIS 시스템에서 해당 도형을 선택하여 수정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 업무지침의 변경 또는 데이터 관리코드의 변경 등으로 데이터를 일괄 수정할 필요가 있을 경우에는 별도의 계획을 수립하여 일괄 수정한다.

(3) 입력자료 검수

① 상수도 시설자료 제공자는 자료입력 완료 후 7일 이내에 입력내용이 공사 내용과 일치하는지를 GIS 시스템을 통하여 확인한다.

② 확인한 자료의 입력오류나 누락이 발견된 경우에는 즉시 급수운영과장에게 수정을 요구한다.

③ 급수운영과장은 시공부서장으로부터 수정요구가 있을 경우에는 2일 이내에 시스템의 자료를 수정하고 수정사실을 시공부서장에게   통보하여야 한다.

다. 도면 활용

(1) 상수도업무와 관련하여 필요한 모든 배관망도는 GIS 시스템의 도면을 활용한다.

(2) 업무와 관련하여 사용한 상수도 배관망도가 현장과 불일치(위치 및 속성) 부분이 확인되면 급수운영과에 현장조사서에 의거 통보 또는  지리정보 시스템(GIS) 프로그램을 이용하여 수정요청한다.

(3) 연간단가계약 등 소규모 공사의 현장조사서는 시스템에서 제공하는 현장조사서 출력물을 이용한다.

(4) 사용도면의 축척 및 크기는 사용자가 편리한 방법으로 설정하여  사용한다.

상수도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67516-P
	GIS 데이터 유지관리 절차서	쪽 수	16/16

8. 참고 및 특기사항

가. 자료 공개의 제한

(1) 상수도시설관리시스템은 공공의 이익과 안전에 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이며, 일반 공개가 제한되는 시설이므로 보안관리를 철저히 하여야 한다.

(2) NGIS 보안지침에 따라 보안시설과 수치지형도의 좌표는 인터넷에 공개할 수 없다.

나. 시스템 사용자 교육

(1) 상수도 시설관리시스템의 사용법을 숙지하고

(2) 필요한 경우 매뉴얼 등을 제작 배포하며

(3) 시스템 사용 활성화를 위하여 사용자 교육을 실시하여야 한다.

9. 참고자료

가. 공공측량 작업규정

나. 상수도 GIS 업무지침