투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행 - 2015년 노후포장도로정비 노면표시공사 감리용역

우리 사업소에서 시행 중인 『2015년 노후포장도로정비 노면표시공사 감리용역 』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 노후포장도로정비 노면표시공사 감리용역

나. 용역기간 : 2015.04.01 ∼ 2015.12.31

다. 도 급 자 : ㈜영호이앤씨 대표 서태교

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총용역비	8,484,000	10,299,000	증)1,815,000
용 역 비	8,484,000	10,299,000	증)1,815,000

마. 설계변경 사유 : 포장도로 정비공사 노면표시물량 증가분 반영

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물

관리(도시개발),노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임   1) 설계변경 검토 보고서(제1회) 1부.

2) 설계변경 내역서(제1회) 1부.  끝.

주무관	최정필		도로보수과장	12/08 이규철
협조자	주무관	이상하		주무관	윤미란
시행	도로보수과-12275	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개