문서번호	교통운영과-23931
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	12/08 강진동
협조
	주무관		김상범

『교통량측정용 차량검지기』유지보수(연간단가)공사

계약금액 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

교통운영과

(신호운영팀)

『교통량측정용 차량검지기』유지보수(연간단가)공사

계약금액 변경보고

2015년 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사가 완료됨에

따라 원인자로부터 수납된 비용정산 및 물량변경으로 금액이 변경되어 아래와 같이 계약금액을 변경하고자 보고 드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사

○ 계 약 자 : 건웅신호산전(주) 대표 박정현

○ 공사기간 : 2015.5.18.∼2015.12.31.

○ 계약금액 : 금182,945,120원

○ 예산과목 : 교통운영과, 도심교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

교통량측정용 차량검지기 신설 및 보수, 시설비(201-401-01)

○ 변경계약번호 : 20150*******01[재무과-55317(2015.11.12.)]

□ 관련근거

○ 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)본공사 1차 현장검사 결과보고

[교통운영과-22989(2015.11.25.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)본공사 2차 현장검사 결과보고

[교통운영과-23857(2015.12.7.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)원인자공사 1차 현장검사 결과보고

[교통운영과-16245(2015.8.21.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)원인자공사 2차 현장검사 결과보고

[교통운영과-22966(2015.11.25.)]

□ 변경사유

○ 각종 공사로 훼손된 교통량측정용 차량검지기 시설물 원상복구에 따른 물량변경

및 원인자로부터 수납된 공사비(세입세출외현금)정산으로 금액변경

□ 변경내용

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증⦁감(원)
금 액	182,945,120	182,182,820	감 762,300

□ 세부내용

구 분	차 수	금 액(원)	예산과목	비 고
본 공사	작업 1차	64,846,100
	작업 2차	22,626,020
	소 계	87,472,120	시설비
원인자공사	작업 1차	38,966,000
	작업 2차	55,744,700
	소 계	94,710,700	세입세출외현금
합 계		182,182,820

□ 향후계획

○ 2015년 교통량측정용 차량검지기(연간단가)공사 계약금액 변경의뢰(재무과)

붙임 :  1. 변경 설계내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 작업지시 차수별 보고서 1식.

4. 2015년 교통신호운영사업 추진계획 1부.  끝.