투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 의뢰(2015년 불량맨홀 정비공사 건설폐기물 운반 및 처리용역)

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『2015년 불량맨홀 정비공사 건설폐기물 운반 및 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 2015년 불량맨홀 정비공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

나. 용역 기간  : 2015. 05. 28 ~ 2015. 12. 31

다. 도  급  자 : ㈜신잔토환경 대표 박 종 혁

라. 설계변경내역                                        (단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금액	증 감	비고
총용역비		4,484,000	6,622,000	증) 2,138,000
도급비	순용역비	4,076,370	6,020,000	증) 1,943,630
	부 가 세	407,630	602,000	증) 194,370
	계	4,484,000	6,622,000	증) 2,138,000

바. 설계변경사유 : 추가물량 시행으로 수량증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로  및  도로부속물 관리(도시개발),

노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

따로붙임 : 설계변경 관련도서 1부.    끝.

	도로보수과장
주무관	최완		도로보수과장	12/08 이석재
협조자
시행	도로보수과-12123	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개