문서번호	기전과-13046
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/08 김호성
협조
	주무관		윤석주

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 3차)

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 3차)

실정보고사항 검토보고

교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 3차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 3차 작업지시의 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 책임감리 실정보고(영호이앤씨 영호 본 15-12-10호, ‘15.12.07)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역)

○ 공사위치 : 서부도로사업소 관내(마포구, 은평구)

○ 공사규모 : 교통신호기 신설 및 보수 1식

○ 계약금액 : 691,000,000원

○ 공사기간 : 2015.3.4. ∼ 2015.12.31.

○ 계약업체 : ㈜대덕 대표 이흥숙

□ 3차 작업지시개요

○ 작업위치 : 은평구 명성학원 외 169개소

○ 작업지시금액 : 182,204,000원

○ 작업지시기간 : 2015.12.03. ∼ 2015.12.18.

□ 실정보고 내용

○ 변경예상금액 : 감 45백만원(182백만원 → 137백만원)

○ 세부내역

- 명성학원(감 20백만원) : 지장물(하수관)로 기초설치 및 보도굴착 불가하여 취소

- 이랜드(감 25백만원) ; 계약금액 초과로 취소

※ 붙임 세부 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선 변경하여 작업토록 지시하고 추후 완료보고 시에 정산물량 반영하고자 함

붙 임 : 책임감리 실정보고 1부.  끝.