투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	PC암거 설치공사 교통소통대책 점용기간 변경 협의

1. 교통운영과-16738(2015.8.31.) 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사의 제2염곡지하차도 설치공사를 위한 PC암거 설치공사 관련하여 아래와 같이 점용기간을 변경하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 PC 암거 설치공사

□ 위    치 : 양재대로 염곡사거리 ~ 구룡사앞교차로

□ 점용기간

- 당초 : 2015.08.24.~2015.10.31.(69일)

- 변경 : 2015.11.30.~2016. 2. 6.(69일)

붙임 : 교통소통대책 변경도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김구		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/08 노우성
협조자	주무관	장종환
시행	토목부-26199	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개