문서번호	정보통신보안담당관-22150
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이후관		이명원	12/08 박웅수
협조

- 2015년 행정정보통신망 설치공사(연간단가) - 설계변경및준공정산보고

2015. 12.

정보통신보안담당관

- 2015년 행정정보통신망 설치공사(연간단가) -

설계변경및정산준공보고

행정정보통신망 설치공사가 현장여건 변화에 따른 UTP케이블, PVC 몰드 등의 물량 증·감이 발생하고 보험료, 경비 등을 정산하여 준공 처리하고자 함.

Ⅰ		관련근거

행정정보통신망 설치공사(연간단가) 의뢰 (정보통신보안담당관-3085 /‘15.2.16]

계약 체결통보 (재무과-11995 /‘15.3.4]

Ⅱ		공사개요

건    명 : 2015년 행정정보통신망 설치공사(연간단가)

주요내역

○ UTP케이블  6,600m 포설

○ 모듈러접속   90EA

○ PVC몰드 대4호 15m

계약금액 : 78,726,740원

계 약 자 : 엠앨캐스트㈜ 대표 김철호

공사기간 : 2015. 3.9. ~ 2015.12.31.

Ⅲ		변 경 및 정 산

소요자재

구 분	당 초	변 경	사 유	비 고
주요설계내 역	UTP케이블포설 6,600M	11,841M 포설	조직개편, 부서이전, 국정감사장 LAN설치 물량 증가	상세 물량증감 내역 따로붙임
	모듈러 접속 90EA	67EA	모듈러(아울렛) 물량 감소
	PVC몰드 대4호 15M	115M	조직개편 LAN설치 물량증가

경    비

구 분	금 액 (원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
산재보험료	1,968,142	1,968,142	0	완납증명원 제출
고용보험료	450,601	450,601	0
건강보험료	1,012,491	377,860	감634,631	납부금액 감소 (납부확인서 제출)
연금보험료	1,483,002	556,100	감926,902	납부금액 감소 (납부확인서 제출)
안전관리비	1,205,671	345,000	감860,671	납부금액 감소 (증빙서 제출)
노인장기 요양보험료	66,318	24,720	감41,598	납부금액 감소 (납부확인서 제출)
계	6,186,225	3,722,423	감2,463,802	-

※ 산재보험료, 연금보험료 등은 법정 정산기준에 의해 경비 정산

Ⅳ		준 공 정 산

변경 계약금액 : 77,652,690원

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감
직 접 공사비	재 료 비	4,884,726	5,023,800	139,074
	노 무 비	51,793,234	53,269,206	1,475,972
경 비		6,186,225	3,722,423	감2,463,802
일반관리비		3,771,851	3,720,925	감50,926
이 윤		4,933,728	4,857,001	감76,727
계		71,569,764	70,593,355	감976,409
부가가치세		7,156,976	7,059,335	감97,641
합 계		78,726,740	77,652,690	감1,074,050

Ⅴ		행 정 사 항

재무과 계약금액 변경 요청  :‘15.12. 9

준공검사  :‘15.12. 14 ~ 12. 18

붙  임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 경비정산 증빙서류  1부.

3. 합의각서 1부.  끝.