문서번호	설비부-15736
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김현숙	김영수	12/08 박기형

『용비교~행당중간 도로개설 전기공사』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

『용비교~행당중간 도로개설 전기공사』

설계변경 검토 보고

『용비교~행당중간 도로개설 전기공사』의 설계변경(정산)이 발생하여 책임감리원으로부터 보고받은 사항에 대한 검토결과를 보고드립니다.

관련근거

○ PH15-용행감-214(2015.12.03.)호

공사개요

○ 공 사 명 : 용비교~행당중간 도로개설 전기공사

○ 규    모

- 가로등(2등용, 100W) 19본 설치, 가로등(1등용 150W) 10본 설치,

교량점검등(EL20W) 101개 설치, LED가로등기구(100W) 9개 교체

○ 도 급 자 : 제일정보건설(주)

○ 공사기간 : 2015.08.17.~2015.12.31.

○ 도 급 비 : 계약)209,999,000원

변경)178,519,000원

○ 감 리 단 : ㈜평화엔지니어링

설계변경 현황

○ 변경금액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	209,999	178,519	31,480
관급	76,781	79,105	+ 2,323
이전비	3,300	0	3,300
합계	290,080	257,624	32,456

○ 설계변경 사유

- 1,2차 실정보고에 따른 공사물량 증감 및 정산

[1차 실정보고 : 설비부-11831(2015.09.23.)호]

[2차 실정보고 : 설비부-14938(2015.11.26.)호]

○ 설계변경 내용(별첨 설계내역서 참조)

구 분	변경사항	비 고
가로등공사	수전방식 변경(3상->기존 단상2선식)으로 인한 케이블 및 전선관 물량 감소 인수기관(성동도로사업소 기전과) 요청에 의해 LED가로등기구 9개 교체로 인한 자재 및 케이블 물량 증가 인수기관(성동도로사업소 기전과) 요청에 의해 동부간선도로 진입부분 분전반 설치
교량점검등 설비공사	조명제어시스템에서 3로 스위치방식으로 변경하여 케이블 및 전선관 물량 변경
기타	토목공사와 중복 시공물량 삭감
제경비	기계경비, 산재·고용·건강·연금· 노인 퇴직공제부금, 안전관리비, 기타경비

○ 예산과목 : 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별),

용비교~행당중간 도로개설

보고자 검토의견

○ 실정보고 검토결과 적정한 것으로 판단되어 본부 건설총괄부에 계약변경을 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 합의서 1부.

2. 감리단 실정보고 1부.

3. 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.