문서번호	정수시설과-11583
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동	유영춘	12/08 임정규

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

[기계설비 유지보수 공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

영등포아리수정수센터

정수시설과

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

기계설비 유지보수 공사 시행중 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의의결내용에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

공사현황

공 사 명 : 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

공사개요

- 모터펌프 분해정비 및 엑츄에이터 수리 등

도 급 액 : 일금67,275,100원

착 공 일 : 2015. 04. 22

준 공 일 : 2015. 12. 31

계 약 자 : (주)제이에스설비시스템 대표 박 승 빈

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장

위   원 : 공업6급 오재승외 3명, 간사 1명

일   시 : 2015.12.8(화) 10:00 ~ 11:00(2층 사무실)

안   건 : 기계설비 유지보수 공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

신규공정 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 공사비

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초금액	변경금액
공사원가	61,159,190	60,750,000	감) 409,190
부가가치세	6,115,919	6,075,000	감) 40,919
총공사비	67,275,100	66,825,000	감) 450,100

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 심의위원회 의견서 1부. 끝.