문서번호	물재생과-5186
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	12/08 가길현
협 조

-홍제천 및 지천관로 보수공사-

창릉천 차집관로 파손구간 정비 계획

2015. 12.

- 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

창릉천 차집관거 파손구간 정비 계획

우리 센터에서 시행중인 홍제천 및 지천관로 보수공사와 관련 공사 구간인 창릉천 지축교 주변에 차집관로 파손으로 인한 하천수 유입으로 비굴착 전체보수가 불가능한 실정으로 파손된 차집관로 보수 후 비굴착 보수로 시설물의 기능유지와 하천 오염 방지에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 도급사 실정보고(소니종건-1, 2015. 12. 8)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 홍제천 및 지천관로 정비공사

○ 위　   치 : 홍제천(유진상가~KT전화국), 창릉천(싸릿말교~지축교)

○ 도 급 액 : 529,309천원(공통분야 유지보수 시설비)

○ 도 급 자 : 소니종건㈜ 대표 유연학

○ 공사기간 : 2015. 6. 12 ~ 2015. 12. 31

□ 보고 내용

○ 창릉천 비굴착 보수구간중 지축교 주변에 차집관로 2개소 파손이        심하여 하천수 유입으로 인한 비굴착 보수가 불가능한 실정으로 차집        관로 정비후 비굴착 보수가 시급한 실정임.

○ 차집관로 파손구간

- 위치 : 서울시 은평구 북한로 71 주변(진관교 43-1)

- 관로제원 : D=450mm, 2개소(관로번호 : CLLO-024)

○ 위 치 도

○ 현황사진

1.CLLO-024 86.5m 관로파손	1.CLLO-024 89.1m 관로파손

□ 조치의견

○ 현재 창릉천 비굴착 보수중으로(공정율 80%) 지축교 주변 차집관로        2개소 파손이 심하여 비굴착 보수가 불가능하므로 파손이 심한 차집        관로 개량후 비굴착 보수를 진행코자 하며,

○ 공사의 시급성을 감안 우선 시공자로 하여금 공사 시행하고 추후        설계변경시 정산코자 함.

- 정비방법 : 차집관로가 창릉천 하상 하부에 매설되어 있어 하천 상류                  구간에서 물막이후 파손된 위치를 굴착하여 차집관로                  개량후 비굴착 보수(전체보수)를 하고자 함.

- 개략 공사비 : 약 18,000천원(기 확보된 예산 활용).

붙임 : 도급자 실정보고 사본 1부. 끝.