			북부수도사업소
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2015년 자동제어설비 유지보수 용역)

1. 우리사업소에서 시행중인『2015년 자동제어설비 유지보수 용역(연간단가)』에 대한 물량변동 및 차수별 계약금액 조정으로 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 사업개요

공 사 명 : 2015년 자동제어설비 유지보수 용역(연간단가)

계약업체 : ㈜ 주인정보시스템 대표 김근호(TEL:02-544-3271)

계약금액 : 금59,047,000원(금오천구백사만칠천원)

공사기간 : 2015.4.30.~2016.3.31.(1년)

나. 설계변경내용 : 계약금액 변동없이 물량변동 및 차수별 계약금액과 기간 조정

구 분	계약금액(원)			공사기간	비고
	당초	변경	증.감
전체	59,047,000	59,047,000	-	‘15.04.30.～’16.03.31
1 차	59,047,000	46,660,000	△12,387,000	‘15.04.30.～’15.12.31
2 차	-	12,387,000	12,387,000	‘16.01.01.～’16.03.31

다. 변경사유 : 물량변동 및 차수별 계약금액 조정 사항에 대한 설계변경

별첨 1. 내역서(변경내역서, 총차, 1차. 2차) 1식

2. 방침서(설계변경, 소위원회 심의결과) 1식

3. 합의서 1부.  끝.

★주무관	차경호		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	12/08 박용진
협조자	주무관	옥혜경		주무관	한경란
시행	시설관리과-20808	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 한천로 935 북부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-3417	/전송	3146-3439	/	chagho@seoul.go.kr	/	부분공개