문서번호	기전과-13005
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/08 김호성
협조
	주무관		윤석주

교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

실정보고사항 검토보고

2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업의 교통신호기 공사(2차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 책임감리 실정보고(협우지여 제 15-신호기 76호, ‘15.12.4)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

○ 공사위치 : 2개소(마포구 청기와주유소 앞, 은평구 수색삼거리)

○ 공사내용 : 신호기 이설 1개소 및 신호기 신설, 위치조정 1개소

○ 계약금액 : 24,190,800원

○ 공사기간 : 2015.10.13. ∼ 2015.12.21.

○ 계약업체 : ㈜참좋은전기 대표 김미경

□ 실정보고 내용

○ 변경예상금액(수색삼거리 취소로 감액예정)

○ 세부내역

- 청기와쥬소 앞 : 증 12백만원

․당초 보행신호등 분리 설치를 보도환경 개선을 위하여 통합지주 이설

․관로 미선통으로 재사용이 불가하여 보행지주에서 사용하는 신호케이블을        재사용 및 굴착 제외

․설계에 미반영된 노후 제어기, 좌대 교체 및 파손된 보행신호등 교체

※ 붙임 세부 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선 변경하여 작업토록 지시하고 추후 완료보고 시에 정산물량 반영하고자 함

붙 임 : 책임감리 실정보고 1부.  끝.