문서번호	물재생시설과-4643
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
조귀현		황철호	12/08 이철해
협조

탄천·서남물재생센터

송풍기 성능개선 추진현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

물순환안전국

(물재생시설과)

탄천‧서남물재생센터

송풍기 성능개선 추진현황 보고

탄천 및 서남물재생센터에서 추진중인 송풍기 성능개선 추진현황을 보고 드림

□ 추진근거

○ 물재생시설과–6630(2015.5.14.) 전력비 절감을 위한 송풍기 성능개선 추진계획

○ 물재생시설과–10496(2015.7.31.) 물재생센터 노후송풍기 성능개선사업 추진통보

□ 송풍기 시설현황

센터별	처리장별	규격(kw)	수량	형 식	설치 년도	비 고
탄천	1처리장	650	5	다단터보	1986
		500	1	〃	1993
	2처리장	550	5	〃	1996	금회 2대 교체
		480	1	기어증속형	2013
서남	1처리장	550	10	다단터보	1995	금회 1대 설치 및 1대 교체
	2처리장	500	12	〃	1999
		250	2	〃	1999
		550	2	〃	1995

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 1,600,000천원(탄천 800,000천원, 서남 800,000천원)

○ 사업기간 : 2015.10.23 ~ 12.31

○ 사업내용

- 공기베어링 송풍기 철거설치 : 3대(탄천 2, 서남 1)

- 공기베어링 송풍기 설치 : 1대(서남)

- 전기설비 설치 : 고압반 1면(서남), 변압기반 4면, ABC반 4면

- 배관설비 각 1식

□ 추진현황

○ 계약현황

구 분	탄 천		서 남		비고
	송 풍 기	전기설비	송 풍 기	전기설비
계약일	2015.11.02	2015.10.30	2015.10.23	2015.10.30
계약수량	2대	변압기 2면 ABC 2면	2대	고압반 1면 변압기 2면 ABC 2면
계약업체	㈜에스터보	㈜우경일렉텍	리엔텍엔지니어링	㈜탑인더스트리
계약금액(천원)	522,692	109,380	515,743	208,250
납품(준공)기한	2015.12.29	2015.12.29	2015.12.18	2015.12.18

○ 추진내용

[탄 천]

- 송풍기 및 변압기 제작도면 승인

- 송풍기 및 변압기 제작 중 : 공정 90%

[서 남]

- 송풍기 및 변압기 제작도면 승인

- 기존송풍기 철거 및 기초콘크리트 타설 완료

- 송풍기 및 고압반 등 전기설비 제작완료

- 송풍기 및 변압기 공장검수 시행 : 전기설비(12.3), 송풍기(12.7)

□ 향후계획

○ 공정별 추진일정

[탄 천]

- 기존송풍기 철거 및 배관작업 : 12.10~12.11

- 송풍기 및 변압기 제작완료   : 12.11

- 송풍기 및 변압기 공장검수  : 12.14~12.15

- 송풍기 및 변압기 설치      : 12.17~12.21

- 종합시운전 및 교정         : 12.22~12.28

- 준공                      : 12.29

[서 남]

- 송풍기 및 변압기 설치     : 12.8~12.13

- 종합시운전 및 교정        : 12.14~12.17

- 준공                     : 12.18

○ 탄천 및 서남물재생센터 송풍기 성능개선 사업은 당초 추진계획 일정에 따라 정상적으로 준공예정임.  끝.