문서번호	급수운영과-30729
결재일자	2015.12.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
여수현	유명은	代유명은	12/09 이상래
협 조

설 계 변 경 보 고

(신월동 55번지외 7개소 배급수관정비공사)

2015. 12

강서수도사업소

「2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사」

설 계 변 경 보 고

『신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울특별시 시설관리공단으로부터 설계변경 도서가 접수되었기에, 아래와 같이 적정여부를 심의 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관정비공사

나. 공사개요 : 당초 D=80~300mm L=1,892m,

변경 D=80~300mm L=1,850m

다. 공사기간 : 2015. 04. 15. ~ 12. 12.

라. 도 급 자 : 윤석산업(주) 대표 이정남

마. 공사금액(도급액)

- 당 초 : 금421,702,390원

- 변 경 : 금361,570,000원

- 증 감 : 감60,132,390원

2. 설계변경내용

가. 현장실정보고에 의한 물량변경

연번	주 요 변 경 내 용	관련근거
1	- 기존 단절관 연결 [발주청 추가작업 지시] D=200mm, L=9m 증가	공사감독2처-7110(15.06.05)
2	- 아연도강관 교체 D=50mm, L=4m 증가	공사감독2처-10351(2015.07.15)
3	- 중간밸브 신설의 건 [단수구역 최소화]	공사감독2처-10930(2015.07.23)
4	- 주간공사 야간전환 [교통 및 단수민원 최소화]	공사감독2처-16683(2015.10.18)

나. 주요공종 증․감 현황

공 종	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감	비 고
- 원형밸브실 설치공	개소	54	33	감) 21
- 중형밸브실 설치공	개소	6	5	감) 1
- 철개고정장치[고정장치 일체형 사용]	개소	25	2	감) 23

3. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총 공 사 비	1,123,532,390원	1,123,532,390원	-
도 급 비	421,702,390원	361,570,000원	감) 60,132,390원
관 급 자 재 비	192,570,000원	168,720,000원	감) 23,850,000원
이 전 비	509,260,000원	593,242,390원	증) 83,982,390원

4. 조치 계획

상기 설계변경 건에 대하여 「2015년 상수도사업 설계심사 추진계획(재무회계과-1085, ‘15.1.28)호」에 의거, 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성여부 검토 후 심의 결과에 따라 조치코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경도서 제출 1부.

2. 제비율검증 1부. 끝