투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 가로등 및 기전시설물 유지보수공사(연간단가)설계변경 시행

우리 사업소에서 시행 중인 2015년 가로등 및 기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다(하오니 조치하여 주시기 바랍니다).

가. 공 사 명 : 2015년 가로등 및 기전시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015.3.4.~2015.12.31.

다. 도 급 자 : ******************

라. 설계변경금액

구 분	설계 변경 내용 (단위:원)			비 고
	당 초	변 경	증감액
공급가액	175,449,282	226,178,000	50,728,718
부가가치세	17,544,928	22,617,800	5,072,872
도 급 비	192,994,210	248,795,800	55,801,590	물량정산

마. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비.

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 원가 계산서 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	윤석주		기전과장	김호성		서부도로사업소장	12/09 배광환
협조자	계약1팀장	김점선
시행	기전과-13096	(		)	접수		(		)
우	03918	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 기전과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8391	/전송	20-300-8410	/	younsj@seoul.go.kr	/	부분공개