서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행(원효대교 정밀안전진단 용역)

우리 과에서 시행중인 「원효대교 정밀안전진단 용역」의 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 원효대교 정밀안전진단용역

나. 용역기간 : 2015. 5.13.~2016. 1. 7

다. 도 급 자 : 한국시설안전공단 대표 장기창

라. 설계변경 내역(1회 변경)

구 분		당 초 금 액(원)	변 경 금 액(원)	증․감(원)	비 고
총 용 역 비		417,691,000	430,293,000	증) 12,602,000
용역비	공 급 가 액	379,719,091	391,175,455	증) 11,456,364
	부 가 가 치 세	37,971,909	39,117,545	증) 1,145,636
	계	417,691,000	430,293,000	증) 12,602,000

마. 설계변경 사유

- GPR 탐사 추가과업에 따른 내역 변경

바. 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	이보람		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	12/09 이용심
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량안전과-6572	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	lbr2011@seoul.go.kr	/	대시민공개