문서번호	토목부-26342
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
윤원섭		이승우	12/09 노우성
협조

준공기한 연기 보고

(양재대로 녹지연결로조성 기본 및 실시설계 용역)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

준 공 기 한 연 기  보 고

(양재대로 녹지연결로 조성 기본 및 실시설계용역)

▢ 용역 현황

◦ 용 역 명 : 양재대로 녹지연결로 조성 기본 및 실시설계

◦ 위    치 : 강남구 개포동 1274번지 일원

◦ 사업내용

- 녹지연결로(신설) 폭 20m,연장 54m

◦ 계약기간 : 2015. 6.19. ~ 2015.12.31.

◦ 계약금액 : 192,330,000원

◦ 설계감리사 : ㈜유신 대표 성낙일

▢ 근    거 : 유신(구조)-15-5194호(2015. 12. 9.)로 설계과업기간 연장 요청

▢ 추진현황 (공정률 : 80%)

◦ '13. 6. 5. : 타당성조사 및 기본계획 착수

◦ '13. 7.30.~'13.10.28 : 투자심사

◦ '15. 6.19. : 기본 및 실시설계 착수

◦ '15. 7.24. : 착수보고

◦ '15. 9.04. : 사업추진현황 보고

◦ '15.10.16. : 교량형식 공법선정 진행현황 본부장 보고

◦ '15.10.23. : 교량형식 공법선정 위원회 개최

◦ '15.11.17. : 주민설명회 개최(개포4동 주민자치센타)

◦ '15.12.11. : 설계자문회의

◦ '15.12.15. : 도시공원심의(예정)

◦ '16. 1.15. : 건설기술심의(예정)

▢ 준공기한 연기사유

◦ 잔여 과업수행인 설계자문회의, 도시공원심의, 건설기술심의 등 행정절차 이행에 따른 설계 과업수행기간 부족.

▢ 준공기한내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
용 역 비	192,330,000	192,330,000	-
준공기한	′15. 6.19.~′15.12.31.	′15. 6.19.~′16. 2.29.	증)60일

- 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ ㈜유신으로부터 준공기한 연기 요청이 있어 검토한 바 본 용역은 잔여 과업수행인 설계자문회의,도시공원심의,건설기술심의 등 행정절차 이행에 따른 설계 과업수행기간이 부족하여 과업기한을 연기하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함.

붙   임 : 1. 과업기간 연장 요청 제출(용역사) 1부

2. 세부예정공정표 1부.  끝.