투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 사업추진 협조 요청

1. 교통운영과-12247(’15.6.25, ’15년 교통안전시설 개선사업 시행 변경계획)호와 관련입니다.

2.“2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업”관련 자치구청 연계공사(토목) 지연으로 강남역교차로, 양재역교차로 일부 물량(이정표)에 대하여 제외 후 사업완료 예정으로 일부 물량에 대하여 사업 이관요청 및 사업예산을 자치구청으로 재배정 요청합니다.

3. 제외 물량 사업이관요청 및 사업예산 현황

교차로 명	당초 사업비	재외후 사업비	제외 예산	제외 품명	비고
강남역교차로	3,168,000	1,254,000	-1,914,000	대형 안전표지판용(편주)
				대형편주기초제거300mm
양재역교차로	4,851,000	2,640,000	-2,211,000	대형 안전표지판용(편주)
				대형편주기초제거 300mm
				복구비평균
합계	8,019,000	3,894,000	-4,125,000

붙임 : 2015년 교통사고 잦은곳(강남역교차로, 양재역교차로) 물량 변경 후 설계내역서 1부.

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	박종근		기전과장	12/09 代허송욱
협조자	주무관	허송욱
시행	기전과-5911	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3284-5458	/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개