문서번호	정수시설과-5877
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김우승	代이정원	12/09 차윤기
협 조
	주무관		강석규

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

『광암아리수정수센터 준설공사』

준공기한 연기 보고

2015.  12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『광암아리수정수센터 준설공사』

준공기한 연기 보고

착수정‧배출수지 퇴적물 준설 공사와 관련하여 기상악화, 누수 및 지수불량등 으로 작업이 지체되어 준공기한 연장이 필요하기에 아래와 같이 보고합니다

1		공사개요

공 사 명 : 광암아리수정수센터 준설공사

공사기간 : 2015. 11. 26 ~ 12. 10

공사내용

착수정 준설물량 : 60㎥(90톤),

- 배출수지 준설물량 : 51㎥(77톤),

- 방류수조 : 2.6㎥(4톤)

계약금액 : 9,612,000원

공사업체 : 익선건설㈜  대표 한상헌

2		공사추진 현황

준설공사 추진내용(배출수지)

◯ 12/4(금) 준설물량:  16.92㎥ (25.380톤)   ◯ 12/5(토) 준설물량:  20.08㎥ (30.120톤)

◯ 12/6(일) 준설물량:  19.05㎥ (28.580톤)  ◯ 12/7(월) 준설물량:  15.80㎥ (23.700톤)

3		준설작업 문제점

□ 누수 및 배출수지 유입밸브 지수 불량으로 작업 중지 및 지체

◯  배출수지 준설 작업시 누수 및 배출수지 유입밸브 지수불량하여 2마력 펌프 2대로           설치한후 가동 양수 능력 부족, 샌드펌프 가동 양수불능 작업중지

◯ 5마력 펌프 2대 설치후 준설작업

◯ 양수작업 관계로 준설 작업시간 지체

□ 기상악화로 작업중지 및 지연

◯ 배출수지 준설 작업시 기상악화 작업중지 및 지연

4		처리의견

□ 누수 및 배출수지 유입밸브 지수불량등으로 펌핑작업시 시간소요 및 기상악화 등  으로 배출수지 작업 준설시 작업 지체되어 준공기한 연장 필요함

□ 착수정 준설시 준설물량 변동 될수 있어,준공기한 연장 필요.

※ 준공기한연기

당초	변경	사유	귀책사유	지연배상금
2015.11.26 ~ 2015. 12.10	2015.11.26 ~ 2015.12.24	누수 및 배출수지 유입밸브 지수 불량으로 작업중지와 우천 등 절대공기 부족 기한연기	발주처	없 음

5		행정사항

준공기간 연장 의뢰 : 정수운영과. 끝.