문서번호	시설보수과-9735
결재일자	2015.12.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	12/10 조병준
협 조
	주무관			유태용
	주무관			윤동원
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

'15년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고

(7~9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

2015년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(7~9차)

관내 도로시설물 손상에 대하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 (7~9차)결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)

나. 공사기간 : 2015. 4. 1 ~ 12. 31

다. 도 급 비 : 1,976백만원

라. 공사개요 : 포장보수 A=50.3a, 신축이음보수 L=114m, 강재도장

A=6,336㎡, 기타 1식

마. 도 급 자 : ㈜메트로종합건설 대표 김재신 외1

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

- 7차 작업지시『근거:시설보수과-7709호(2015.10.02)』

․ 작업기간 : 2015. 10.  5 ~ 11. 30

․ 작업완료 : 2015. 11. 25

- 8차 작업지시『근거:시설보수과-8318호(2015.10.23)』

․ 작업기간 : 2015. 10. 23 ~ 11. 30

․ 작업완료 : 2015. 11. 25

- 9차 작업지시『근거:시설보수과-8510호(2015.10.30)』

․ 작업기간 : 2015. 11.  3 ~ 12. 10

․ 작업완료 : 2015. 12.  4

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	지시내역	수량	완료내역	수량	비고
7차	1	도림천좌안 복개구조물	J72, 73 신축이음파손	신축이음장치 교체	17.2m	신축이음장치 교체	17.2m
	2		P105,234,P240	유도배수로 정비	3개소	유도배수로 정비	3개소
	3	시흥IC교	콘크리트 슬라브 열화	콘크리트 단면보수	120.0㎡	콘크리트 단면보수	120.0㎡
	4		주형강재 부식	중방식 도장	2,341㎡	중방식 도장	2,341㎡
	5	오목교	A1 교대벽체 누수	유도배수판 설치	20.0m	유도배수판 설치	20.0m
	6	가리봉철도 고가차도	A2 교대 출입금지시설설치	메쉬휀스설치	8경간	메쉬휀스설치	8경간
	7	오목교동측U턴 지하차도	동측지하차도 벽체오염	콘크리트 표면보수	46.0㎡	콘크리트 표면보수	46.0㎡
	8	개봉교	관리명판 망실	시설물관리명판 정비	2개소	시설물관리명판 정비	2개소
	9	화곡터널	투명방음판 파손	투명방음판 보수	1매	투명방음판 보수	1매
	10		옹벽부 안내표지	안내표지설치	2ea	안내표지설치	2ea
	11	안양교	포장면 및 슬라브상면파손	상판보수공	3.0㎥	상판보수공	3.0㎥
	12	관내시설물	민원처리, 관내순찰	긴급출동	11회	긴급출동	11회
8차	1	외발산지하차도	상부옹벽부 경계석 정비	무수축몰탈타설, 수밀코킹	790.0m	무수축몰탈타설, 수밀코킹	790.0m
	2	영등포R IC	P6~7보도부 비둘기서식	조류방지망 설치	532.0㎡	조류방지망 설치	501.0㎡
	3	도림천좌안 복개구조물	상부조인트부 누수	유도배수판설치	11개소	유도배수판설치	11개소
	4		배수홈통 낙수	배수홈통 유도설치	6개소	배수홈통 유도설치	11개소
9차	1	영등포R IC	교각부 점검통로 미설치P1~P3	점검통로 설치	104.0m	점검통로 설치	104.0m
	2		P1 배수관노후	배수관재설치	21.8m	배수관재설치	27.4m
	3	오목교	연석부 열화	콘크리트 표면보수	564.0㎡	콘크리트 표면보수	536.0㎡
	4	개화천복개구조물	슬라브하면 균열	콘크리트 균열보수	66.6m	콘크리트 균열보수	0m	작업여건곤란(진흙)
	5	오목지하차도		불량그레이팅 고재처리		불량그레이팅 고재처리	8,979㎏	추가
	6	천왕산생태터널		표지판설치		표지판설치	1식	추가

- 주요 변경사유

· 7차 12번 ⇒ 긴급업무지시(6월~9월)에 따른 출동 11회 반영

· 9차  4번 ⇒ 개화천복개구조물 하상에 물과 뻘이 있어 작업이 불가                      능한 상황으로 균열보수 66.6m는 2016년 2~3월 보수                     토록하고 금번 작업물량에서는 제외

· 9차 5번 ⇒ 4차 작업지시한 오목지하차도 스틸그레이팅 교체시 발                     생한 스틸그레이팅 뚜껑 8,979㎏ 고재처리 반영

· 9차 6번 ⇒ 구로구청 도로과의 민원발생 관련 천왕산생태터널 표지판                     1식(상하행선 2개소) 설치함

다. 개략공사비 : 673,860천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시 내용과 같이 작업을 완료하였으며 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서(7~9차) 1부(별첨)

2) 작업완료 보수사진 1부(별첨).  끝.