함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경시행(2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관정비공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 “신월동 55번지외 7개소 배급수관정비공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 : 윤석산업(주) 대표 이정남

다. 공사기간 : 2015. 04. 15. ~ 2015. 12. 12.

라. 예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비(배급수관)

마. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감 및 신공종 발생

바. 설계변경 내역                                          (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
도급비	계	421,702,390	361,570,000	감) 60,132,390	감) 14.0%
	공급가액	383,365,810	328,700,000	감) 54,665,810
	부가세	38,336,580	32,870,000	감) 5,466,580

붙  임 : 1. 설계변경 심의결과서, 변경합의서 각1부.

2. 설계변경보고서 1부.

3. 설계변경 내역서, 제비율검증대장 각 1부. 끝

주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	代유명은		강서수도사업소장	12/10 이상래
협조자	주무관	박현주		행정관리팀장	손창두		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-30879	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개