문서번호	설비부-15901
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		이달영	12/10 박기형
협조

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

전기공사 설계 변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

전기공사 설계변경 시행 보고

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』의 광원변경에 따른 설계비 및 공기연장에 대한 전기안전대행료를 반영한 설계변경 요청사항을 검토 하고 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

○ 규    모 : 수전설비 700KVA, 터널등 967등, 가로등 84등, 기타 1식

○ 공사기간 : 2012.08.02 ~ 2015.12.31.(4차 ‘15.2.13 ~ ’15.12.31)

○ 공 사 비 : 총차-1,116,383,000원(4차-180,318,240원)

○ 시 공 사 : ㈜진영전력 /감 리 사 : ㈜동명기술공단 종합건축사사무소

관련근거

○ 동기강(전) 2015-4698호(’15.12.09) 설계변경 검토 보고

보고내용

○ 설계변경 사유

<내역 변경>

- 선행공정 지연으로 공기연장에 따른 안전관리비 선임비용 반영

- LED 가로등으로 광원 변경에 따른 설계비 반영

- 제경비 적정요율 반영에 따른 금액 조정

<공사기간 연장>

- 선행공정인 토목공정의 방음벽 설치지연에 따라 후속 공정인 전기공사 진행이 어려운 실정으로 총차 및 4차 공사기간을 2016. 12.31까지 연장 필요.

○ 주요변경 사항

(단위:천원)

공 종	수량	변경사항		공사비		비고 (증감)
				당초	변경
전기안전대행료	1식		20개월→32개월	8,800	14,080	5,280
설계비	1식	-	CDM 등을 LED등으로 변경 설계 등		29,700	29,700
제경비	1식		안전관리비등 제경비 조정 반영		-10,610	-10,610
합 계				8,800	33,170	24,370

○ 공사금액 변경 : 증24,370천원

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	1,116,383,000	1,140,753,000	24,370,000
1 차	78,000,000	78,000,000	준공
2 차	676,168,760	676,168,760	준공
3 차	181,896,000	181,896,000	준공
4 차	180,318,240	204,688,240	24,370,000

○ 공사기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	‘12.08.02~’15.12.31	‘12.08.02~’15.12.31	12개월 증
4 차	‘15.02.13~’15.12.31	‘15.02.13~’15.12.31	12개월 증

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

감리검토 의견

○ 방음벽 설치 지연에 따른 공사기간 연장이 필요하고 이에 따른 안전관리자 선임비 추가 반영

○ 빗공해 심의에 따른 등기구 설계변경(CDM→LED) 용역비 반영

○ 기타 제경비요율 오류에 따른 조정 반영

○ 상기와 같이 검토한 결과 변경내용으로 계약함이 타당하다고 사료됨.

조치계획

○ 상기 설계변경 보고 사항을 검토한 결과 책임감리원의 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 설계변경하고자 하며

○ 서울시 재무과 및 건설총괄부에 설계변경계약 의뢰하고자 함.

따로붙임  : 설계변경 요청서 1부.   끝.