문서번호	생태공원과-2944
결재일자	2015.12.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
김일문		최병언	12/10 장상규
협 조

『한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리용역』

설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

공원부 생태공원과

『한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리용역』

설 계 변 경  보 고

우리본부에서 시행중인 『한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리용역』의 설계변경 보고서가 접수되어 검토하고 설계변경 시행하고자 함.

⇒ 서울시 시설관리공단 공사감독3처-12583(’2015.12.8)

용역개요

용 역 명 : 한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리용역

용역규모 : 건설폐기물 운반 및 처리(폐콘크리트, 폐아스콘, 기타 건설폐기물)

용역기간 : 2015.3.4. ~ 2015.12.14.(총차 ‘13.9.23 ~ ’16.12.14)

계 약 자 : 주식회사녹색사람들(처리), ㈜강북공영(운반)

감독부서 : 서울특별시 시설관리공단

용역 변경현황

금액 및 기간변경

(단위:원)

구 분	변 경 내 용								비고
	총괄	변경	1차	2차	3차			장래
					당․초	변․경	증·감
용역비	140,657,000	140,657,000	50,120,000	22,682,000	20,300,000	41,970,000	증21,670,000	25,885,000
용역 기간	’13.9.23. ~ ‘16.12.14		기준공		’15.3.5~ ’15.12.14	변경없음		~ ‘16.12.14

수량변경내용(총차)

공 종	내 용	공종	운반 및 처리(㎥)			도급비(천원)			비고
			당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
폐기물운반 및 처리	총차분	폐콘크리트	3,525	3,449	감) 76	119,910	117,290	감) 2,620
		폐 아스콘	358	358	-	12,667	12,667	-
		기타건설폐기물	38	38	-	8,080	8,080	-
		혼합건설폐기물	-	18	증) 18		2,620	증) 2,620
		총 계	3,921	3,863	감) 58	140,657	140,657

수량변경내용(1~3차)

공 종	내 용	공종	운반 및 처리(㎥)			도급비(천원)			비고
			당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
폐기물운반및처리	1차분	폐콘크리트	1,232	1474	증)242	41,898	50,120	증) 8,222	준공
		폐 아스콘	-	-	-	-	-	-
		기타건설폐기물	12	0	감) 12	2,542	0	감) 2,542
		혼합건설폐기물	-	-	-	-	-	-
		소 계	1,244	1,474	증)230	44,440	50,120	증) 5,680
	2차분	폐콘크리트	545	464	감) 81	18,539	15,775	감) 2,764	준공
		폐 아스콘	156	197	증) 41	5,511	6,907	증) 1,396
		기타건설폐기물	-	-	-	-	-	-
		혼합건설폐기물	-	-	-	-	-	-
		소 계	701	661	감) 40	24,050	22,682	감) 1,368
	3차분	폐콘크리트	597	1,157	증)560	20,300	39,350	증)19,050
		폐 아스콘	-	-	-	-	-	-
		기타건설폐기물	-	-	-	-	-	-
		혼합건설폐기물	-	18	증) 18	-	2,620	증) 2,620
		소 계	597	1,175	증)578	20,300	41,970	증)21,670
	장래분	폐콘크리트		354			12,045
		폐 아스콘		161			5,760
		기타건설폐기물		38			8,080
		혼합건설폐기물	-	-
		소 계		553			25,885

변경사유 : 본공사 콘크리트깨기 설계오류부분 정정 및 서래섬 목재데크 철거물량 반영에 따른 폐기물 운반 및 처리수량 변경

예산과목

한강공원이용 및 생태환경개선, 한강의자연성회복 및 시민편의개선, 한강생태계회복(복원), 한강생태공원확충(서래섬주변), 시설비(100-401-01)

조치의견

상기 변경내용과 같이 폐기물 정산분에 대하여 설계변경(정산)시행코자 함.

붙임 : 설계변경도서 1부.  끝.