과 장		12/10 최주용		심사자	문준호		설계자	신대중		설 계		심 사		결 재
										2015년 12월 일		2015년 12월 일
변 경 설 계 서
	공 사 명 : 2015년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경
	구 분					변 경 전			변 경 후		증 / 감		비 고
	총 공 사 비					￦38,886,418			￦45,810,000		△ \6,923,582
	도급비		공 급 가 액			￦35,351,289			￦41,645,454		△ \6,294,165
			부 가 가 치 세			￦3,535,129			￦4,164,546		△ \629,417
			계			\38,886,418			\45,810,000		△ \6,923,582
	관 급 비
	이 전 비
공사개요 : 1. 차단기교체설치 5개 → 140개 (증 135개) 2. 투광기세척 10개 → 682개 (증 672개) 3. 투광기교체 10개 → 2개 (감 8개) 4. CCL.LEDBAR교체 10개 → 12개 (증 2개)