문서번호	토목부-26550
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	12/10 노우성
협조
	주무관		강철규

교통안전표지 추가설치 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전표지 추가설치 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과를 반영한 교통안전표지 추가설치에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 유호(서울역)제15-26호(2015.12.7.) 실정보고(교통안전표지 설치)

○ 서울특별시 지방경찰청 교통관리과-32957호(2015.11.30.)

2015년 제11차 교통안전시설 심의결과 통보

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서울역 주변 5개소 교차로

○ 규    모 : 교차로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

- 서울역교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 숙대입구교차로, 숭례문삼거리(신설)

○ 공사기간 : 2015. 8. 7.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,385백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜

Ⅲ		보고내용

□ 교통안전표지 추가설치

➀ 보고사유

- 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 교통안전표지를추가설치하고자 함

- 추가설치 수량

·서울역 교차로   : 당초(교통안전표지 15개소)    → 변경(24개소)

·숙대입구 교차로 : 당초(교통안전표지 1개소)     → 변경(3개소)

·염천교 교차로   : 당초(교통안전표지 이설1개소) → 변경(설치1개소)

➁ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당초	변경	증·감	비고
서울역 교차로
도로안내표지판 설치	3방향표지	개소	-	2	2
도로안내표지판 철거	3방향표지	개소	-	1	1
삼각	1200고휘도,신설	개소	2	4	2
원형	900고휘도,신설	개소	10	11	1
T형 부착대	2매용,백관,신설	SET	3	5	2
사각	900*450	개소	-	1	1
2. 염천교 교차로
도로안내표지판 이설	현수식(185*135)	개소	1	-	1
도로안내표지판 설치	현수식(185*135)	개소	-	1	1
3.숙대입구 교차로
도로안내표지판 교체	185*135	개소	1	3	2

➂ 공사비 증·감 현황                             (단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
직접공사비	8,804,810	44,439,473	35,634,663
간접공사비	2,375,190	10,670,527	8,295,337
공급가액	11,180,000	55,110,000	43,930,000
부가가치세	1,118,000	5,511,000	4,393,000
도급비	12,298,000	60,621,000	48,323,000

- 단가적용 : 기계약단가 및 낙찰율 86.89% 적용

Ⅳ		조치계획

○ 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 교통안전표지 추가설치는 적정한 것으로 판단되므로 우선 설치토록하고, 추후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 시공사 실정보고 1부.  끝.