문서번호	토목부-26541
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		권혁대	12/10 노우성
협조

설계변경 검토보고

(신림~봉천터널 2공구, 5차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

설 계 변 경  검 토 보 고

[신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)]

「신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)」에 대한 5차(1회) 설계변경 검토보고임.

관련근거

○ 신성엔 제15-2195호(2015.12.10.) 5차 추가예산 반영 변경설계서 제출

사업개요

○ 위    치 : 관악구 신림동 393-1 ~ 봉천동 231-1(낙성대)

○ 개    요 : 폭원 왕복4차로, 연장 2.48km, 환기소 1개소

○ 공사기간 : 2010.10. 8. ~ 2017.12.31.(5차:2015. 2. 6. ~ 2015.12.15.)

○ 도 급 비 : 169,517,362천원(5차:6,410,000천원)

○ 시 공 사 : ㈜지에스건설 외 6개사

○ 감 리 단 : ㈜신성엔지니어링 외 3개사

감리단 보고내용

○ 1공구 사업물량 조정으로 확보된 예산으로 2공구 5차공사 설계물량 변경(환기소 환기갱 추가굴착(33M) 및 카리프트 설치비 등)한 내용에 대한 설계변경 내역서를 검토한 바 적정한 것으로 판단됨.

○ 변경내역

구 분	형식 및 규격		단위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증 감
토공	발파암		㎥	31,826	33,605	1,779
터널공	본선 굴착	구로방향	M	183	183	0
		차량갱	M	74	74	0
	환기소굴착	연직갱	M	40	40	0
		환기갱	M	54	87	33
		카리프트 설치	식	0.37	0.90	0.53
기타	부대공		식	1	1	0
제경비			식	1	1	-

○ 변경공사비

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감	비 고
5차공사		6,410,000,000	6,905,649,000	495,649,000
도 급 금 액	순공사비	4,579,281,882	4,971,150,938	391,869,056
	제경비	1,247,990,846	1,306,711,790	58,720,944
	부가가치세	582,727,272	627,786,272	45,059,000
	계	6,410,000,000	6,905,649,000	495,649,000

조치계획

○ 감리 검토의견과 같이 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 공사비 정산 등으로 확보한 예산을 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 5차공사에 추가 반영하여 설계변경(1회)하고자 함.

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감	비 고
5차	6,410,000,000	6,905,649,000	495,649,000

붙  임 : 감리검토서 및 설계변경내역서 각 1부.  끝.