투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경 시행[신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 총괄3회, 4차2회]

“신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)” 에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)

나. 공사개요 : 폭원 왕복4차로, 연장 3.1km

다. 계약금액 : 207,940,976,700원(4차분 449,240,000원)

라. 공사기간 : ‘10.10. 5. ~ ’17.12.31.(4차 ‘15.4.30. ~ ’15.12.15.)

마. 시 공 사 : 두산건설(주) 외 8개사

바. 예산과목 : 도시안전본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신림~봉천터널 건설, 시설비 및 부대비, 시설비

사. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총괄3회	도 급 비	207,940,976,700	208,278,976,700	증338,000,000
	공사기간	’10.10.5. ∼ ’17.12.31.	변경없음	-
4차2회	도 급 비	449,240,000	676,200,000	증226,960,000
	공사기간	’15.4.30. ∼ ’15.12.15.	변경없음	-

붙임	: 1) 검토보고서 1부.

2) 설계변경내역서(총괄3회, 4차2회) 2부.  끝.

	토목부장
주무관	조현형		터널건설과장	권혁대		토목부장	12/10 노우성
협조자	경리과장	박환
시행	토목부-26442	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 도시기반시설본부 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2566	/전송	02)3708-2599	/	unclejohh@seoul.go.kr	/	대시민공개