투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰

우리부에서 시행중인 『양재대로 녹지연결로조성 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 준공연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 용 역 명 : 양재대로 녹지연결로조성 기본 및 실시설계 용역

- 도 급 비 : 192,330천원

- 용 역 사 : ㈜유신 대표 성낙일

나. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2015. 6.19.~2015.12.31	2015. 6.19.~2016. 2.29.

다. 연기사유

- 본 용역을 2015. 6.19. 계약체결하여 과업수행을 진행중이나, 잔여 행정절차 이행(설계자문회의, 도시공원심의, 건설기술심의 등)에 따른 설계과업기간이 부족하여 과업수행 기간을 2016. 2.29.까지 연기가 필요.

붙임 : 1. 설계용역 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	윤원섭		토목설계과장	이승우		토목부장	12/10 노우성
협조자	주무관	강종희
시행	토목부-26490	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개