문서번호	방재시설부-16698
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		윤방식	12/10 임춘근
협조	경리과장		박환
	★환경설비과장		유병기

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총괄9회 및 7차1회) 검토 보고

2015. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총괄9회 및 7차1회) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역」에 대한 총괄9회 및 7차1회 설계변경 검토보고 임.

사업개요

❍ 용 역 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면채임감리용역

❍ 위    치 : 서울시 강서구 양천로 201(마곡동, 서남물재생센터내)

❍ 사업개요 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

❍ 용역기간 : 2009. 11. 30 ∼ 2016. 08. 31

❍ 시 공 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

❍ 도 급 비 : 10,567백만원

보고내용

<총괄9회 변경>

❍ 관련근거 : 방재시설부-15682호(‘15.11.24)『감리용역 계약금액 조정 승인(시설현대화 총인처리시설 반영)』

❍ 변경사유 : 시설현대화 총인처리시설 변경계약 및 착공에 따른 감리용역 과업추가로 계약금액 537,000천원 증액 함,

❍ 변경내역

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총괄9회	전체	10,567,400천원 (`09.11.30∼`16.08.31)	11,104,400천원 (`09.11.30∼`16.08.31)	증)537,000천원 (변경없음)
	서남	9,604,400천원 (`09.11.30∼`16.08.31)	10,141,400천원 (`09.11.30∼`16.08.31)	증)537,000천원 (변경없음)	총인과업 추가
	마곡	963,000천원 (`11.11.01∼`16.08.17)	963,000천원 (`11.11.01∼`16.08.17)	변경없음 (변경없음)

<7차1회 변경>

❍ 관련근거 : 방재시설부-14312호(‘15.10.27)『토목분야 보조감리원 추가투입 승인』

❍ 변경사유 : 서남시설현대화 총인처리시설 착공에 따라 품질·안전·원활한 현장관리를 위해 토목 보조감리원 추가투입으로 인한 감리용역기간을 조정 반영함(※ 금액변동 없음)

❍ 변경내역

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
7차 1회	전체	1,213,100천원 (`15.05.04∼`16.08.17)	1,213,100천원 (`15.05.04∼`16.08.17)	변경없음 (변경없음)
	서남	858,400천원 (`15.05.04∼`16.02.08)	858,400천원 (`15.05.04∼`16.01.30)	변경없음 (감9일)	투입기간 조정
	마곡	354,700천원 (`15.05.04∼`16.08.17)	354,700천원 (`15.05.04∼`16.08.17)	변경없음 (변경없음)

조치의견

❍ 총괄9회 변경은 총인처리시설 추가과업으로 감리비(증 537,000천원)를 반영하여 11,104,400천원으로 변경 계약하며,

○ 7차1회 변경은 서남용역분에서 총인처리시설 착공으로 보조감리원 추가투입에 따라 용역기간을 조정(감9일)하여 금액변경 없이 감리용역을 수행코자 함. (※ 마곡재생수 공급시설 설치공사의 감리용역은 변경 없음)

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 설계변경(총괄9회 및 7차1회) 내역서 각 1부. 끝.