문서번호	기전과-12029
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		이영목	11/30 노영석
협조
	주무관		박정민

『2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)』

추진사항 변경 검토 보고

2015. 11

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)』

추진사항 변경 검토 보고

시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 추진하고 있는 교통신호기 공사에 대해 품의가능한 집행잔액 및 하반기에 추가로 배정된 혜화문, 소방관서 긴급출동 신호시스템사업 추진방향을 수립하고 보고드림.

□ 예산배정현황

○ 2015. 6.17 교통신호기분야 사업추진을 위한 추가 예산배정(교통운영과)

※ 추가배정액 : 270백만원(통합지주 200, 유지보수 50, 보행신호보조 20)

집행완료액 : 234백만원(통합지주 184, 유지보수 50)

집행잔액   :  36백만원(통합지주 16, 보행신호보조 20)

○ 2015.10.19  종로구 혜화문 앞 교통신호기 예산배정(한양도성도감)

※ 추가배정액 : 56백만원(시공비 46, 감리비 5, 설계비 5)

○ 2015.11.19.  2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템 예산배정(교통운영과)

※ 추가배정액 : 73백만원

□ 사업개요

구 분	1구역(종로,강북,성북)	2구역(도봉,노원)
공 사 명	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사 (연간단가)(북부-1구역)	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사 (연간단가)(북부-2구역)
공사기간	2015.3.20 ~ 2015.12.31	2015.3.18 ~ 2015.12.31
도급업체	㈜대동전력 대표 김종진	㈜영선전설 대표 송영훈
도 급 비	금535,000,000원	금485,000,000원
공 정 률	99%	99%
진행사항	제6차 작업 완료 제7,8차 작업대상 설계 중	제5차 작업 완료 제6,7차 작업대상 설계 중
설계업체	(주)동림티엔에스 대표 이탁수 (교통운영과 발주)
감리업체	(주)대영유비텍 대표 조근환 (교통운영과 발주)

□ 교통안전시설물 예산집행 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		예산배정액 (A)	원인행위액 (B)	계약금액 (C)	집행잔액 (D)=A-C	품의가능예산 (집행잔액)	비고
총 액		1,699,689	1,495,358	1,483,376	216,313	216,313
교통신호기1구역 (종로,강북,성북)	도급비	535,000	535,000	535,000	-	-
	이전비	10,000	10,000	10,000	-	-
교통신호기2구역 (도봉,노원)	도급비	485,000	485,000	485,000	-	-
	이전비	10,000	10,000	10,000	-	-
교통안전시설물 통합설치공사	도급비	200,000	184,391	184,391	15,609	15,609	1구역
관급자재 (제어기,신호등,신호등주)	자재비	270,967	270,967	258,985	11,982	11,982	1구역
보행신호 보조장치(1구역)	도급비	20,000	-	-	20,000	20,000	1구역
예산잔액	도급비	40,033	-	-	40,033	40,033	1구역
사망사고줄이기 (교통-방학119)	도급비	72,783	-	-	72,783	72,783	2구역
한양도성보수 (일반-혜화문)	도급비	45,647	-	-	45,647	45,647	1구역
	설계비	5,320	-	-	5,320	5,320
	감리비	4,939	-	-	4,939	4,939

□ 예산잔액 집행

○ 예산잔액 : 40백만원

○ 사용 필요성

- 교통신호기 설치 및 보수공사 계약금액 중, 현재 교통신호기 시설물 유지보수와

서울경찰청 교통규제 처리, 음향신호기 보수, 긴급 민원처리 등에 계약금액         의 대부분을 집행한 상태임.

- 현재 1구역(종로,강북,성북)은 3백만원, 2구역(도봉,노원)은 2백만원 정도의

도급비 잔액이 남아 있는 실정으로, 2015년 12월 말까지 교통신호기 유지보수 및

긴급 민원처리 등을 위하여 사용할 추가 공사비가 필요함.

□ 진행잔액 및 추가배정 예산 사용 계획

- 전체 배정액 1,571백만원에서 교통안전시설물통합공사 집행잔액, 관급자재         집행잔액, 보행신호보조장치, 예산잔액 등 총 88백만원은 1구역 유지보수 및       긴급민원처리에 사용하고

- 금번에 추가배정된 예산은 해당구역에 맞춰 사망사고줄이기 73백만원은           2구역으로 배정하고, 혜화문앞 횡단보도 신설 관련 56백만원 중 설계비

5백만원, 감리비 5백만원을 제외한 도급비 46백만원은 1구역에 배정코자 함.

- 설계비와 감리비는 해당업체(연간단가)로부터 고지서를 받아 지출예정.

□ 예산배정 계획

(단위 : 원)

공 사 명	구 분	총 공사비		증・감	비고
		변경(전)	변경(후)
총 액		1,040,000,000	1,246,053,320	(증) 206,053,320	집행잔액 및 추가예산 활용
1구역 (종로,강북,성북)	도 급 비	535,000,000	668,270,320	(증) 133,270,320
	이 전 비	10,000,000	10,000,000	-
	총공사비	545,000,000	678,270,320	(증) 133,270,320
2구역 (도봉,노원)	도 급 비	485,000,000	557,783,000	(증) 72,783,000
	이 전 비	10,000,000	10,000,000	-
	총공사비	495,000,000	567,783,000	(증) 72,783,000

‣ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기신설및보수

시설비(401-01)(87,623,320원)-1구역

한양도성도감, 한양도성보존관리활용, 한양도성보존정비, 한양도성보수·정비

시설비(401-01)(45,647,000원)-1구역

교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 교통사망사고줄이기

시설비(401-01)(72,783,000원)-2구역

□ 보고자 조치의견

○ 현재 교통신호기 설치 및 보수공사(1, 2구역)의 도급비 잔액이 얼마 남지 않은

실정이며, 유관기관(교통운영과, 한양도성도감)으로부터 배정된 예산을 신규공사로      발주 시에는 출납폐쇄 기한(12월말)이 도래하여 공사시행에 많은 어려움이 예상

되므로 교통신호기 유지보수 연간단가를 활용하여 설계변경하고자 함.

붙임 : 1. 2015년 예산재배정(교통운영과,한양도성도감) 각 1부.

2. 예산집행 세부내역 1부.  끝.