문서번호	토목부-26573
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	12/11 노우성
협조
	주무관		강철규

교각 충격방지공 설치 등 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

교각 충격방지공 설치 등 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 서울역고가  교각에 충격방지공(충격흡수밴드)을 설치하고, 하부도로 우수시설 정비를 위한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 유호(서울역)제15-28호(2015.12.10.)실정보고(서울역 교차로 추가분 변경)

○ 서울특별시지방경찰청 교통관리과-32957호(2015.11.30.)

2015년 제11차 교통안전시설 심의결과 통보

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서울역 주변 5개소 교차로

○ 규    모 : 교차로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

- 서울역교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 숙대입구교차로, 숭례문삼거리(신설)

○ 공사기간 : 2015. 8. 7.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,385백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜

Ⅲ		보고내용

□ 교각 충격방지공(충격흡수밴드) 설치 등

➀ 보고사유

- 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 서울역고가 교각 충격방지공(충격흡수밴드) 설치

·설치수량 : 교각둘레(6.5m) × 4줄 × 5개소 = 130m

- 하부도로 우수시설 정비

·용산방향으로 확장된 도로 상에 위치한 기존 빗물받이를 이설(2개소)하고  맨홀을 설치(1개소)하고자 함.

➁ 현황

서울역고가 교각	우수시설 정비 계획

➂ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
서울역 교차로
충격방지공		m	-	130	130
빗물받이 설치	510*1010*900㎜	개소	-	2	2
흄관부설(기계)	소켓식 ∅=300㎜	m	-	10	10
흄관보호공	소켓식 ∅=300㎜	m	-	36	36
맨홀설치공	600*600㎜	개소	-	1	1

➃ 공사비 증·감 현황                             (단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
직접공사비	-	9,139,096	9,139,096
간접공사비	-	3,100,904	3,100,904
공급가액	-	12,240,000	12,240,000
부가가치세	-	1,224,000	1,224,000
도급비	-	13,464,000	13,464,000

- 단가적용 : 기계약단가 및 낙찰율 86.89% 적용

Ⅳ		조치계획

○ 서울특별시지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따른 교각충격방지공 설치 등은 적정한 것으로 판단되므로 우선 설치토록하고, 추후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 시공사 실정보고 1부.  끝.