문서번호	도로보수과-5594
결재일자	2015.12.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	12/11 이종엽
협조

설계변경(최종정산) 검토 보고

노후포장도로 정비구간내 노면표시 정비공사(2구역)

2015. 12. 11

성동도로사업소

(도로보수과)

설계변경(최종정산) 검토 보고

노후포장도로 정비구간내 노면표시 정비공사(2구역)

하반기 노후포장도로 정비계획에 의거 포장구간에 대한 노면표시 복구를 완료하고 실 시공 수량으로 정산처리하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 노후포장도로 정비구간내 노면표시 보수공사(2구역)

○ 규    모 : 차선도색 83,019m

○ 계약금액 : 금296,948,000원

○ 계 약 자 : ㈜건인씨앤알 대표 차 창 진

○ 공사기간 : 2015. 5. 21 ~ 2015. 12. 15

○ 공 정 률 : 100%

▢ 보고내용

○ 하반기 노후포장도로 정비계획에 의거 포장구간에 대한 노면표시 복구를 완료하고 실 시공 수량으로 정산처리

▢ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
소 계			83,019	80,333	감 2,686
차선도색		m	83,019	80,333	감 2,686

○ 변경금액

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	301,948,000	283,580,000	감 18,368,000
도급비	296,948,000	283,580,000	감 13,368,000
관급비	-	-	-
이전비	5,000,000	0	감 5,000,000

▢ 향후계획

○ 2015.  12. 15 : 공사준공 예정

첨  부 : 1. 설계변경내역서 1부

2. 제비율검증결과 1부.  끝.