문서번호	정수시설과-3718
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
강석윤		12/11 代김석정
협조

기계설비 유지보수 공사(연간단가)

설계변경 심의결과 보고

2015. 12.

구의아리수정수센터

정수시설과

기계설비 유지보수 공사(연간단가)

설계변경 심의결과 보고

기계설비 유지보수 공사(연간단가) 시행 중 물량의 증·감 및 신규공정에 대한 설계변경 심의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		사업현황

□ 공사개요

❍ 사 업 명: 구의정수센터 기계설비 유지보수공사(연간단가)

❍ 사업기간: 2015. 04. 15. ∼ 2016. 03. 31.

❍ 계약금액: 금48,970,700원

❍ 계 약 자: ㈜범강기연 김영기

❍ 공사규모

- 착수정 분말활성탄 투입배관 철거

- 응집기(6-1, 1-3) 메인축 교체 및 응집기(6-1) 감속기 교체

- 여과지 지별 표세밸브 및 유압식 전동작동기 교체

- 침전지 와이어로프 교체, 농축조 안전로프 설치

- 2차 농축조 슬러지 유입배관 및 각종 배관설비 교체

2		설계변경 사항

□ 설계변경 사유

❍ 작업지시 물량 증·감 및 신규공정 발생

❍ 보험료 등 제경비 정산

❍ 계약물량의 96%가 완료되어 계약기간 변경(단축) 필요

□ 설계변경 내용

❍ 계약기간

- 당 초: 2015. 4. 15 ∼ 2016. 3. 31

- 변 경: 2015. 4. 15 ∼ 2015. 12. 31

❍ 계약금액

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	48,970,700	47,366,000	감)1,604,700

❍ 주요 물량변경 내역

구 분	공 종	금 액
물량 감소	응집기 감속기 및 부품교체외 3건	감)5,207,828
물량 증가	1차 원형농축조 슬러지수집기 수리외 2건	증)4,594,839
제경비 정산	보험료 정산 및 공사원가 변경분	감)991,711
계		감)1,604,700

3		심의결과

□ 설계변경의 타당성: 타당

□ 증·감 물량 및 제잡비 산정과 적용 적정성 여부 : 적정

□ 각종 제반규정 준수여부: 준수

4		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.