투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	물품구매 물량 변경계약 및 납품기한 연기요청(화강석)

1. 시설과-3625(2015.5.18.)호 및 공원운영과-22925(2015.12.3.)호와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사와 관련, 화강석 구매 건에 대하여 아래와 같이 물량 변경계약 및 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사 화강석 구매

나. 물량 변경내용

구분	물품식별 번 호	품명	규격	단위	수량	금액(원)	비고
계							감) 210,000원
당초	20149591	장대석(포천석)	300×300× 1000, 잔다듬	개	308	40,040,000	증) 6개 (증 780,000)
변경					314	40,820,000
당초		통석의자(고흥석)	1500×450× 500, 물갈기, 거친정다듬	개	24	15,360,000	변경 없음
변경					24	15,360,000
당초		가공경계석 (고흥석)	200×250× 1000, 거친정다듬	개	210	23,100,000	변경 없음
변경					210	23,100,000
당초		가공경계석B (고흥석)	200×250× 1000, 거친정다듬	개	9	990,000	감) 9개 (감 990,000)
변경					-	-
당초		가공낮춤경계석 (고흥석)	200×250× 1000, 거친정다듬	개	7	774,200	변경 없음
변경					7	774,200

다. 납품기한 연기

- 당 초 : 2015.12.31

- 변 경 : 2016. 9.30

라. 변경사유 :  현장여건 변화에 따른 물량 변경 및 장래 차수(2차) 공사시행에                                    따른 납품기한 연기.

붙임 : 관급자재 변경 현황 1부.  끝.

품의필 NO (2015.12.11.) 시설과, 남상국

	시설과장
조경팀장	남상국		시설과장	12/11 김한준
협조자
시행	시설과-9254	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5966	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개